설계변경사유서

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 2016년 북부관내 포장도로 굴착복구공사-2차

○ 공사개요 : 아스팔트 포장 129a, 콘크리트 포장 6a, 보도블럭 포장 9a

○ 공사기간 : 2017. 3. 31 ~ 6. 30.

○ 도 급 액 :                                                      (단위 : 원)

구 분	당 초	변 경	증 ‧ 감
총 부기금액 (계약금액)	697,394,100	461,670,000	감) 235,724,100

○ 도 급 자 : 한림토건 대표 이현숙

○ 감 리 자 : (주)이준엔지니어링  최종열

□ 설계변경 세부내용 및 사유

○ 신규공종 및 시공물량 증·감에 따른 설계변경

○ 주요공종 변경현황

구분	공 종	변 경 내 역		비 고
		당 초	변 경
주요 변경물량	아스팔트 포장절단	591m	682m	감
	기계터파기(0.18㎥)	665㎥	197㎥	감
	기계터파기(0.4㎥)	692㎥	1157㎥	증
	아스팔트절삭(노면파쇄기, t=5cm, 2차로)	6a	0㎥	감
	아스팔트절삭(노면파쇄기, t=5cm, 4차로)	1a	0㎥	감
	아스팔트절삭(노면파쇄기, t=5cm, 6차로)	1a	0a	감
	아스팔트포장(소폭띠모양, 일당10㎡이하(t=12.5cm)	8a	0a	감
	아스팔트포장(소폭띠모양, 일당50㎡이하(t=12.5cm)	10a	16.01a	증
	CONC-기계비빔타설(t=15cm, 10㎡이하)	1a	0.43a	감
	고압블록복구(띠복구)	2a	0.29a	감

○ 건강 및 노인장기요양보험료, 연금, 퇴직공제부금 실납부 금액 정산 반영

○ 기타 실시공 수량에 따른 변경

* 세부내용 : 별첨 내역서 참조

□ 처리의견

○ 상기 공종변경에 따라 설계변경 심의위원회 심의결과에 의거 처리하고자 합니다. 끝