설계변경 사유서

1. 공 사 현 황

가. 공 사 명 : 2018년 관내 포장도로 굴착복구공사(연간단가)-북부

나. 공사개요 : 소규모 포장복구 70a, 절삭후 덧씌우기 560a

다. 도 급 비 : 1,503,580,000원

라. 공사기간 : 2018. 03. 15 ~ 2018. 12. 31

마. 도급업체 : 기경건설㈜  대표  강용석

2. 설계변경 사유

○ 유관기관 도로굴착복구의뢰 물량 증가에 따른 공종별 수량 조정

○ 주요 변경내역

공 종	규 격	단위	수 량		증 ․ 감	비 고
			당 초	변 경
소규모 포장복구	야 간(t=80cm)	a	75	125	증) 50
절삭 후 덧씌우기	야 간(t=5cm)	a	580	305	감) 305

3. 설계변경 금액

구 분		당 초 금 액	변 경 금 액	증 감	비고
총 공 사 비		2,601,000,000	2,601,000,000	-
도급비	공급가액	1,366,890,910	1,661,345,455	증) 294,454,545
	부가가치세	136,689,090	166,134,545	증) 29,445,455
	계	1,503,580,000	1,827,480,000	증) 323,900,000
관 급 비		898,580,000	574,680,000	감) 323,900,000
이 전 비		198,840,000	198,840,000	-

4. 조치계획

○ 상기 검토보고 내용과 같이 수량 증ㆍ감에 따른 설계변경코자 함.