설 계 변 경  사 유 서

용 역 명: 2020/2021년 구 제설대책 민간위탁 용역(장기계속)

용역개요

□ 용역기간: [총차] 2020. 11. 5. ~ 2021. 3. 31. [1차] 2020. 11. 5. ~ 2021. 2. 10.

□ 계 약 자 : 양지기초건설(주) 대표 백종일

□ 주요 변경 내용

- 주요 공종 증·감

공 종	단위	총차			1차			비고
		당초	변경	증‧감	당초	변경	증‧감
작업원(주간)	시간	576	1,982	증)1,406	344	1,982	증)1,638
중기작업원(주간)	시간	416	911	증) 495	248	911	증) 663
덤프트럭(15톤,가동,주간)	시간	320	1,865	증)1,545	192	1,865	증)1,673
유압식백호우(0.6㎥,가동,주간)	시간	96	730	증) 634	52	730	증) 678
크레인트럭(25톤,가동,주간)	시간	-	91	증) 91	-	91	증) 91	신규
덤프트럭(4.5톤,가동,주간)	시간	-	528	증) 528	-	528	증) 528	신규
바브켓(가동,주간)	시간	-	272	증) 272	-	272	증) 272	신규
유압식백호우(0.18㎥,가동,주간)	시간	-	588	증) 588	-	588	증) 588	신규

사    유

□ 2021. 1. 6. 폭설로 인한 잔설처리 긴급 투입 장비 물량 반영

□ 제설대책 개선방안(구청장 방침)에 따른 투입 장비 물량 반영

□ 폭설 등으로 제설대책 비상근무 발령에 따른 실제작업 및 대기 시간 반영

2021.  2.  8.

도로관리과장  이 한 규 (인)

강남구(분임)재무관  귀하