설계변경 사유서

1. 공사개요

◦ 공 사 명 : 강북정수센터 천정텍스 철거 및 설치공사

◦ 계약업체 : ㈜만영건설 안흥식

◦ 공사기간 : 2014. 10. 22 ~ 12. 10

◦ 공사개요

- 철거 및 재설치 : 3,049㎡

◦ 공사비(도급비)

- 당초 : 154,534,100원

- 변경 : 150,330,000원

2. 설계변경 사유

가. 주요공종 변경사항

- 당초 시공위치 변경에 따라 시공수량 감소

- 건강, 연금 및 노인장기요양보험료 미지급에 따른 정산

나. 주요물량 변경사항

공 종	규격	단위	수 량		증, 감
			당 초	변 경	증	감
텍스철거	천정	㎡	3,049	3,032	-	17
텍스설치	천정	㎡	3,049	3,032	-	17
건강보험료	1식	원	1,408,572	0	-	1,408,572
연금보험료	1식	원	2,063,144	0	-	2,063,144
노인장기요양보험료	1식	원	92,261	0	-	92,261