공사 설계변경 사전심사 요청서

안건번호	제2021- 호
구 분	토목(수도)

공 사 명	2020-1년 용산구 관내 상수도공사(장기계속공사)

심의일시: 2021. 08. 20. (금)

심의장소: 급수운영과(3층) 사무실

요 청 기 관 명	중부수도사업소(급수운영과)
제 출 일	2021년 8월

설계변경 심의 설명서

1. 공사개요

가. 공 사 명: 2020-1년 용산구 관내 상수도공사(장기계속단가계약)

나. 공사개요: 증 333

(당 초)  D=13〜300㎜, L=305m (변 경) D=15〜300㎜, L=638m

다. 공사기간: 2021. 03. 31. ~ 2020. 08. 31.

라. 계약상대자: 루시이엔씨(주) 대표 강성현

마. 설계변경금액(도급비): 증 1,331,490원

- (당초금액) 257,968,510원  (변경금액) 259,300,000원

2. 설계변경 및 총 부기금액 증가 사유

가. 설계변경 근거

‣ 지방자치단체를 당사자로하는 법률 시행령 제74조 제1항

‣ 공사계약일반조건 제6절 【공사설계의 변경】 및 제7절 【계약금액의 조정】

‣ 공사 시행중 현장여건 변동에 따른 물량 증ㆍ감 및 신규비목 발생됨에 따라 설계변경

나. 설계변경 사유

‣ 본청 및 본부 계약심사(설계변경 심사대상)에서 제외되므로 자체 설계변경 심의의원회를 개최하여 설계변경

‣ 공사 시행 중 현장여건 변동에 따른 물량 증∙감 및 신규비목 발생됨에 따라 설계변경

- 물량 증가 : 아스팔트포장깨기 등 162개 공종

- 물량 감소 : 인력 터파기 등 442개 공종

‣ 신공종 발생

- 신규공종 : 파쇄물 걷기 및 싣기 등 21개 공종

3. 설계변경 세부내용

가. 물량 증․감 : 고압블록 포장걷기 외 603개소 공종

공 종	구분	규 격	단 위	당 초	변 경	증․감
터파기(기계100%)불량	주간	굴삭기 0.4㎥	㎥	61	381	증 320
A-파쇄물운반(0.4상차비별도)	주간	4.5DT(현장->집하장3km)	㎥	5	88	증 83
잔토소운반(0.4터파기동시상차)	주간	4.5DT,(현장->집하장3km)	㎥	12	162	증 150
환토상차(집하장)	주간	견질토사 0-1m,지세할증	㎥	111	304	증 193
아스팔트 포장절단	주간	200mm이하,지세할증	㎥	402	1076	증 674
되메우기(기계100%)양호	주간	굴삭기 0.4㎥환토재,지세할증	㎥	23	228	증 205

나. 신규공종 : 아스팔트포장깨기 외 20개소 공종

공 종	구분	규 격	단 위	비고
분기점 새들분수전 잠금	주간	30mm	개소
주철(이형관)부설공	주간	250mm	개소
K.P죠인트관 접합공	야간	200mm	개소
철개굴상 및 교체공	야간	KS D=648	개소
외 기타 신규공종 16개 공종은 설계변경 당시 설계단가에 낙찰율(86.747%) 적용

다. 단가적용

‣ 물량증감에 대한 적용단가 : 계약 당시 단가로 적용

‣ 신규공종 및 자재에 대한 적용단가 : 설계변경 당시 설계단가에 낙찰율(86.747%) 적용

4. 설계변경금액 내용

구분	당초 계약금액	변경 계약금액	증 ․ 감	비 고
총 부기금액	257,968,510원	259,300,000	증)1,331,490

가. 변경내역서에 대한 물량 계산, 제잡비 요율 및 내역등을 검토한 바 적정함.

나. 검토근거 : 지방자치단체를 당사자로하는 계약에 관한 법률 시행령 제74조

(설계변경으로 인한 계약금액 조정)

5. 조치의견

가. 위와 같이 물량 증․감 ,신규공종 발생 등으로 인한 도급액 증가로 인하여 변경사항이 발생함에 따라 변경내역을 설계변경 심의위원회 심의결과에 의거 행정지원과에 계약의뢰 하고 붙임내역과 같이 설계변경을 시행코자 합니다.

따로붙임  1. 설계변경 내역서 1부.

2. 설계변경 사전심의 의결서 1부.  끝.

설계변경 사전심의 의결서

○ 공 사 명 : 2020-1년 용산구 관내 상수도공사(장기계속단가계약, 최종)

○ 상기 공사시행 중 현장여건 변화에 따른 물량증․감, 신규공종 발생하여 따로붙임과 같이 설계변경 및 총 부기금액(도급비) 증액하고자 계약물량 증․감 및 적용단가의 적정성 여부를 심의하여 의견을 제시하고 의결함.

□ 심의위원회 의결내용 : 본안통과, 보류, 부결, 기타

구 분	성 명	의 견	확 인	비 고
위 원 장	급수운영과장 채 재 일
위 원	시설6급 이 훈 재
위 원	시설6급 이 유 찬
위 원	시설6급 유 세 종
위 원	시설6급 김 종 수
간 사	시설6급 박 장 진

2021. 08. 20.

(간  사)  진행자 : 급 수 운 영 팀 장   성명 : 박 장 진

(입회자)  업무담당자 : 급 수 운 영 과   성명 : 박 재 성

한국종합기술 감리책임자   성명 : 박 종 승