설계변경(4차) 사전심의 설명서

접수번호	제 호

공사명	2013년 강동수도사업소 관내 긴급누수복구공사(단가계약)

심의일시 : 2014. 4. 25

심의장소 : 회의실(2층)

강동수도사업소

(시설관리과)

설계변경사유서(4차)

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 2013년 강동수도사업소 관내 긴급누수복구공사(단가계약)

○ 공사규모 : 당초 D = 13 ~ 2,200㎜, N = 1,000개소

변경 D = 13 ~ 2,200㎜, N = 1,000개소

○ 공사기간 : 2013. 04. 11. ~ 2014. 06. 30

○ 도 급 비 : 당초 ￦1,239,491,000원(일십이억삼천구백사십구만일천원)

변경 ￦1,239,491,000원(일십이억삼천구백사십구만일천원)

○ 도 급 자 : 심성건설(주) 대표 조 석 심

○ 계약금액조정 대상금액 : 계약금액 변동 없음

□ 설계변경 세부내용 및 사유

※ 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제74조 2항 및

공사계약 일반조건 제7절 나항

○ 계약물량 변경

- 물량증가 공종 : 콘크리트 포장절단 100~150mm누수(야간)외 125개 공종

- 물량감소 공종 : 아스팔트 포장절단 100~150mm누수외 170개 공종

- 신규공종 발생 : 클램프접합공(350mm누수)외 15개 공종

- 신규자재 : 새들캡 13mm외 5개 공종

□ 설계변경 금액내역                                         (단위 : 원)

공 종	변경 내용		변경 사유	비 고
	당 초	변 경
계	1,239,491,000	1,239,491,000
토 공	270,742,313	244,713,825	- 공종별 물량 증,감 - 신공종 및 자재
부설공	168,473,863	163,579,188
구조물공	19,176,289	14,892,787
부대공	161,053,717	155,766,019
사급자재	92,437,860	71,873,760
포장공	37,625,909	20,410,789
기타	489,981,049	568,254,632

붙 임 : 설계변경 내역서 1부.  끝.

□ 심의 위원회 의견서

○ 공 사 명 : 2013년 강동수도사업소 관내 긴급누수복구공사(장기계속단가계약)

○ 심의일시 : 2014. 4. 25

○ 심의의견 : 설계변경에 따른 심의 결과를 아래와 같이 의견을 제시함.

구 분	성 명	의 견	확 인
위원장	시설관리과장
위 원	급수운영과 (박종찬)
위 원	급수운영과 (김용현)
위 원	시설관리과 (송근호)
위 원	시설관리과 (가재덕)
간 사	시설관리과 (송종범)