설계변경 사전심의 설명서

접수번호	제 호

공사명	한영중학교외 3개소 아리수 직결음수대 배관설치 공사

심의일시 : 2014. 11. 14

심의장소 : 회의실(2층)

강동수도사업소

(시설관리과)

설계 변경 사전심의 설명서

□ 공사현황

○ 공 사 명 : 한영중학교외 3개소 아리수직결음수대 배관설치공사

○ 공사기간 : 2014.08.19 ~ 2014.11.16

○ 도 급 자 : (주)태화크린텍 대표 박진학

○ 도 급 비(당초) : 28,849,070원

○ 도 급 비(변경) : 24,818,000원

○ 시행부서 : 강동수도사업소 시설관리과

○ 설계변경 검토부서 : 강동수도사업소 시설관리과

□ 설계변경 내용

○ 공사내역 변경

구 분	부설 연장(m)		증․감 (m)		비 고
	당 초	변 경
13~30mm	334	289	감	45	거리 단축으로 물량감소

○ 공사금액 변경

구 분	금 액 (원)		증 ․ 감 (원)	비 고
	당 초	변 경
총 공 사 비	28,849,070	24,818,000	감) 4,031,070
도 급 비	28,849,070	24,818,000	감) 4,031,070
음수대	11	11	-	본부 일괄 구매

□ 설계변경 사유

○ 계약물량 변경 및 신규공종

- 계약물량 감소 사항 발생 : 절연행거(수도.강제전선관지지용) D15mm 외 35개 공종

- 계약물량 증가 사항 발생 : 가교발포폴리에틸렌보온(난연/은박,슈퍼매직마감)외 21개 공종

- 신규공종 사항 발생 : 코아드릴(벽) D=32~50  CON두께 150㎜ 기준

□ 설계변경 심의내용

○ 설계변경 사항 타당 여부

○ 변경물량 및 신규단가 산출, 적용 등의 적정 여부

붙  임 : 설계변경내역서 1부.  끝.