설계변경(4차) 사전심의 설명서

접수번호	제 호

공사명	2014년 강동수도사업소 관내 긴급누수복구공사(단가계약)

심의일시 : 2015. 2.

심의장소 : 회의실(2층)

강동수도사업소

(시설관리과)

설계변경(4차)사유서

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 2014년 강동수도사업소 관내 긴급누수복구공사(단가계약)

○ 공사규모 : 당초 D = 13 ~ 2,200㎜, N = 780개소

변경 D = 13 ~ 2,200㎜, N = 780개소

○ 공사기간 : 2014. 12. 12. ~ 2015. 1. 25

○ 도 급 비 : 당초 ￦1,077,873,600원(일십억칠천칠백팔십칠만삼천육백원)

변경 ￦1,077,873,600원(일십억칠천칠백팔십칠만삼천육백원)

○ 도 급 자 : (주)건설넷 대표 박정민

○ 계약금액조정 대상금액 : 계약금액 변동 없음

□ 설계변경 세부내용 및 사유

※ 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제74조 2항 및

공사계약 일반조건 제7절 나항

○ 계약물량 변경

- 물량증가 공종 : 아스팔트 포장절단 100~150mm누수외 233개 공종

- 물량감소 공종 : 아스팔트 포장절단 100~150mm누수(야간)외 244개 공종

- 신규공종 발생 : 보호통 철거공외 18개 공종

□ 설계변경 금액내역                                     (단위 : 원)

공 종	변경 내용		변경 사유	비 고
	당 초	변 경
계	1,077,873,600	1,077,873,600
토 공	256,739,571	246,912,460	- 공종별 물량 증감 신규공종
부설공	136,162,719	171,197,688
구조물공	6,559,298	10,367,902
부대공	156,663,593	121,450,091
포장공	12,181,299	16,517,555
사급자재	66,731,242	71,756,188
기타	442,835,878	439,671,716

붙 임 : 설계변경 내역서 1부.  끝.