공사 설계변경 사전심사 요청서

안건번호	제2014- 호
구 분	토 목

공 사 명	2014년 가산동외 9개동 상수도공사(장기계속단가계약)

심의일시 : 2014. 12. 18(목)

심의장소 : 급수운영과(3층) 사무실

요 청 기 관 명	남부수도사업소(급수운영과)
제 출 년 월 일	2014년 12월 18일

설계변경(2차) 심의 설명서

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 2014년 가산동외 9개동 상수도공사(장기계속단가계약)

○ 공사개요

- 당 초 : D=13~300㎜, L=2,521m

- 변 경 : D=13~300㎜, L=2,811m

○ 계약기간 : 2014.7.1. ~ 2015.6.30.

○ 계약금액 : 금564,164,130원

○ 계 약 자 : 혜솔건영 대표 정혜랑

□ 설계변경 근거

○ 지방자치단체를 당사자로 하는 법률 시행령 제74조

(설계변경으로 인한 계약금액 조정)

○ 지방자치단체 입찰 및 계약집행기준(예규 제34호)

(제13장 공사계약 일반조건 “6(공사설계의변경)-1(설계변경)-다”의 규정)

□ 설계변경 사유

○ 공사시행중 현장 시공여건 변화 및 연간단가계약 공사의 특수성으로 신규 공종 및 물량변동(증․감) 발생

- 부단수할정자관천공분기점분기(150mm)등 22개 공종 신규발생

- 주철직관부설공(100mm)등 462개 공종(자재) 물량변동

□ 설계변경 내역

○ 주요 신규공종

공 종	규 격	수 량			금 액(원)
		단위	당초	변경
누수방지대 부설 및 접합공	80mm,지세	개소	-	2	74,452
부단수할정자관천공분기점분기	150mm,지세	개소	-	3	545,016
원형밸브실설치공(기초재생PE)	80mm,지세	개소	-	2	1,115,020
가압장 설치	PC박스,B=2.5,L=6.1,H=2.44	개소	-	1	4,599,966
구형변실설치	내경2.0*6.0*2.2m	개소	-	1	3,689,578
방수몰탈바르기	벽,T=15mm	㎥	-	78	1,440,816
압착붙이기타일붙임	벽,바름두께5mm	㎥	-	36	1,609,308

○ 주요 물량 증․감

공 종	규 격	수 량			금 액(원)
		단위	당초	변경
인력터파기(용수,협소)	견질토사 1-2m(지세)	㎥	126	233	4,691,522
기계다짐(보통)	램머(80kg)	㎥	1101	1633	2,175,880
나사조임식이음관접합	30mm(지세)	개소	9	11	32,108
슬립조인트접합공	50mm(지세)	개소	127	277	2,273,100
주철직관부설공	100mm(지세)	m	456	596	620,200
타이튼조인트관 접합공	100mm(지세)	개소	68	87	201,343
원형밸브실 설치공(기초재생PE)	D=80,사각받침철개고정,지세	개소	2	1	△368,216

○ 계약금액 변경

구 분	금 액		증․감	비 고
	당초	변경
공급가액	512,876,482	512,876,482	0
부가가치세	51,287,648	51,287,648	0
도 급 비	564,164,130	564,164,130	0

붙임 : 설계변경내역서 1부.

설계변경(제2회) 사전심의 의결서

◦ 공 사 명 : 2014년 가산동외 9개동 상수도공사(장기계속단가계약)

◦ "2014년 가산동외 9개동 상수도공사(단가계약)" 설계변경(제2회)에 따른 사전심의 결과 다음과 같이 의견을 제시하고 의결함.

◦ 의결내용 : 본안통과  ․  보류  ․  부결

구 분	직 위	의 견	서 명
위 원 장	급수운영과장 장시명
위 원	시설관리과 고신석
위 원	시설관리과 김대성
위 원	시설관리과 김태식
간 사	급수운영과 강동길

◦ 설계변경에 대한 수급사 의견 :

공사담당 　　　         직 지방시설서기          성명 : 남철우 (인)

혜솔건영(대표 정혜랑)        현장대리인         성명 : 원광희 (인)

2014.	12.	18.