설계변경(1차) 사전심의 요청서

접수번호	제 호

공사명	2016년 강동구 관내 상수도 시설물공사(장기계속단가계약)

심의일시 : 2016. 12. 23.  17:00

심의장소 : 사업소 2층 회의실

강동수도사업소

(시설관리과)

설계변경 심의 설명서

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 2016년 강동구 관내 상수도 시설물공사(장기계속단가계약)

○ 공사개요

- 당초 : 밸브교체 102개소 등

- 변경 : 밸브교체 102개소 등

○ 공사기간 : 2016.06.27. ~ 2017.06.30.

○ 공사금액 : 금406,785,080원

○ 계약상대자 : 에이치에프건설(주) 대표 황행묵

□ 설계변경 세부내용 및 사유

○ 신규 공종 발생

- 플랜지접합공(600mm) 등 49개 공종

○ 물량변동

- 원형변실설치, 파쇄물 걷기 및 싣기 등 138개 공종

○ 설계변경 내역

(단위 : 원)

구 분	당초 금액	변경 금액	증 ․ 감	비고
도급비	406,785,080	406,785,080	금액 변동없음

붙임 : 설계변경 내역서 1부.  끝.

□ 심의위원회 의견

◦ 「2016년 강동구 관내 상수도 시설물공사(장기계속단가계약)」 설계변경에 따른   사전심의 결과 다음과 같이 의견을 제시함.

구 분	직 위	검토 의견	서 명
위 원 장	시설관리과장
위 원	김용현
위 원	임인택
위 원	한호진
위 원	황대룡
위 원	이혜진