설계변경 사전심의 요청서

접수번호	제 호

공사명	16년 독산동 378-242번지외 14개소 배급수관 정비공사

심의일시 : 2016. 12. 23.(금)

심의장소 : 3층 급수운영과 사무실

남부수도사업소

(급수운영과)

설계변경 사전 심의 설명서

□□ 공사개요

○ 공 사 명 : ’16년 독산동 378-242번지외 14개소 배급수관 정비공사

○ 공사개요

- 당 초 : D=20~300㎜  L=2,876m

- 변 경 : D=20~300㎜  L=2,783m

○ 공사기간 : 2016.5.4. ~ 2016.12.27.

○ 계약금액 : 금720,032,110원

○ 계 약 자 : (주)예스코서비스 대표 정성찬

□□ 설계변경 근거

○ 지방자치단체를 당사자로 하는 법률 시행령 제74조(설계변경으로 인한 계약금액 조정)

○ 지방자치단체 공사계약 일반조건(예규 제325호)“6(공사설계의변경)-1(설계변경)-다”의 규정

□□ 설계변경 사유

○ 공사 시행 중 현장여건 변화 및 공사 책임감독기관의 실정보고로 신규공종 발생 및

물량변동(증․감) 발생

□□ 설계심의(변경) 보고

○ 본 공사의 설계 변경사유 및 세부내용을 위와 같이 설명 드린 바, 단가산출의 적정성여부, 물량집계 등을 검토하여 의견을 제시하여 주시기 바랍니다.

○ 설계심의 보고자 : 급수운영과 지방시설주사보 최선보

붙 임 : 설계변경내역서(신규대가 및 사급자재 포함) 1부.  끝.

설계변경 사전심의 의결서

◦ 공 사 명 : ’16년 독산동 378-242번지외 14개소 배급수관 정비공사

◦ "’16년 독산동 378-242번지외 14개소 배급수관 정비공사" 설계변경에 따른 사전심의 결과 다음과 같이 의견을 제시하고 의결함.

◦ 의결내용 : 본안통과  ․  보류  ․  부결

구 분	직 위	의 견	서 명
위 원 장	급수운영과장 최 철 민
위 원	시설관리과 고 신 석
위 원	시설관리과 강 동 철
위 원	시설관리과 김 대 성
간 사	급수운영과 강동길

◦ 설계변경에 대한 수급사 의견 :

공사담당 : 지방시설주사보    성명 : 최 선 보 (인)

계 약 자 : (주)예스코서비스  대표   정 성 찬 (인)

2016.	12.	23.