설계변경 사전심의 요청서

접수번호	제 호

공사명	길동사거리~생태공원앞 간 송배수관 정비공사

심의일시 : 2014. 11. 12

심의장소 : 2층 소회의실

강동수도사업소

시설관리과

설계변경 사유서

1		공사현황

가. 공 사 명 : 길동사거리~생태공원앞 간 송배수관 정비공사

나. 공사기간 : 2014년 5월 29일 ~ 2014년 11월 17일

다. 도 급 액 : 438,573,760원

라. 공사개요 : D=150~400mm, L=1,335m

마. 계약상대자 : 태양토건㈜ 대표 맹준호

바. 발 주 청 : 강동수도사업소 시설관리과

2		설계변경사유

가. 공사 실정보고에 의한 주요 변경사항

1) 원형철개 받침을 사각받침에서 원형받침으로 변경(개략공사비 증5,038천원)

관련근거 ☞  공사감독2처-14697(‘14.09.02), 시설관리과-13826(‘14.09.04)

2) 경찰서 『도로공사 신고 확인서』 교통정리원 배치 관련(개략공사비 증1,760천원)

관련근거 ☞  공사감독2처-14804(‘14.09.03), 시설관리과-14332(’14.09.16)

3) 2구간 시점부 퇴수밸브 추가 설치(개략공사비 증3,267천원)

관련근거 ☞  공사감독2처-15545(‘14.09.19), 시설관리과-14739(’14.09.23)

나. 기타

1) 건강, 연금, 노인장기요양보험료 및 퇴직공제부금 정산(감 9,373천원)

2) 기타 현장여건 변동으로 인하여 실시공 수량 정산

3		공종 및 공사비 변경

가. 공종 변경(설계변경내역 참조)

공 종	단 위	당초수량	변경수량	증ㆍ감	비 고
잔토처리(주간)	㎥	2,321	2,307	감) 14
인력터파기(야간)-견질1~2m	㎥	302	207	감) 95
KP 죠인트접합공-400㎜(야간)	개소	209	152	감) 57
KP 이탈방지압륜 접합공 -400㎜(야간)	개소	212	273	증) 61
주철관 절단공-300㎜(야간)	개소	13	32	증) 19
부단수 분기공(강관) -800/400㎜(야간)	개소	-	1	증) 1
조명시설 설치 및 철거	회	68	28	감) 40
교통정리원(야간)	인	68	44	감) 24
경광등 설치 및 철거	시간	408	168	감)240

나. 공사비 변경

구 분	당 초	변 경	증ㆍ감
총 공 사 비	1,388,347,760원	1,388,347,760원	-
도 급 비	438,573,760원	414,029,000원	감) 24,544,760원
관 급 자 재 비	291,532,000원	312,292,000원	증) 20,760,000원
복구비 및 기타	658,242,000원	662,026,760원	증) 3,784,760원

설계변경 사전 심의의견서

◦ "길동사거리~생태공원앞 간 송배수관 정비공사“ 설계변경에 따른 사전 심의

결과 다음과 같이 의견을 제시함

구 분	직 위	의 견	확 인
위 원 장	시설관리과장 이 계 환
위 원	급수운영과 시설6급 이 경 재
위 원	급수운영과 시설6급 김 용 현
위 원	급수운영과 시설6급 한 호 진
위 원	시설관리과 시설6급 김 효 수
간 사	시설관리과 시설6급 송 종 범

2014.	11.	11.