공사 설계변경 사전심사 요청서

안건번호	제2014- 호
구 분	토 목

공 사 명	2013년 가산동외 9개동 상수도공사(장기계속단가계약)

심의일시 : 2014. 3. 7(금)

심의장소 : 급수운영과(3층) 사무실

요 청 기 관 명	남부수도사업소(급수운영과)
제 출 년 월 일	2014년 3월 6일

설계변경(2차) 심의 설명서

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 2013년 가산동외 9개동 상수도공사(장기계속단가계약)

○ 공사개요

- 당 초 : D=13~300㎜, L=1,996m

- 변 경 : D=13~300㎜, L=1,996m

○ 계약기간 : 2013.7.8. ~ 2014.6.30.

○ 계약금액 : 금559,452,582원

○ 계 약 자 : (주)고황 대표 김미숙

□ 설계변경 근거

○ 지방자치단체를 당사자로 하는 법률 시행령 제74조

(설계변경으로 인한 계약금액 조정)

○ 지방자치단체 입찰 및 계약집행기준(예규 제34호)

(제13장 공사계약 일반조건 “6(공사설계의변경)-1(설계변경)-다”의 규정)

□ 설계변경 사유

○ 공사시행중 현장 시공여건 변화 및 연간단가계약 공사의 특수성으로 물량변동(증․감) 발생

- 벽체계량기 설치공(13mm) 등 150개 공종(자재) 물량변동

□ 설계변경 내역

○ 주요 물량 증․감

공 종	규 격	수 량			금 액(원)
		단위	당초	변경
아스팔트포장깨기	굴삭기 0.4㎥(브레이카)	㎥	29	5	△314,832
토사절취	견질토사	㎥	82	104	343,200
인력터파기(용수,협소)	견질토사 0-1m(지세)	㎥	574	724	4,563,150
터파기(기계100%)불량	굴삭기 0.2㎥	㎥	946	563	△2,685,979
벽체계량기설치공	13mm	개소	869	1085	3,716,064
슬립조인트접합공	30mm	개소	182	231	324,478
주철직관부설공	150mm	m	494	417	△601,524
CONC포장(인력비빔)소폭띠모양	t=20,10㎡이하,(분산,지세)	a	0.5	0.1	△3,145,008
CONC포장(기계비빔)소폭띠모양	t=20,10㎡이하,(분산,지세)	a	0.7	0.1	△2,439,682
고압블록포장(소규모10㎡이하)	T=6~8cm,(분산,지세)	a	1	0.3	△808,411

○ 계약금액 변경

구 분	금 액		증․감	비 고
	당초	변경
공급가액	499,831,330	499,831,330	0
부가가치세	49,983,133	49,983,133	0
부지임대료	9,638,119	9,638,119	0
도 급 비	559,452,582	559,452,582	0

붙임 : 설계변경내역서 1부.

설계변경(제2회) 사전심의 의결서

◦ 공 사 명 : 2013년 가산동외 9개동 상수도공사(장기계속단가계약)

◦ "2013년 가산동외 9개동 상수도공사(단가계약)" 설계변경(제2회)에 따른 사전심의 결과 다음과 같이 의견을 제시하고 의결함.

◦ 의결내용 : 본안통과  ․  보류  ․  부결

구 분	직 위	의 견	서 명
위 원 장	급수운영과장 장 시 명
위 원	시설관리과 고 신 석
위 원	시설관리과 남 후 원
위 원	시설관리과 김 태 식
간 사	급수운영과 강 동 길

◦ 설계변경에 대한 수급사 의견 :

공사담당 　　　      직 지방시설서기           성명 : 남 철 우 (인)

㈜고황(대표 김미숙)        현장대리인          성명 : 홍 찬 기 (인)

2014.	3.	6.