설계변경(3차) 사전심의 설명서

접수번호	제 호

공사명	2014년 강동수도사업소 관내 긴급누수복구공사(단가계약)

심의일시 : 2014. 12.

심의장소 : 회의실(2층)

강동수도사업소

(시설관리과)

설계변경(3차)사유서

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 2014년 강동수도사업소 관내 긴급누수복구공사(단가계약)

○ 공사규모 : 당초 D = 13 ~ 2,200㎜, N = 780개소

변경 D = 13 ~ 2,200㎜, N = 780개소

○ 공사기간 : 2014. 06. 23. ~ 2014. 12. 31(총부기기간 : 2015.6.30.일까지)

○ 도 급 비 : 당초 ￦1,077,873,600원(일십억칠천칠백팔십칠만삼천육백원)

변경 ￦1,077,873,600원(일십억칠천칠백팔십칠만삼천육백원)

○ 도 급 자 : (주)건설넷 대표 박정민

○ 계약금액조정 대상금액 : 계약금액 변동 없음

□ 설계변경 세부내용 및 사유

※ 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제74조 2항 및

공사계약 일반조건 제7절 나항

○ 계약물량 변경

- 물량증가 공종 : 굴삭기 0.4㎥(브레이카)누수,야 외 132개 공종

- 물량감소 공종 : 아스팔트 포장절단외 60개 공종

- 신규공종 발생 : K.P 이탈방지압륜접합외 38개 공종

- 신규자재 : 이경소켓(슬립인죠인트)외 11개 공종

□ 설계변경 금액내역                                     (단위 : 원)

공 종	변경 내용		변경 사유	비 고
	당 초	변 경
계	1,076,873,600	1,077,873,600
토 공	269,757,151	240606395	- 공종별 물량 증감 신규공종 및 자재
부설공	110,724,036	176414517
구조물공	5,,544,190	10240256
부대공	163,280,954	127268027
포장공	16,863,085	13022303
사급자재	68,781,259	68498838
기타	441,922,925	441823264

붙 임 : 설계변경 내역서 1부.  끝.