한강공원 나들목 증설공사(옥수)

설 계 변 경 설 계 서

( 2차분 제1회 변경 )

2014. 12

	서울특별시
	한강사업본부

목   차

1.	설계변경사유서
2.	설계변경설명서
3.	공사시방서
4.	공사비증⦁감대비표
5.	설계변경내역서

1.  설 계 변 경 사 유 서 (2차 제1회 변경)

가. 설계변경 사유

○ 공사계약일반조건 제 19조 (설계변경으로 인한 계약금액의 조정)에 의거 계약금액을 변경함

- 공종별 수량 증,감 및 간접비 조정에 따른 설계변경

- 공사기간 변경

당초 : 2014년 02월 21일 ~ 2015년 02월 20일

변경 : 2014년 02월 21일 ~ 2014년 12월 20일

2.  설 계 변 경 설 명 서

1. 공 사 명 : 한강공원 나들목 증설공사(옥수)

2. 목    적

지역 숙원사업을 시행하여 민원을 해소하고 한강공원을 찾는 시민에게 접근 편리성과 쾌적한 환경을 제공하는데 그 목적이 있음

3. 위    치 :  성동구 옥수동 168-1

4. 공사 개요

○ 보행자전용 나들목 설치 : 폭 5m, 높이 3.5m, 길이 69.8m

○ 이중육갑문(수문) 설치 : 폭 5m, 높이 3.5m

○ 기존 옹벽 철거 및 신설 : 높이 6.5m, 길이 168m

5. 공사기간

총 괄 : 2013년 04월 11일 ~ 2015년 09월 30일

2차분 : 2014년 02월 21일 ~ 2014년 12월 20일

6. 설계변경조건

본 공사는 다음과 같은 사항이 발생하였을 때 변경할 수 있다.

∙공사시행 전 조사작업 결과에 따라 변경된 사항에 대하여는 실제에 맞추어 변경 가능

∙사토장 등의 위치변경이 불가피하여 운반거리가 변경된 경우

∙공법이 변경될 경우

∙천재지변 등으로 인하여 설계변경이 불가피한 경우

∙시공측량결과 지형의 차이 등 현지여건이 변경되었을 때

∙기초공의 지반, 지질이 설계와 다를 때

∙기타 정당한 설계변경사유가 발생할 경우

3.  공 사 시 방 서

(변경 없음)

4.  공 사 비 증⦁감 대 비 표

5.  설 계 변 경 내 역 서

변   경   내   역   서

(2차 제1회 변경)