▢ 설계변경 세부내역

공 종	변경사유	당 초	변 경		최종증감액
			변경내용	증감액
식재지반“A"철거	식재지반철거 물량이 당초 설계내역서에 비해 증가함	H=37cm	H=90.25cm	증) 578,990	증) 578,990
식재지반“B"철거	식재지반철거 물량이 당초 설계내역서에 비해 증가함	H=47cm	H=66cm	증)1,366,676	증)1,366,676
식재지반“C"철거	식재지반철거 물량이 당초 설계내역서에 비해 증가함	H=52cm	H=71cm	증)2,256,321	증)2,256,321
화분A (1단)	식재지반철거 물량이 당초 설계내역서에 비해 증가하여 화분 밑단의 점토벽돌 수량증가	점토벽돌그레이 (190*90*57mm) 1단	점토벽돌그레이 (190*90*57mm) 2단	증) 79,745	증) 79,745
화분A (5단)	식재지반철거 물량이 당초 설계내역서에 비해 증가하여 화분 밑단의 점토벽돌 수량증가	점토벽돌그레이 (190*90*57mm) 5단	점토벽돌그레이(190*90*57mm) 10단	증)1,331,026	증)1,331,026
화분B (3단)	식재지반철거 물량이 당초 설계내역서에 비해 증가하여 화분 밑단의 점토벽돌 수량증가	점토벽돌그레이 (190*90*57mm) 3단	점토벽돌그레이(190*90*57mm) 6단	증) 395,291	증) 395,291
경계석 설치	수조 일부구간의 토사유출을 방지하고자 경계석 설치 공정 추가	-	경계석 (150*200*1,000) 25m	증) 240,361	증) 240,361
콘크리트 타설	경계석 설치부분 틈새 처리를 위한 공정 추가	-	레미콘 무근구조물 0.1125㎥	증) 3,711	증) 3,711
점토벽돌 몰탈	벽돌마다 접착이 없어 물의 흐름에 쓰러짐	-	벽돌쌓기 (몰탈 및 에폭시 접착)	증) 108,439	증) 108,439