설계변경 소위원회 자문결과서

문서번호				요청부서	기반시설안전추진반 담당 김용주		요 청 일	2016.12.19
공 사 명		해양관 외부방사장 등 시설개선공사
공사개요		공사규모		외부방사장 7개소 그늘막, 수조 등 보수 내부사육실 수조보수 관리공간 환경개선공사 등
		공사기간		2016.11.30. ~ 2017. 5. 28
		감 리 사
		설 계 사		앤드건축사사무소 김중근외 1
		시 공 사		㈜엠티마스타 (대표 : 이화춘)
자문 안건명				물범 등 임시사육시설 설치		요청금액			천원
자문 요청사유				■ 30,000천원 이상 변경사항 □ 부서(담당별)간 조정∙통합이 필요한 경우
설계변경사항(요약) ○ 내 용 : 추가공사 - 하마사 외부방사장에 해양관 공사중 물범 등을 임시로 사육할 수 있는 시설을 설치하는 공사임
원설계자 의견 ○ 해당없음
자문결과	원안가결 조건부가결 반려
자문결과조치			자문결과를 반영하여 설계변경 추진
이상의 내용과 같이 결정하였기 이에 서명함 2016. 12. . 위 원 장 간 사 위 원 위 원 위 원