설계변경 소위원회 자문요청서

문서번호

요청부서

토목부 담당 이상근

요청일

2016년  7월   일

공 사 명

서울역고가 바닥판 철거공사

공사개요

공사규모

- 본선 교량 철거 : 바닥판 철거 L=516.5m. RC SLAB 철거 L=185.88m

- 램프 교량 철거 : 2개소 253m, - 보도육교 철거 : L=30m

공사기간

2015. 11. 18. ~ 2016. 08. 30.

감 리 사

㈜진우엔지니어링코리아,(주)신명건설기술공사,(주)진전기엔지니어링,해주엔지니어링(주)

설 계 사

㈜삼안

시 공 사

성도건설산업(주)

자문 안건명

가설가림벽 및 안전시설 수량 변경

요청금액

증 68,728천원

자문요청사유

☑ 5,000만원 이상 변경사항

▢ 부서(담당별)간 조정․통합이 필요한 경우

설계변경 유형

▢ 사업계획 변경(정책, 계획변경 등)

▢ 설계도서내용 불투명, 누락, 오류, 상호모순

▢ 현장여건 상이(지질, 용수 등)

☑ 민원해결, 보수, 보강

▢ 문화재 및 지장물 이설

▢ 공법변경(신기술, 신공법 포함)

▢ 제도, 기준변경

▢ 유관기관 협의 미흡

설계변경사항(요약)

○ 내용 : 서울역고가 바닥판 철거공사시 종점부 임시야적장, 파쇄장 등에 추가 설치한 가설가림벽과 공사중 차로 축소시 사용한 교통안전시설물인 발광사인보드, 시선유도시설물(델리네이터)에 대한 수량 정산이 필요하며, 또한 공사기간이 연장되어 가설휀스(PE방호벽)에 대한 손율을 변경(3개월→ 6개월)하여 내역 반영함

원설계자 의견(요약)

○ 해당없음

주  요  변  경  내  역   및   공 종

▪ 변경개요

- 가설가림벽 설치 및 철거(H=4m)(648m→903m)

- 가설가림벽 설치 및 철거(H=2m)(1,033㎡→1,045㎡)

- 발광사인보드설치(0EA→6EA)

- 안전조명시설(경광등)(56EA→0EA)

- 시선유도시설물(델리네이터)(0EA→1,702EA)

- 가설휀스(PE방호벽)(손율변경 3개월→6개월)

▪ 물량증감내역

구 분	단위	수 량		증 ․ -감
		당초	변경
가설가림벽 설치 및 철거(H=4m)	m	648	903	255
가설가림벽 설치 및 철거(H=2m)	m	1,033	1,045	12
발광사인보드설치	EA	-	6	-
안전조명시설(경광등)	EA	56	-	-56
시선유도시설물(델리네이터)	EA	-	1,702	1,702
가설휀스(PE방호벽)	EA	1,112	1,112	-

▪ 공사비 증감내역

- 당 초 :   400,323천원

- 변 경 :   469,051천원

- 증 감 : 증 68,728천원

▪ 설계변경 주요 공종

- 가설가림벽 설치 및 철거(H=4m)

- 가설가림벽 설치 및 철거(H=2m)

- 발광사인보드설치

- 안전조명시설(경광등) 삭제

- 시선유도시설물(델리네이터)

- 가설휀스(PE방호벽)

별첨서류

설계변경 소위원회 자문요약서 1부

관련공문 사본 1부

3. 감리단 검토의견서 사본 1부

4. 실정보고서 1부

5. 사진대지 1부

6. 관련도면 1부

▪ 공사예정시기

▪ 소요관급자재

- 대상 사업아님

□ 전체분 공사현황

계 약 명 (공사명)	서울역고가 바닥판 철거공사
계약금액	4,109,440천원	계약일	2015.11.18.	시공사	성도건설산업(주)
공사기간	2015.11.18. ~ 2016.08.30.	낙찰율	86.881 %	설계자	㈜삼안
계약형태	제한경쟁입찰( ● ), 턴키( ), 대안( ) 총액계약( ● ), 계속비공사			감리자	㈜진우엔지니어링코리아 외 3개사
공사규모	• 본선 교량 철거 바닥판 철거 L=516.5m. RC SLAB 철거 L=185.88m • 램프 교량 철거 : 2개소 253m • 보도육교 철거 : L=30m			※ 작성자 : 이 상 근 (☎ 02-3708-2543)

□ 자문안건 설계변경 현황

구 분	설 계 변 경 전		설 계 변 경 후	증/감
변 경 개 요	• 가설가림벽 설치/철거(H=4m)(648m) • 가설가림벽 설치/철거(H=2m)(1,033m) • 발광사인보드설치(0EA) • 안전조명시설(경광등)(56EA) • 시선유도시설물(델리네이터)(0EA) • 가설휀스(PE방호벽)(1,112EA,손율3개월)		• 가설가림벽 설치/철거(H=4m)(903m) • 가설가림벽 설치/철거(H=2m)(1,045m) • 발광사인보드설치(6EA) • 안전조명시설(경광등)(0EA) • 시선유도시설물(델리네이터)(1,702EA) • 가설휀스(PE방호벽)(1,112EA,손율6개월)	• 가설가림벽 설치/철거(H=4m)(증 255m) • 가설가림벽 설치/철거(H=2m)(증 12m) • 발광사인보드설치(증 6EA) • 안전조명시설(경광등)(감 56EA) • 시선유도시설물(델리네이터)(증 1,702EA) • 가설휀스(PE방호벽) : 손율3개월→6개월
공 사 비	400,323 천원		469,051 천원	68,728 천원
적 용 요 율	낙찰률(86.881 %)		낙찰률(86.881 %)	낙찰률(86.881 %)
설계변경요구자	▢ 발주처 ☑ 계약상대자
협의율 적용 근거	해당없음
설계변경 근거	방 침	실정보고 승인(도시기반시설본부 토목부-15712, 2016.07.28)
	관련규정	[지방자치단체 공사계약일반조건] 제6절 1호의 가 “설계변경” 에 의거 계약금액 조정.
설계변경 유형	①사업계획 변경(정책, 기본계획 변경 등) ②설계도서 누락, 오류, 상호모순 등 ③현장여건 상이(지질, 용수 등) ④민원해결, 보수, 보강 ⑤문화재 및 지장물 이설 ⑥공법변경(신기술, 신공법 포함) ⑦제도, 기준변경 ⑧ 유관기관 협의 미흡
설계변경 내용	• 서울역고가 바닥판 철거공사시 종점부 임시야적장, 파쇄장 등에 추가 설치한 가설가림벽과 공사중 차로 축소시 사용한 교통안전시설물인 발광사인보드, 시선유도시설물(델리네이터)에 대한 수량정산이 필요하며, 또한 공사기간이 연장되어 가설휀스(PE방호벽)에 대한 손율을 변경(3개월→6개월)하여 내역 반영함
효 과	① 공기단축 ② 품질향상, ③ 안정성 증진 ④ 시공성 향상, ⑤ 비용절감, ⑥ 시민편익증진, ⑦ 민원해소, ⑧ 설계구조 보완, ⑨ 기능성, 사용성 증진
제비율 검증 이행여부	☑ 이행 □ 미이행

□ 관련문서

- 현장여건에 따른 수량변경 실정보고 제출(서울 2016-79, 2016.07.15.)

- 현장여건에 따른 수량변경 실정보고(서울역(건)16-199, 2016.07.21)

- 실정보고 승인 통보(도시기반시설본부 토목부-15712,  2016.07.28)