설계변경 소위원회 자문요청서

자문안건 (1건)	1. 도림천 상류 관악산저류조 설치공사 -------- 방재시설부 ο 품질관리활동비 반영 실정보고 ⇒ 증 70,840천원

설계변경 소위원회 자문요청서

문서번호		요청부서		방재시설부 조 동 협		요청일		2016년 10월 일
공 사 명	도림천상류 관악산 저류조 설치공사
공사개요	공사규모		□ 빗물저류조 65,000톤 □ 구조물 공사레미콘타설:13,754㎥,철근가공조립:2,316ton,PC설치:675 EA □ 유입암거 150m □ 조경공사 및 부대공 1식
	공사기간		2012. 01. 06 ~ 2017. 05. 30
	감 리 사		(주)신명건설기술공사
	설 계 사		한국종합기술 외
	시 공 사		남광토건㈜, ㈜서우건영
자문 안건명			품질관리활동비 반영.				요청금액		70,840천원
자문요청사유			☑ 5,000만원 이상 변경사항 ▢ 부서(담당별)간 조정․통합이 필요한 경우
설계변경 유형			▢ 사업계획 변경(정책, 계획변경 등) ▢ 설계도서내용 불투명, 누락, 오류, 상호모순 ▢ 현장여건 상이(지질, 용수 등) ▢ 민원해결, 보수, 보강 ▢ 문화재 및 지장물 이설 ▢ 공법변경(신기술, 신공법 포함) ☑ 제도 ,기준변경 ▢ 유관기관 협의 미흡
설계변경사항(요약) ○ 내용 : 품질관리비 산출 및 사용기준에 따르면 품질관리비는 품질시험비와 품질관리활동비를 구분 지어 계상토록 되어있음.(건설기술진흥법 제56조1항/시행규칙 제53조1항) 품질시험비는 공사비에 계상되어 있으나, 품질관리활동비는 계상되지 않아 공사비에 반영.
원설계자 의견(요약) ○ 내용 : 없음.
주 요 변 경 내 역 및 공 종
▪ 변경개요 - 품질관리활동비 반영 ▪ 물량 증감내역 - 당 초 : - - 변 경 : 품질관리활동비 19개월 (6차분 이후)					▪ 공사비 증감내역 - 당 초 : 0 천원 - 변 경 : 70,840천원 - 증 감 : 70,840천원 ▪ 설계변경 주요 공종 - 부대공
별첨서류	1. 감리단 검토보고서 사본1부. 2. 실정보고서 사본1부.					▪ 공사예정시기 - 해당없음 ▪ 소요관급자재 - 해당없음

□ 전체분 공사현황

계 약 명 (공사명)	도림천상류 관악산 저류조 설치공사
계약금액	41,350,100천원	계약일	2011.12.29.	시공사	남광토건외1개사
공사기간	2012.01.06 ~ 2017.05.30	낙찰율	81.579%	설계자	한국종합기술외2개사
계약형태	공개경쟁입찰( ● ), 턴키( ), 대안( ) 장기계속공사( ● ), 계속비공사			감리자	(주)신명건설기술공사
공사규모	□ 빗물저류조 65,000톤 □ 구조물공사 레미콘타설:13,754㎥,철근가공조립:2,316ton, PC설치:675 EA □ 유입암거 150m □ 조경공사 및 부대공 1식			※ 작성자 : 업무당당 조 동 협 (☎02-3708-8774)

□ 자문안건 설계변경 현황

구 분	설 계 변 경 전		설 계 변 경 후	증/감
변 경 개 요	없 음		품질관리활동비 1식 (19개월)	품질관리활동비 1식 (19개월)
공 사 비	0 천원		70,840천원	70,840천원
적 용 요 율	없 음		81.579%(낙찰율)
설계변경요구자	▢ 발주처 ☑ 계약상대자
협의율 적용 근거	- 해당없음.
설계변경 근거	방 침
	관련규정	지방자치단체 공사계약일반조건 제6절 1의 가항
설계변경 유형	①사업계획 변경(정책, 기본계획 변경 등) ②설계도서 누락, 오류, 상호모순 등 ③현장여건 상이(지질, 용수 등) ④민원해결, 보수, 보강 ⑤문화재 및 지장물 이설 ⑥공법변경(신기술, 신공법 포함) ⑦제도, 기준변경 ⑧ 유관기관 협의 미흡
설계변경 내용	• 품질관리비 중 계상되지않은 품질관리 활동비용 계상
효 과	① 공기단축( 월 ), ② 품질향상, ③ 안정성 증진, ④ 시공성 향상, ⑤ 비용절감, ⑥ 시민편익증진, ⑦ 민원해소, ⑧ 설계구조 보완, ⑨ 기능성, 사용성 증진
제비율 검증 이행여부	☑ 이행 □ 미이행

□ 관련문서

-  실정보고 승인(도시기반시설본부-16-3781 (2016.05.16) )