설계변경 소위원회 자문요청서

자문안건 (3건)	1. 도림천 상류 관악산 저류조 설치공사 -------- 방재시설부 ο 서울대 정문 앞 아스콘포장 파손부위 복구 ⇒ 증 65,134천원 ο 서울대 정문 가시설 계측관리비 추가 ⇒ 증 354,200천원 ο 복공구간 결빙에 따른 교통사고 저감방안 ⇒ 증 106,700천원

설계변경 소위원회 자문요청서

문서번호		요청부서		방재시설부 조 동 협		요청일		2016년 03월 일
공 사 명	도림천 상류 관악산 저류조 설치공사
공사개요	공사규모		□ 구조물 공사 레미콘 타설:13,754㎥ 철근가공조립:2,283ton PC설치:675 EA □ 유입암거 150m □ 조경공사 및 부대공 1식
	공사기간		2012. 01. 06 ~ 2017. 05. 30
	감 리 사		(주)신명건설기술공사
	설 계 사		한국종합기술 외
	시 공 사		남광토건㈜, ㈜서우건영
자문 안건명			서울대정문 앞 아스콘포장 파손부위 복구.				요청금액		65,134천원
자문요청사유			☑ 5,000만원 이상 변경사항 ▢ 부서(담당별)간 조정․통합이 필요한 경우
설계변경 유형			▢ 사업계획 변경(정책, 계획변경 등) ▢ 설계도서내용 불투명, 누락, 오류, 상호모순 ▢ 현장여건 상이(지질, 용수 등) ☑ 민원해결, 보수, 보강 ▢ 문화재 및 지장물 이설 ▢ 공법변경(신기술, 신공법 포함) ▢ 제도, 기준변경 ▢ 유관기관 협의 미흡
설계변경사항(요약) ○ 내용 : 외부 전문가 안전점검시 가시설 배면 아스콘 파손부위를 복구조치 하도록 지시받아 파손부위 복구작업을 실시하고 계약내역에 반영하고자 설계변경 심의를 요청함.
원설계자 의견(요약) ○ 내용 : 없음.
주 요 변 경 내 역 및 공 종
▪ 변경개요 - 아스콘 포장 복구 ▪ 물량 증감내역 - 당 초 : 아스콘 포장복구 0.00a - 변 경 : 아스콘 포장복구 5.91a					▪ 공사비 증감내역 - 당 초 : 0 천원 - 변 경 : 65,134천원 - 증 감 : 65,134천원 ▪ 설계변경 주요 공종 - 부대공
별첨서류	1. 감리단 검토보고서 사본1부. 2. 실정보고서 사본1부. 3. 변경전후 도면 사본 1부.					▪ 공사예정시기 - 해당없음 ▪ 소요관급자재 - 아스콘 204ton

□ 전체분 공사현황

계 약 명 (공사명)	도림천상류 관악산 저류조 설치공사
계약금액	40,356,800천원	계약일	2011.12.29.	시공사	남광토건외1개사
공사기간	2012.01.06 ~ 2017.05.30	낙찰율	81.579%	설계자	한국종합기술외2개사
계약형태	공개경쟁입찰( ● ), 턴키( ), 대안( ) 장기계속공사( ● ), 계속비공사			감리자	(주)신명건설기술공사
공사규모	□ 구조물 공사 레미콘 타설:13,754㎥ 철근가공조립:2,283ton PC설치:675 EA □ 유입암거 150m □ 조경공사 및 부대공 1식			※ 작성자 : 업무당당 조 동 협 (☎02-3708-8774)

□ 자문안건 설계변경 현황

구 분	설 계 변 경 전		설 계 변 경 후	증/감
변 경 개 요	없 음		아스콘 포장복구 5.91a	아스콘 포장복구 5.91a
공 사 비	0 천원		65,134천원	65,134천원
적 용 요 율	없 음		90.789%(협의율)
설계변경요구자	☑ 발주처 ▢ 계약상대자
협의율 적용 근거
설계변경 근거	방 침
	관련규정	지방자치단체 공사계약일반조건 제6절 1의 가항
설계변경 유형	①사업계획 변경(정책, 기본계획 변경 등) ②설계도서 누락, 오류, 상호모순 등 ③현장여건 상이(지질, 용수 등) ④민원해결, 보수, 보강 ⑤문화재 및 지장물 이설 ⑥공법변경(신기술, 신공법 포함) ⑦제도, 기준변경 ⑧ 유관기관 협의 미흡
설계변경 내용	• 현장주변 포장복구 비용 반영
효 과	① 공기단축( 월 ), ② 품질향상, ③ 안정성 증진, ④ 시공성 향상, ⑤ 비용절감, ⑥ 시민편익증진, ⑦ 민원해소, ⑧ 설계구조 보완, ⑨ 기능성, 사용성 증진
제비율 검증 이행여부	☑ 이행 □ 미이행

□ 관련문서

-  실정보고승인(도시기반시설본부-15-1736 (2015. 4. 7) )

-

-

설계변경 소위원회 자문요청서

문서번호		요청부서		방재시설부 조 동 협		요청일		2016년 03월 일
공 사 명	도림천 상류 관악산 저류조 설치공사
공사개요	공사규모		□ 구조물 공사 레미콘 타설:13,754㎥ 철근가공조립:2,283ton PC설치:675 EA □ 유입암거 150m □ 조경공사 및 부대공 1식
	공사기간		2012. 01. 06 ~ 2017. 05. 30
	감 리 사		(주)신명건설기술공사
	설 계 사		한국종합기술 외
	시 공 사		남광토건㈜, ㈜서우건영
자문 안건명			계측관리비 추가분 반영				요청금액		354,200천원
자문요청사유			☑ 5,000만원 이상 변경사항 ▢ 부서(담당별)간 조정․통합이 필요한 경우
설계변경 유형			☑ 사업계획 변경(정책, 계획변경 등) ▢ 설계도서내용 불투명, 누락, 오류, 상호모순 ▢ 현장여건 상이(지질, 용수 등) ▢ 민원해결, 보수, 보강 ▢ 문화재 및 지장물 이설 ▢ 공법변경(신기술, 신공법 포함) ▢ 제도, 기준변경 ▢ 유관기관 협의 미흡
설계변경사항(요약) ○ 내용 : 공사기간 연장(23개월)에 따라 계측관리비 추가분 및 경사계 추가 설치건을 계약내역에 반영하고자 설계변경 심의 상정함
원설계자 의견(요약) ○ 내용 : 없음.
주 요 변 경 내 역 및 공 종
▪ 변경개요 - 공기연장에 따른 계측관리비 추가분 23개월 반영 ▪ 물량 증감내역 - 당 초 : 계측관리비 2년 - 변 경 : 계측관리비 2년 + 23개월 경사계 3개소					▪ 공사비 증감내역 - 당 초 : 438,900 천원 - 변 경 : 793,100 천원 - 증 감 : 354,200 천원 ▪ 설계변경 주요 공종 - 가시설공
별첨서류	1. 감리단 검토보고서 사본1부. 2. 실정보고서 사본1부. 3. 변경전후 도면 사본 1부.					▪ 공사예정시기 - 해당없음 ▪ 소요관급자재 - 해당없음

□ 전체분 공사현황

계 약 명 (공사명)	도림천상류 관악산 저류조 설치공사
계약금액	40,356,800천원	계약일	2011.12.29.	시공사	남광토건외1개사
공사기간	2012.01.06 ~ 2017.05.30	낙찰율	81.579%	설계자	한국종합기술 외
계약형태	공개경쟁입찰( ● ), 턴키( ), 대안( ) 장기계속공사( ● ), 계속비공사			감리자	(주)신명건설기술공사
공사규모	□ 구조물 공사 레미콘 타설:13,754㎥ 철근가공조립:2,283ton PC설치:675 EA □ 유입암거 150m □ 조경공사 및 부대공 1식			※ 작성자 : 업무당당 조 동 협 (☎02-3708-8774)

□ 자문안건 설계변경 현황

구 분	설 계 변 경 전		설 계 변 경 후	증/감
변 경 개 요	계측관리 (2년)		계측관리 (2년+23개월) 경사계 3개소 추가설치	계측관리 23개월 경사계 3개소
공 사 비	438,900천원		793,100천원	354,200천원
적 용 요 율	없 음		90.789%(협의가)
설계변경요구자	☑ 발주처 ▢ 계약상대자
협의율 적용 근거
설계변경 근거	방 침
	관련규정	지방자치단체 공사계약일반조건 제6절 1의 가항
설계변경 유형	①사업계획 변경(정책, 기본계획 변경 등) ②설계도서 누락, 오류, 상호모순 등 ③현장여건 상이(지질, 용수 등) ④민원해결, 보수, 보강 ⑤문화재 및 지장물 이설 ⑥공법변경(신기술, 신공법 포함) ⑦제도, 기준변경 ⑧ 유관기관 협의 미흡
설계변경 내용	•공사기간 연장에 따른 계측관리비 추가분 반영 및 경사계3개소 추가설치
효 과	① 공기단축( 월 ), ② 품질향상, ③ 안정성 증진, ④ 시공성 향상, ⑤ 비용절감, ⑥ 시민편익증진, ⑦ 민원해소, ⑧ 설계구조 보완, ⑨ 기능성, 사용성 증진
제비율 검증 이행여부	☑ 이행 □ 미이행

□ 관련문서

-  실정보고승인(도시기반시설본부-15-4142 (2015.08.05) )

-

-

설계변경 소위원회 자문요청서

문서번호		요청부서		방재시설부 조 동 협		요청일		2016년 03월 일
공 사 명	도림천 상류 관악산 저류조 설치공사
공사개요	공사규모		□ 구조물 공사 레미콘 타설:13,754㎥ 철근가공조립:2,283ton PC설치:675 EA □ 유입암거 150m □ 조경공사 및 부대공 1식
	공사기간		2012. 01. 06 ~ 2017. 05. 30
	감 리 사		(주)신명건설기술공사
	설 계 사		한국종합기술 외
	시 공 사		남광토건㈜, ㈜서우건영
자문 안건명			복공구간 결빙에 따른 교통사고 저감 방안				요청금액		354,200천원
자문요청사유			☑ 5,000만원 이상 변경사항 ▢ 부서(담당별)간 조정․통합이 필요한 경우
설계변경 유형			▢ 사업계획 변경(정책, 계획변경 등) ▢ 설계도서내용 불투명, 누락, 오류, 상호모순 ▢ 현장여건 상이(지질, 용수 등) ☑ 민원해결, 보수, 보강 ▢ 문화재 및 지장물 이설 ▢ 공법변경(신기술, 신공법 포함) ▢ 제도, 기준변경 ▢ 유관기관 협의 미흡
설계변경사항(요약) ○ 내용 : 겨울철 복공구간 결빙에 의한 교통사고방지 대책 수립 실행방안을 계약내역에 반영하고자 설계변경 심의 상정 함
원설계자 의견(요약) ○ 내용 : 없음.
주 요 변 경 내 역 및 공 종
▪ 변경개요 - 겨울철 복공구간 결빙에 의한 교통사고방지 대책 수립 ▪ 물량 증감내역 - 당 초 : 없음 - 변 경 : 미끄럼 방지포장 1,093m2 제설제 살포 60일 모범운전자 배치 1식					▪ 공사비 증감내역 - 당 초 : 0 천원 - 변 경 : 106,700 천원 - 증 감 : 106,700 천원 ▪ 설계변경 주요 공종 - 부대공
별첨서류	1. 감리단 검토보고서 사본1부. 2. 실정보고서 사본1부. 3. 변경전후 도면 사본 1부.					▪ 공사예정시기 - 해당없음 ▪ 소요관급자재 - 해당없음

□ 전체분 공사현황

계 약 명 (공사명)	도림천상류 관악산 저류조 설치공사
계약금액	40,356,800천원	계약일	2011.12.29.	시공사	남광토건외1개사
공사기간	2012.01.06 ~ 2017.05.30	낙찰율	81.579%	설계자	한국종합기술 외
계약형태	공개경쟁입찰( ● ), 턴키( ), 대안( ) 장기계속공사( ● ), 계속비공사			감리자	(주)신명건설기술공사
공사규모	□ 구조물 공사 레미콘 타설:13,754㎥ 철근가공조립:2,283ton PC설치:675 EA □ 유입암거 150m □ 조경공사 및 부대공 1식			※ 작성자 : 업무당당 조 동 협 (☎02-3708-8774)

□ 자문안건 설계변경 현황

구 분	설 계 변 경 전		설 계 변 경 후	증/감
변 경 개 요	없 음		미끄럼 방지포장 1,093m2 제설제 살포 60일 모범운전자 배치 1식	미끄럼 방지포장 1,093m2 제설제 살포 60일 모범운전자 배치 1식
공 사 비	0천원		106,700천원	106,700천원
적 용 요 율	없 음		90.789%(협의율)
설계변경요구자	☑ 발주처 ▢ 계약상대자
협의율 적용 근거
설계변경 근거	방 침	검토지시 - 도시기반시설본부-15-7011 (2015.12.03)
	관련규정	지방자치단체 공사계약일반조건 제6절 1의 가항
설계변경 유형	①사업계획 변경(정책, 기본계획 변경 등) ②설계도서 누락, 오류, 상호모순 등 ③현장여건 상이(지질, 용수 등) ④민원해결, 보수, 보강 ⑤문화재 및 지장물 이설 ⑥공법변경(신기술, 신공법 포함) ⑦제도, 기준변경 ⑧ 유관기관 협의 미흡
설계변경 내용	•복공구간 교통사고방지를 위하여 미끄럼방지 포장, 모범운전자 배치,제설제살포
효 과	① 공기단축( 월 ), ② 품질향상, ③ 안정성 증진, ④ 시공성 향상, ⑤ 비용절감, ⑥ 시민편익증진, ⑦ 민원해소, ⑧ 설계구조 보완, ⑨ 기능성, 사용성 증진
제비율 검증 이행여부	☑ 이행 □ 미이행

□ 관련문서

-  실정보고승인(도시기반시설본부-16-882 (2016.02.11) )

-

-