설계변경 소위원회 자문요청서(1)

문서번호

요청부서

토목부 이한규

요청일

2018년 07월

공 사 명

종로 중앙버스전용차로 설치공사

공사개요

공사규모

도로개설 L=3.8km, 버스정류소 15개소

공사기간

2017. 08. 29 ~ 2018. 07. 31

감 리 사

(주)제일엔지니어링외 1개사

설 계 사

(주)진화기술공사

시 공 사

천마산건설(주)

자문 안건명

교통소통대책 용역비

요청금액

219,450 천원

자문요청사유

☑ 5,000만원 이상 변경사항

▢ 부서(담당별)간 조정․통합이 필요한 경우

설계변경 유형

☑ 사업계획 변경(정책, 계획변경 등)

▢ 설계도서내용 불투명, 누락, 오류, 상호모순

▢ 현장여건 상이(지질, 용수 등)

▢ 민원해결, 보수, 보강

▢ 문화재 및 지장물 이설

▢ 공법변경(신기술, 신공법 포함)

▢ 제도, 기준변경

▢ 유관기관 협의 미흡

설계변경사항(요약)

○ 복잡한 도심지 공사를 시행함에 있어 원활한 교통소통대책 수립을 위한 교통소통대책 용역시행 및 용역비 반영.

원설계자 의견(요약)

○해당없음

주  요  변  경  내  역   및   공 종

▪ 변경개요

- 공사기간중 원활한 교통소통을 위한 용역시행

▪ 물량 증감내역

- 당 초 :	-
- 변 경 :	교통소통대책용역비 1식

- 증 감 :	교통소통대책 용역비

▪ 공사비 증감내역

- 당 초 :	-	천원
- 변 경 :	219,450	천원
- 증 감 :	219,450	천원

▪ 설계변경 주요 공종

- 토공

별첨서류

1. 설계변경 심의자료 1부.

▪ 공사예정시기

: 2017년 9월 ~ 2018년 7월

▪ 소요관급자재 : 없음

□ 전체분 공사현황

계 약 명 (공사명)	종로 중앙버스전용차로 설치공사
계약금액	7,673,102,000	계약일	2017. 08. 23.	시공사	천마산건설(주)
공사기간	2017.08.29~2018.07.31	협의율	93.373%	설계자	(주)진화기술공사
계약형태	공개경쟁입찰(●), 턴키( ), 대안( ) 장기계속공사( ), 계속비공사			감리자	(주)제일엔지니어링
공사규모	도로개설 L=3.8km, 버스승강장 15개소			※ 작성자 : 이 한 규 (☎ 02-3396-2710)

□ 자문안건 설계변경 현황

구      분

설 계 변 경 전

설 계 변 경 후

증/감

변 경 개 요

-

교통소통대책 용역비 1식

교통소통대책 용역비 1식

공  사  비

-

219,450 천원

219,450 천원

적 용 요 율

신규단가(낙찰율 86.746%)

신규단가(낙찰율 86.746%)

설계변경요구자

☑ 발주처  ▢ 계약상대자

협의율적용 근거

공사계약 일반조건 7절 “1- 나”(설계변경으로인한 계약금액조정)

설계변경 근거

방    침

실정보고(교통소통대책 용역비) 승인

도시기반시설본부-18-2308호(2018.03.14.)

관련규정

공사계약일반조건 제19조, 제20조 및 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에

관한 법률시행령 제74조에 의거 계약금액 조정.

설계변경 유형

①사업계획 변경(정책, 기본계획 변경 등) ②설계도서 누락, 오류, 상호모순 등

③현장여건 상이(지질, 용수 등) ④민원해결, 보수, 보강 ⑤문화재 및 지장물 이설

⑥공법변경(신기술, 신공법 포함) ⑦제도, 기준변경 ⑧ 유관기관 협의 미흡

설계변경 내용

○ 복잡한 도심지 공사를 시행함에 있어 원활한 교통소통대책 수립을 위한 교통소통대책 용역시행 및 용역비 반영.

효      과

① 공기단축, ② 품질향상, ③ 안정성 증진,  ④ 시공성 향상, ⑤ 비용절감,

⑥ 시민편익증진, ⑦ 민원해소, ⑧ 설계구조 보완, ⑨ 기능성, 사용성 증진

제비율 검증

이행여부

☑ 이행  ▢ 미이행

□ 관련문서

실정보고(교통소통대책 용역비) 승인

도시기반시설본부-18-2308호(2018.03.14.)

설계변경 소위원회 자문요청서(2)

문서번호

요청부서

토목부 이한규

요청일

2018년 07월

공 사 명

종로 중앙버스전용차로 설치공사

공사개요

공사규모

도로개설 L=3.8km, 버스정류소 15개소

공사기간

2017. 08. 29 ~ 2018. 07. 31

감 리 사

(주)제일엔지니어링외 1개사

설 계 사

(주)진화기술공사

시 공 사

천마산건설(주)

자문 안건명

충격방지흡수시설 설치

요청금액

221,110천원

자문요청사유

☑ 5,000만원 이상 변경사항

▢ 부서(담당별)간 조정․통합이 필요한 경우

설계변경 유형

☑ 사업계획 변경(정책, 계획변경 등)

▢ 설계도서내용 불투명, 누락, 오류, 상호모순

▢ 현장여건 상이(지질, 용수 등)

▢ 민원해결, 보수, 보강

▢ 문화재 및 지장물 이설

▢ 공법변경(신기술, 신공법 포함)

▢ 제도, 기준변경

▢ 유관기관 협의 미흡

설계변경사항(요약)

○ 버스승강장 테이퍼구간에 차량 충격흡수시설을 설치하여 승강장시설물 보호, 보행자 안전 및 운전차량의 안전을 확보코자 시행

원설계자 의견(요약)

○해당없음

주  요  변  경  내  역   및   공 종

▪ 변경개요

- 충격흡수시설 CC1 2개소, CC2 등급 9개소,

흡수시설이동설치 1개소 등 12개소 설치

▪ 물량 증감내역

- 당 초 :	-
- 변 경 :	층격흡수시설(CC1)	2	개소
	층격흡수시설(CC2)	9	개소
	충격흡수시설이동설치	1	개소

- 증 감 :	층격흡수시설(CC1)	2	EA
	층격흡수시설(CC2)	9	EA
	충격흡수시설이동설치	1	EA

▪ 공사비 증감내역

- 당 초 :	-
- 변 경 :	221,110	천원
- 증 감 :	221,110	천원

▪ 설계변경 주요 공종

- 부대공

별첨서류

1. 설계변경 심의자료 1부.

▪ 공사예정시기

: 2017년 12월 ~ 2017년 12월

▪ 소요관급자재 : 없음

□ 전체분 공사현황

계 약 명 (공사명)	종로 중앙버스전용차로 설치공사
계약금액	7,673,102,000	계약일	2017. 08. 23.	시공사	천마산건설(주)
공사기간	2017.08.29~2018.07.31	협의율	93.373%	설계자	(주)진화기술공사
계약형태	공개경쟁입찰(●), 턴키( ), 대안( ) 장기계속공사( ), 계속비공사			감리자	(주)제일엔지니어링
공사규모	도로개설 L=3.8km, 버스승강장 15개소			※ 작성자 : 이 한 규 (☎ 02-3396-2710)

□ 자문안건 설계변경 현황

구      분

설 계 변 경 전

설 계 변 경 후

증/감

변 경 개 요

-

충격흡수시설설치(CC1)	2	EA
충격흡수시설설치(CC2)	9	EA
충격흡수시설이동설치	1	EA

충격흡수시설설치(CC1)	2	EA
충격흡수시설설치(CC2)	9	EA
충격흡수시설이동설치	1	EA

공  사  비

-

221,110 천원

221,110 천원

적 용 요 율

-

신규단가(협의율93.373%)

신규단가(협의율93.373%)

설계변경요구자

☑ 발주처  ▢ 계약상대자

협의율적용 근거

공사계약 일반조건 7절 “1- 나”(설계변경으로인한 계약금액조정)

설계변경 근거

방    침

실정보고(차량 충격흡수시설 설치) 승인

도시기반시설본부-18-2309호(2018.03.14.)

관련규정

공사계약일반조건 제19조, 제20조 및 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에

관한 법률시행령 제74조에 의거 계약금액 조정.

설계변경 유형

①사업계획 변경(정책, 기본계획 변경 등) ②설계도서 누락, 오류, 상호모순 등

③현장여건 상이(지질, 용수 등) ④민원해결, 보수, 보강 ⑤문화재 및 지장물 이설

⑥공법변경(신기술, 신공법 포함) ⑦제도, 기준변경 ⑧ 유관기관 협의 미흡

설계변경 내용

○ 버스승강장 테이퍼구간에 차량 충격흡수시설을 설치하여 승강장시설물 보호, 보행자 안전 및 운전차량의 안전을 확보코자 시행

효      과

① 공기단축, ② 품질향상, ③ 안정성 증진,  ④ 시공성 향상, ⑤ 비용절감,

⑥ 시민편익증진, ⑦ 민원해소, ⑧ 설계구조 보완, ⑨ 기능성, 사용성 증진

제비율 검증

이행여부

☑ 이행  ▢ 미이행

□ 관련문서

1)실정보고(차량충격흡수시설설치) 승인

도시기반시설본부-18-2309호(2018.03.14.)

설계변경 소위원회 자문요청서(3)

문서번호

요청부서

토목부 이한규

요청일

2018년 07월

공 사 명

종로 중앙버스전용차로 설치공사

공사개요

공사규모

도로개설 L=3.8km, 버스정류소 15개소

공사기간

2017. 08. 29 ~ 2018. 07. 31

감 리 사

(주)제일엔지니어링외 1개사

설 계 사

(주)진화기술공사

시 공 사

천마산건설(주)

자문 안건명

신설횡단보도 주변 화강판석 임시포장(1차 돌관공사)

요청금액

368,236 천원

자문요청사유

☑ 5,000만원 이상 변경사항

▢ 부서(담당별)간 조정․통합이 필요한 경우

설계변경 유형

▢ 사업계획 변경(정책, 계획변경 등)

▢ 설계도서내용 불투명, 누락, 오류, 상호모순

☑ 현장여건 상이(지질, 용수 등)

▢ 민원해결, 보수, 보강

▢ 문화재 및 지장물 이설

▢ 공법변경(신기술, 신공법 포함)

▢ 제도, 기준변경

▢ 유관기관 협의 미흡

설계변경사항(요약)

○ 버스중앙차로 2017년말 개통에 따른 횡단보도 낮춤석구간 보도(화강판석)를 돌관공사로 시행하고 동절기 날씨를 고려하여 건식 가포장으로 시공

원설계자 의견(요약)

○해당없음

주  요  변  경  내  역   및   공 종

▪ 변경개요

- 화강판석 붙임몰탈(T=15cm) 대신 모래를 사용하여 화강판석 가시공

▪ 물량 증감내역

- 당 초 :	-
- 변 경 :	화강판석(1차)	739	M2
	장애인블록 및 기타	156	M2

- 증 감 :	화강판석(1차)	739	M2
	장애인블록 및 기타	156	M2

▪ 공사비 증감내역

- 당 초 :	-
- 변 경 :	368,236	천원
- 증 감 :	368,236	천원

▪ 설계변경 주요 공종

- 포장공

별첨서류

1. 설계변경 심의자료 1부.

▪ 공사예정시기

: 2017년 9월 ~ 2017년 12월

▪ 소요관급자재 : 없음

□ 전체분 공사현황

계 약 명 (공사명)	종로 중앙버스전용차로 설치공사
계약금액	7,673,102,000	계약일	2017. 08. 23.	시공사	천마산건설(주)
공사기간	2017.08.29~2018.07.31	낙찰율	86.746%	설계자	(주)진화기술공사
계약형태	공개경쟁입찰(●), 턴키( ), 대안( ) 장기계속공사( ), 계속비공사			감리자	(주)제일엔지니어링
공사규모	도로개설 L=3.8km, 버스승강장 15개소			※ 작성자 : 이 한 규 (☎ 02-3396-2710)

□ 자문안건 설계변경 현황

구      분

설 계 변 경 전

설 계 변 경 후

증/감

변 경 개 요

-

화강판석(1차)	739	M2
장애인블록및기타	156	M2

화강판석(1차)	739	M2
장애인블록 및 기타	156	M2

공  사  비

-

368,236 천원

368,236 천원

적 용 요 율

-

신규단가(협의율 93.373%)

신규단가(낙찰율 93.373%)

설계변경요구자

☑ 발주처  ▢ 계약상대자

협의율적용 근거

해당없음

설계변경 근거

방    침

실정보고(신설횡단보도 주변 화강판석 임시포장(1차 돌관공사) 승인

도시기반시설본부-18-2707호(2018.03.26.)

관련규정

공사계약일반조건 제19조, 제20조 및 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에

관한 법률시행령 제74조에 의거 계약금액 조정.

설계변경 유형

①사업계획 변경(정책, 기본계획 변경 등) ②설계도서 누락, 오류, 상호모순 등

③현장여건 상이(지질, 용수 등) ④민원해결, 보수, 보강 ⑤문화재 및 지장물 이설

⑥공법변경(신기술, 신공법 포함) ⑦제도, 기준변경 ⑧ 유관기관 협의 미흡

설계변경 내용

○ 버스중앙차로 2017년말 개통에 따른 횡단보도 낮춤석구간 보도(화강판석)를 돌관공사로 시행하고 동절기 날씨를 고려하여 건식 가포장으로 시공

효      과

① 공기단축, ② 품질향상, ③ 안정성 증진,  ④ 시공성 향상, ⑤ 비용절감,

⑥ 시민편익증진, ⑦ 민원해소, ⑧ 설계구조 보완, ⑨ 기능성, 사용성 증진

제비율 검증

이행여부

☑ 이행  ▢ 미이행

□ 관련문서

1)실정보고(신설횡단보도 주변 화강판석 임시포장(1차 돌관공사) 승인

도시기반시설본부-18-2707호(2018.03.26.)

설계변경 소위원회 자문요청서(4)

문서번호

요청부서

토목부 이한규

요청일

2018년 07월

공 사 명

종로 중앙버스전용차로 설치공사

공사개요

공사규모

도로개설 L=3.8km, 버스정류소 15개소

공사기간

2017. 08. 29 ~ 2018. 07. 31.

감 리 사

(주)제일엔지니어링외 1개사

설 계 사

(주)진화기술공사

시 공 사

천마산건설(주)

자문 안건명

동절기 콘크리트 타설시 보온양생

요청금액

130,800 천원

자문요청사유

☑ 5,000만원 이상 변경사항

▢ 부서(담당별)간 조정․통합이 필요한 경우

설계변경 유형

▢ 사업계획 변경(정책, 계획변경 등)

▢ 설계도서내용 불투명, 누락, 오류, 상호모순

☑ 현장여건 상이(지질, 용수 등)

▢ 민원해결, 보수, 보강

▢ 문화재 및 지장물 이설

▢ 공법변경(신기술, 신공법 포함)

▢ 제도, 기준변경

▢ 유관기관 협의 미흡

설계변경사항(요약)

○ 2017년말 중앙버스전용차로 개통에 맞춰 동절기 일평균기온 –6℃에서 돌관공사를 시행하고 이동식 버스승강장 기초콘크리트 타설후 동결피해를 방지코자 보온양생을 실시

원설계자 의견(요약)

○해당없음

주  요  변  경  내  역   및   공 종

▪ 변경개요

- 이동식승강장 기초 타설콘크리트 보온양생

증감내역

- 당 초 :	-
- 변 경 :	승강장기초 보온양생	9	개소

- 증 감 :	승강장기초 보온양생	9	개소

▪ 공사비 증감내역

- 당 초 :	-	천원
- 변 경 :	130,800	천원
- 증 감 :	130,800	천원

▪ 설계변경 주요 공종

- 토공

별첨서류

1. 설계변경 심의자료 1부.

▪ 공사예정시기

: 2017년 12월 ~ 2017년 12월

▪ 소요관급자재 : 없음

□ 전체분 공사현황

계 약 명 (공사명)	종로 중앙버스전용차로 설치공사
계약금액	7,673,102,000	계약일	2017. 08. 23.	시공사	천마산건설(주)
공사기간	2017.08.29~2018.07.31	협의율	93.373%	설계자	(주)진화기술공사
계약형태	공개경쟁입찰(●), 턴키( ), 대안( ) 장기계속공사( ), 계속비공사			감리자	(주)제일엔지니어링
공사규모	도로개설 L=3.8km, 버스승강장 15개소			※ 작성자 : 이 한 규 (☎ 02-3396-2710)

□ 자문안건 설계변경 현황

구      분

설 계 변 경 전

설 계 변 경 후

증/감

변 경 개 요

-

동절기 보온양생	9	개소

동절기 보온양생	9	개소

공  사  비

-

130,800 천원

130,800 천원

적 용 요 율

신규단가(협의율 93.373%)

신규단가(협의율 93.373%)

설계변경요구자

☑ 발주처  ▢ 계약상대자

협의율적용 근거

공사계약 일반조건 7절 “1- 나”(설계변경으로인한 계약금액조정)

설계변경 근거

방    침

실정보고(동절기 콘크리트 타설시 보온양생) 승인

도시기반시설본부-18-2709호(2018.03.26.)

관련규정

공사계약일반조건 제19조, 제20조 및 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에

관한 법률시행령 제74조에 의거 계약금액 조정.

설계변경 유형

①사업계획 변경(정책, 기본계획 변경 등) ②설계도서 누락, 오류, 상호모순 등

③현장여건 상이(지질, 용수 등) ④민원해결, 보수, 보강 ⑤문화재 및 지장물 이설

⑥공법변경(신기술, 신공법 포함) ⑦제도, 기준변경 ⑧ 유관기관 협의 미흡

설계변경 내용

○  2017년말 중앙버스전용차로 개통에 맞춰 동절기 일평균기온 –6℃에서 돌관공사를 시행하고 이동식 버스승강장 기초콘크리트 타설후 동결피해를 방지코자 보온양생을 실시

효      과

① 공기단축, ② 품질향상, ③ 안정성 증진,  ④ 시공성 향상, ⑤ 비용절감,

⑥ 시민편익증진, ⑦ 민원해소, ⑧ 설계구조 보완, ⑨ 기능성, 사용성 증진

제비율 검증

이행여부

☑ 이행  ▢ 미이행

□ 관련문서

1)실정보고(동절기 콘크리트 타설시 보온양생) 승인

도시기반시설본부-18-2709호(2018.03.26.)

설계변경 소위원회 자문요청서(5)

문서번호

요청부서

토목부 이한규

요청일

2018년 07월

공 사 명

종로 중앙버스전용차로 설치공사

공사개요

공사규모

도로개설 L=3.8km, 버스정류소 15개소

공사기간

2017. 08. 29 ~ 2018. 07. 31.

감 리 사

(주)제일엔지니어링외 1개사

설 계 사

(주)진화기술공사

시 공 사

천마산건설(주)

자문 안건명

이동식 정류장 구조물 터파기 투입장비 및 인원변경

요청금액

75,394 천원

자문요청사유

☑ 5,000만원 이상 변경사항

▢ 부서(담당별)간 조정․통합이 필요한 경우

설계변경 유형

▢ 사업계획 변경(정책, 계획변경 등)

▢ 설계도서내용 불투명, 누락, 오류, 상호모순

☑ 현장여건 상이(지질, 용수 등)

▢ 민원해결, 보수, 보강

▢ 문화재 및 지장물 이설

▢ 공법변경(신기술, 신공법 포함)

▢ 제도, 기준변경

▢ 유관기관 협의 미흡

설계변경사항(요약)

○ 이동식 승강장 구조물터파기시 지하 및 주변 상가의 민원소음을 최소화하고자 구조물깨기 및 터파기시 투입장비 및 작업방법 변경으로 작업효율 저하에 따른 추가공사비 반영

원설계자 의견(요약)

○해당없음

주  요  변  경  내  역   및   공 종

▪ 변경개요

- 포장깨기 및 구조물 터파기 변경

증감내역

- 당 초 :	터파기(기계90%+인력10%)	545	M3
	포장깨기(백호우0.7m3+브레이카)	750	M3
- 변 경 :	터파기(기계70%+인력30%)	543	M3
	포장깨기(백호우0.2m3+브레이카)	582	M3

- 증 감 :	터파기(기계90%+인력10%)	-545	M3
	터파기(기계70%+인력30%)	543	M3
	포장깨기(백호우0.7m3+브레이카)	-750	M3
	포장깨기(백호우0.2m3+브레이카)	582	M3

▪ 공사비 증감내역

- 당 초 :	13,206	천원
- 변 경 :	88,600	천원
- 증 감 :	75,394	천원

▪ 설계변경 주요 공종

- 부대공

별첨서류

1. 설계변경 심의자료 1부.

▪ 공사예정시기

: 2017년 12월 ~ 2017년 12월

▪ 소요관급자재 : 없음

□ 전체분 공사현황

계 약 명 (공사명)	종로 중앙버스전용차로 설치공사
계약금액	7,673,102,000	계약일	2017. 08. 23.	시공사	천마산건설(주)
공사기간	2017.08.29.~2018.07.31	협의율	93.373%	설계자	(주)진화기술공사
계약형태	공개경쟁입찰(●), 턴키( ), 대안( ) 장기계속공사( ), 계속비공사			감리자	(주)제일엔지니어링
공사규모	도로개설 L=3.8km, 버스승강장 15개소			※ 작성자 : 이 한 규 (☎ 02-3396-2710)

□ 자문안건 설계변경 현황

구      분

설 계 변 경 전

설 계 변 경 후

증/감

변 경 개 요

터파기(기계90%+인력10%): 545M3

깨기(백호우0.7m3+브레이카): 750M3

터파기(기계90%+인력10%): 545M3

깨기(백호우0.7m3+브레이카): 582M3

터파기 : -2M3

포장깨기 : -168M3

공  사  비

13,206 천원

88,600 천원

75,394 천원

적 용 요 율

신규단가(협의율 93.373%)

신규단가(협의율 93.373%)

설계변경요구자

☑ 발주처  ▢ 계약상대자

협의율적용 근거

공사계약 일반조건 7절 “1- 나”(설계변경으로인한 계약금액조정)

설계변경 근거

방    침

실정보고(이동식 정류장 구조물 터파기 투입장비 및 인원 변경) 승인

도시기반시설본부-18-3915호(2018.04.20.)

관련규정

공사계약일반조건 제19조, 제20조 및 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에

관한 법률시행령 제74조에 의거 계약금액 조정.

설계변경 유형

①사업계획 변경(정책, 기본계획 변경 등) ②설계도서 누락, 오류, 상호모순 등

③현장여건 상이(지질, 용수 등) ④민원해결, 보수, 보강 ⑤문화재 및 지장물 이설

⑥공법변경(신기술, 신공법 포함) ⑦제도, 기준변경 ⑧ 유관기관 협의 미흡

설계변경 내용

○  이동식 승강장 구조물터파기시 지하 및 주변 상가의 민원소음을 최소화하고자 구조물깨기 및 터파기시 투입장비 및 작업방법 변경으로 작업효율 저하에 따른 추가공사비 반영

효      과

① 공기단축, ② 품질향상, ③ 안정성 증진,  ④ 시공성 향상, ⑤ 비용절감,

⑥ 시민편익증진, ⑦ 민원해소, ⑧ 설계구조 보완, ⑨ 기능성, 사용성 증진

제비율 검증

이행여부

☑ 이행  ▢ 미이행

□ 관련문서

1)실정보고(이동식 정류장 구조물 터파기 투입장비 및 인원 변경) 승인

도시기반시설본부-18-3915호(2018.04.20.)

설계변경 소위원회 자문요청서(6)

문서번호

요청부서

토목부 이한규

요청일

2018년 07월

공 사 명

종로 중앙버스전용차로 설치공사

공사개요

공사규모

도로개설 L=3.8km, 버스정류소 15개소

공사기간

2017. 08. 29 ~ 2018. 07. 31.

감 리 사

(주)제일엔지니어링외 1개사

설 계 사

(주)진화기술공사

시 공 사

천마산건설(주)

자문 안건명

교통안전시설물 추가 설치

요청금액

176,235 천원

자문요청사유

☑ 5,000만원 이상 변경사항

▢ 부서(담당별)간 조정․통합이 필요한 경우

설계변경 유형

▢ 사업계획 변경(정책, 계획변경 등)

▢ 설계도서내용 불투명, 누락, 오류, 상호모순

▢ 현장여건 상이(지질, 용수 등)

☑ 민원해결, 보수, 보강

▢ 문화재 및 지장물 이설

▢ 공법변경(신기술, 신공법 포함)

▢ 제도, 기준변경

▢ 유관기관 협의 미흡

설계변경사항(요약)

○ 공사구간 극심한 교통체증 및 시민들의 불편에 따른 민원제기로 경찰청 및 유관기관으로부터 안전시설물 설치 및 홍보요청에 따른 교통안전시설 추가 설치.

원설계자 의견(요약)

○해당없음

주  요  변  경  내  역   및   공 종

▪ 변경개요

- 공사구간 교통안전시설물 추가 설치

증감내역

- 당 초 :	홍보 및 안내간판	149	EA
	배너 및 현수막	434	EA
- 변 경 :	홍보 및 안내간판	580	EA
	배너 및 현수막	740	EA

- 증 감 :	홍보 및 안내간판	431	EA
	배너 및 현수막	306	EA

▪ 공사비 증감내역

- 당 초 :	86,065	천원
- 변 경 :	262,300	천원
- 증 감 :	176,235	천원

▪ 설계변경 주요 공종

- 부대공

별첨서류

1. 설계변경 심의자료 1부.

▪ 공사예정시기

: 2017년 9월 ~ 2017년 12월

▪ 소요관급자재 : 없음

□ 전체분 공사현황

계 약 명 (공사명)	종로 중앙버스전용차로 설치공사
계약금액	7,673,102,000	계약일	2017. 08. 23.	시공사	천마산건설(주)
공사기간	2017.08.29~2018.07.31	협의율	93.373%	설계자	(주)진화기술공사
계약형태	공개경쟁입찰(●), 턴키( ), 대안( ) 장기계속공사( ), 계속비공사			감리자	(주)제일엔지니어링
공사규모	도로개설 L=3.8km, 버스승강장 15개소			※ 작성자 : 이 한 규 (☎ 02-3396-2710)

□ 자문안건 설계변경 현황

구      분

설 계 변 경 전

설 계 변 경 후

증/감

변 경 개 요

홍보 및 안내간판	149	EA
배너 및 현수막	434	EA

홍보 및 안내간판	580	EA
배너 및 현수막	740	EA

홍보 및 안내간판	431	EA
배너 및 현수막	306	EA

공  사  비

86,065 천원

262,300 천원

176,235 천원

적 용 요 율

낙찰율 86.746%

신규단가(협의율 93.373%)

신규단가(협의율 93.373%)

설계변경요구자

☑ 발주처  ▢ 계약상대자

협의율적용 근거

공사계약 일반조건 7절 “1- 나”(설계변경으로인한 계약금액조정)

설계변경 근거

방    침

실정보고(교통안전시설물 추가 설치) 승인

도시기반시설본부-18-2460호(2018.03.19.)

관련규정

공사계약일반조건 제19조, 제20조 및 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에

관한 법률시행령 제74조에 의거 계약금액 조정.

설계변경 유형

①사업계획 변경(정책, 기본계획 변경 등) ②설계도서 누락, 오류, 상호모순 등

③현장여건 상이(지질, 용수 등) ④민원해결, 보수, 보강 ⑤문화재 및 지장물 이설

⑥공법변경(신기술, 신공법 포함) ⑦제도, 기준변경 ⑧ 유관기관 협의 미흡

설계변경 내용

○  공사구간 극심한 교통체증 및 시민들의 불편에 따른 민원제기로 경찰청 및 유관기관으로부터 안전시설물 설치 및 홍보요청에 따른 교통안전시설 추가 설치.

효      과

① 공기단축, ② 품질향상, ③ 안정성 증진,  ④ 시공성 향상, ⑤ 비용절감,

⑥ 시민편익증진, ⑦ 민원해소, ⑧ 설계구조 보완, ⑨ 기능성, 사용성 증진

제비율 검증

이행여부

☑ 이행  ▢ 미이행

□ 관련문서

1)실정보고(교통안전시설물 추가 설치) 승인

도시기반시설본부-18-2460호(2018.03.19.)

설계변경 소위원회 자문요청서(7)

문서번호

요청부서

토목부 이한규

요청일

2018년 07월

공 사 명

종로 중앙버스전용차로 설치공사

공사개요

공사규모

도로개설 L=3.8km, 버스정류소 15개소

공사기간

2017. 08. 29 ~ 2018. 07. 31.

감 리 사

(주)제일엔지니어링외 1개사

설 계 사

(주)진화기술공사

시 공 사

천마산건설(주)

자문 안건명

교차로 아스콘 표층포장

요청금액

191,300 천원

자문요청사유

☑ 5,000만원 이상 변경사항

▢ 부서(담당별)간 조정․통합이 필요한 경우

설계변경 유형

☑ 사업계획 변경(정책, 계획변경 등)

▢ 설계도서내용 불투명, 누락, 오류, 상호모순

▢ 현장여건 상이(지질, 용수 등)

▢ 민원해결, 보수, 보강

▢ 문화재 및 지장물 이설

▢ 공법변경(신기술, 신공법 포함)

▢ 제도, 기준변경

☑ 유관기관 협의 미흡

설계변경사항(요약)

○ 종로 중앙버스전용차로 설치공사중 북부도로사업소에서 교차로구간 추가 포장 요청에 따른 교차로부 포장 시행

원설계자 의견(요약)

○해당없음

주  요  변  경  내  역   및   공 종

▪ 변경개요

- 교차로 구간 추가 포장 시행

증감내역

- 당 초 :	-
	-
- 변 경 :	교차로포장(T=5cm)	8,260	M2

- 증 감 :	교차로 포장(T=5cm)	8,260	M2

▪ 공사비 증감내역

- 당 초 :	-
- 변 경 :	191,300	천원
- 증 감 :	191,300	천원

▪ 설계변경 주요 공종

- 포장공

별첨서류

1. 설계변경 심의자료 1부.

▪ 공사예정시기

: 2018년 3월 ~ 2018년 3월

▪ 소요관급자재 : 없음

□ 전체분 공사현황

계 약 명 (공사명)	종로 중앙버스전용차로 설치공사
계약금액	7,673,102,000	계약일	2017. 08. 23.	시공사	천마산건설(주)
공사기간	2017.08.29~2018.07.31	협의율	93.373%	설계자	(주)진화기술공사
계약형태	공개경쟁입찰(●), 턴키( ), 대안( ) 장기계속공사( ), 계속비공사			감리자	(주)제일엔지니어링
공사규모	도로개설 L=3.8km, 버스승강장 15개소			※ 작성자 : 이 한 규 (☎ 02-3396-2710)

□ 자문안건 설계변경 현황

구      분

설 계 변 경 전

설 계 변 경 후

증/감

변 경 개 요

-

교차로 포장 추가	8,260	M2

교차로 포장 추가	8,260	M2

공  사  비

-

191,300 천원

191,300 천원

적 용 요 율

-

신규단가(협의율 93.373%)

신규단가(협의율 93.373%)

설계변경요구자

☑ 발주처  ▢ 계약상대자

협의율적용 근거

공사계약 일반조건 7절 “1- 나”(설계변경으로인한 계약금액조정)

설계변경 근거

방    침

실정보고(교차로 아스콘 표층포장) 승인

도시기반시설본부-18-2424호(2018.03.16.)

관련규정

공사계약일반조건 제19조, 제20조 및 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에

관한 법률시행령 제74조에 의거 계약금액 조정.

설계변경 유형

①사업계획 변경(정책, 기본계획 변경 등) ②설계도서 누락, 오류, 상호모순 등

③현장여건 상이(지질, 용수 등) ④민원해결, 보수, 보강 ⑤문화재 및 지장물 이설

⑥공법변경(신기술, 신공법 포함) ⑦제도, 기준변경 ⑧ 유관기관 협의 미흡

설계변경 내용

○  공사구간 극심한 교통체증 및 시민들의 불편에 따른 민원제기로 경찰청 및 유관기관으로부터 안전시설물 설치 및 홍보요청에 따른 교통안전시설 추가 설치.

효      과

① 공기단축, ② 품질향상, ③ 안정성 증진,  ④ 시공성 향상, ⑤ 비용절감,

⑥ 시민편익증진, ⑦ 민원해소, ⑧ 설계구조 보완, ⑨ 기능성, 사용성 증진

제비율 검증

이행여부

☑ 이행  ▢ 미이행

□ 관련문서

1)실정보고(교차로 아스콘 표층포장) 승인

도시기반시설본부-18-2424호(2018.03.16.)

설계변경 소위원회 자문요청서(8)

문서번호

요청부서

토목부 이한규

요청일

2018년 07월

공 사 명

종로 중앙버스전용차로 설치공사

공사개요

공사규모

도로개설 L=3.8km, 버스정류소 15개소

공사기간

2017. 08. 29 ~ 2018. 07. 31.

감 리 사

(주)제일엔지니어링외 1개사

설 계 사

(주)진화기술공사

시 공 사

천마산건설(주)

자문 안건명

버스도착 안내 단말기(BIT)설치

요청금액

224,752 천원

자문요청사유

☑ 5,000만원 이상 변경사항

▢ 부서(담당별)간 조정․통합이 필요한 경우

설계변경 유형

☑ 사업계획 변경(정책, 계획변경 등)

▢ 설계도서내용 불투명, 누락, 오류, 상호모순

▢ 현장여건 상이(지질, 용수 등)

▢ 민원해결, 보수, 보강

▢ 문화재 및 지장물 이설

▢ 공법변경(신기술, 신공법 포함)

▢ 제도, 기준변경

▢ 유관기관 협의 미흡

설계변경사항(요약)

○ 이동식 버스승강장에 버스이용자의 편의를 위한 버스정보안내단말기(BIT)를 설치하고 내역에 반영

원설계자 의견(요약)

○해당없음

주  요  변  경  내  역   및   공 종

▪ 변경개요

- 버스정보안내단말기(BIT) 설치

증감내역

- 당 초 :	-
	-
- 변 경 :	BIT설치	15	SET

- 증 감 :	BIT설치	15	SET

▪ 공사비 증감내역

- 당 초 :	-
- 변 경 :	224,752	천원
- 증 감 :	224,752	천원

▪ 설계변경 주요 공종

- 포장공

별첨서류

1. 설계변경 심의자료 1부.

▪ 공사예정시기

: 2017년 12월 ~ 2017년 12월

▪ 소요관급자재 : 없음

□ 전체분 공사현황

계 약 명 (공사명)	종로 중앙버스전용차로 설치공사
계약금액	7,673,102,000	계약일	2017. 08. 23.	시공사	천마산건설(주)
공사기간	2017.08.29~2018.07.31	협의율	93.373%	설계자	(주)진화기술공사
계약형태	공개경쟁입찰(●), 턴키( ), 대안( ) 장기계속공사( ), 계속비공사			감리자	(주)제일엔지니어링
공사규모	도로개설 L=3.8km, 버스승강장 15개소			※ 작성자 : 이 한 규 (☎ 02-3396-2710)

□ 자문안건 설계변경 현황

구      분

설 계 변 경 전

설 계 변 경 후

증/감

변 경 개 요

-

BIT설치	15	SET

BIT설치	15	SET

공  사  비

-

224,752 천원

224,752 천원

적 용 요 율

-

신규단가(협의율 93.373%)

신규단가(협의율 93.373%)

설계변경요구자

☑ 발주처  ▢ 계약상대자

협의율적용 근거

공사계약 일반조건 7절 “1- 나”(설계변경으로인한 계약금액조정)

설계변경 근거

방    침

실정보고(버스도착 안내 단말기(BIT)설치) 승인

도시기반시설본부-18-4682호(2018.05.10.)

관련규정

공사계약일반조건 제19조, 제20조 및 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에

관한 법률시행령 제74조에 의거 계약금액 조정.

설계변경 유형

①사업계획 변경(정책, 기본계획 변경 등) ②설계도서 누락, 오류, 상호모순 등

③현장여건 상이(지질, 용수 등) ④민원해결, 보수, 보강 ⑤문화재 및 지장물 이설

⑥공법변경(신기술, 신공법 포함) ⑦제도, 기준변경 ⑧ 유관기관 협의 미흡

설계변경 내용

○  공사구간 극심한 교통체증 및 시민들의 불편에 따른 민원제기로 경찰청 및 유관기관으로부터 안전시설물 설치 및 홍보요청에 따른 교통안전시설 추가 설치.

효      과

① 공기단축, ② 품질향상, ③ 안정성 증진,  ④ 시공성 향상, ⑤ 비용절감,

⑥ 시민편익증진, ⑦ 민원해소, ⑧ 설계구조 보완, ⑨ 기능성, 사용성 증진

제비율 검증

이행여부

☑ 이행  ▢ 미이행

□ 관련문서

1)실정보고(버스도착 안내 단말기(BIT)설치) 승인

도시기반시설본부-18-4682호(2018.05.10.)

설계변경 소위원회 자문요청서(9)

문서번호

요청부서

토목부 이한규

요청일

2018년 07월

공 사 명

종로 중앙버스전용차로 설치공사

공사개요

공사규모

도로개설 L=3.8km, 버스정류소 15개소

공사기간

2017. 08. 29 ~ 2018. 07. 31.

감 리 사

(주)제일엔지니어링외 1개사

설 계 사

(주)진화기술공사

시 공 사

천마산건설(주)

자문 안건명

중앙차로 무단횡단금지 휀스 이동형 설치

요청금액

243,991 천원

자문요청사유

☑ 5,000만원 이상 변경사항

▢ 부서(담당별)간 조정․통합이 필요한 경우

설계변경 유형

☑ 사업계획 변경(정책, 계획변경 등)

▢ 설계도서내용 불투명, 누락, 오류, 상호모순

▢ 현장여건 상이(지질, 용수 등)

▢ 민원해결, 보수, 보강

▢ 문화재 및 지장물 이설

▢ 공법변경(신기술, 신공법 포함)

▢ 제도, 기준변경

▢ 유관기관 협의 미흡

설계변경사항(요약)

○ 중앙차로에 무단횡단 방지를 위한 이동형휀스 하부 1,060경간 설치

원설계자 의견(요약)

○해당없음

주  요  변  경  내  역   및   공 종

▪ 변경개요

- 무단횡단금지휀스(이동식) 설치

증감내역

- 당 초 :	-
	-
- 변 경 :	무단횡단금지휀스	1,060	경간

- 증 감 :	무단횡단금지휀스	1,060	경간

▪ 공사비 증감내역

- 당 초 :	-
- 변 경 :	243,991	천원
- 증 감 :	243,991	천원

▪ 설계변경 주요 공종

- 포장공

별첨서류

1. 설계변경 심의자료 1부.

▪ 공사예정시기

: 2018년 4월 ~ 2018년 5월

▪ 소요관급자재 : 없음

□ 전체분 공사현황

계 약 명 (공사명)	종로 중앙버스전용차로 설치공사
계약금액	7,673,102,000	계약일	2017. 08. 23.	시공사	천마산건설(주)
공사기간	2017.08.29~2018.07.31	협의율	93.373%	설계자	(주)진화기술공사
계약형태	공개경쟁입찰(●), 턴키( ), 대안( ) 장기계속공사( ), 계속비공사			감리자	(주)제일엔지니어링
공사규모	도로개설 L=3.8km, 버스승강장 15개소			※ 작성자 : 이 한 규 (☎ 02-3396-2710)

□ 자문안건 설계변경 현황

구      분

설 계 변 경 전

설 계 변 경 후

증/감

변 경 개 요

-

무단횡단금지휀스	1,060	경간

무단횡단금지휀스	1,060	경간

공  사  비

-

243,991 천원

243,991 천원

적 용 요 율

-

신규단가(협의율 93.373%)

신규단가(협의율 93.373%)

설계변경요구자

☑ 발주처  ▢ 계약상대자

협의율적용 근거

공사계약 일반조건 7절 “1- 나”(설계변경으로 인한 계약금액조정)

설계변경 근거

방    침

실정보고(중앙차로 무단횡단금지 휀스 이동형 설치)설치) 승인

도시기반시설본부-18-6283호(2018.06.20.)

관련규정

공사계약일반조건 제19조, 제20조 및 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에

관한 법률시행령 제74조에 의거 계약금액 조정.

설계변경 유형

①사업계획 변경(정책, 기본계획 변경 등) ②설계도서 누락, 오류, 상호모순 등

③현장여건 상이(지질, 용수 등) ④민원해결, 보수, 보강 ⑤문화재 및 지장물 이설

⑥공법변경(신기술, 신공법 포함) ⑦제도, 기준변경 ⑧ 유관기관 협의 미흡

설계변경 내용

○  공사구간 극심한 교통체증 및 시민들의 불편에 따른 민원제기로 경찰청 및 유관기관으로부터 안전시설물 설치 및 홍보요청에 따른 교통안전시설 추가 설치.

효      과

① 공기단축, ② 품질향상, ③ 안정성 증진,  ④ 시공성 향상, ⑤ 비용절감,

⑥ 시민편익증진, ⑦ 민원해소, ⑧ 설계구조 보완, ⑨ 기능성, 사용성 증진

제비율 검증

이행여부

☑ 이행  ▢ 미이행

□ 관련문서

1)실정보고(중앙차로 무단횡단금지 휀스 이동형 설치)설치) 승인

도시기반시설본부-18-6283호(2018.06.20.)

설계변경 소위원회 자문요청서(10)

문서번호

요청부서

토목부 이한규

요청일

2018년 07월

공 사 명

종로 중앙버스전용차로 설치공사

공사개요

공사규모

도로개설 L=3.8km, 버스정류소 15개소

공사기간

2017. 08. 29 ~ 2018. 07. 31.

감 리 사

(주)제일엔지니어링외 1개사

설 계 사

(주)진화기술공사

시 공 사

천마산건설(주)

자문 안건명

교통안전시설(속도제한 하향표지판) 설치

요청금액

115,170 천원

자문요청사유

☑ 5,000만원 이상 변경사항

▢ 부서(담당별)간 조정․통합이 필요한 경우

설계변경 유형

▢ 사업계획 변경(정책, 계획변경 등)

▢ 설계도서내용 불투명, 누락, 오류, 상호모순

▢ 현장여건 상이(지질, 용수 등)

▢ 민원해결, 보수, 보강

▢ 문화재 및 지장물 이설

▢ 공법변경(신기술, 신공법 포함)

☑ 제도, 기준변경

▢ 유관기관 협의 미흡

설계변경사항(요약)

○ 2018년 제3차 교통안전시설 심의 결과를 반영하여 공사구간내 차량제한속도(하향) 표지판을 설치

원설계자 의견(요약)

○해당없음

주  요  변  경  내  역   및   공 종

▪ 변경개요

- 차량제한속도 표지판 설치

증감내역

- 당 초 :	-
	-
- 변 경 :	차량제한속도 표지판 설치	41	개

- 증 감 :	차량제한속도 표지판설치	41	개

▪ 공사비 증감내역

- 당 초 :	-
- 변 경 :	115,170	천원
- 증 감 :	115,170	천원

▪ 설계변경 주요 공종

- 포장공

별첨서류

1. 설계변경 심의자료 1부.

▪ 공사예정시기

: 2018년 6월 ~ 2018년 6월

▪ 소요관급자재 : 없음

□ 전체분 공사현황

계 약 명 (공사명)	종로 중앙버스전용차로 설치공사
계약금액	7,673,102,000	계약일	2017. 08. 23.	시공사	천마산건설(주)
공사기간	2017.08.29~2018.07.31	협의율	93.373%	설계자	(주)진화기술공사
계약형태	공개경쟁입찰(●), 턴키( ), 대안( ) 장기계속공사( ), 계속비공사			감리자	(주)제일엔지니어링
공사규모	도로개설 L=3.8km, 버스승강장 15개소			※ 작성자 : 이 한 규 (☎ 02-3396-2710)

□ 자문안건 설계변경 현황

구      분

설 계 변 경 전

설 계 변 경 후

증/감

변 경 개 요

-

차량제한속도표지판설치	41	개

차량제한속도표지판설치	41	개

공  사  비

-

115,170 천원

115,170 천원

적 용 요 율

-

신규단가(협의율 93.373%)

신규단가(협의율 93.373%)

설계변경요구자

☑ 발주처  ▢ 계약상대자

협의율적용 근거

공사계약 일반조건 7절 “1- 나”(설계변경으로 인한 계약금액조정)

설계변경 근거

방    침

실정보고(교통안전시설(속도제한 하향표지판) 설치) 승인

도시기반시설본부-18-6591호(2018.06.26.)

관련규정

공사계약일반조건 제19조, 제20조 및 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에

관한 법률시행령 제74조에 의거 계약금액 조정.

설계변경 유형

①사업계획 변경(정책, 기본계획 변경 등) ②설계도서 누락, 오류, 상호모순 등

③현장여건 상이(지질, 용수 등) ④민원해결, 보수, 보강 ⑤문화재 및 지장물 이설

⑥공법변경(신기술, 신공법 포함) ⑦제도, 기준변경 ⑧ 유관기관 협의 미흡

설계변경 내용

○  2018년 제3차 교통안전시설 심의 결과를 반영하여 공사구간내 차량제한속도(하향) 표지판을 설치

효      과

① 공기단축, ② 품질향상, ③ 안정성 증진,  ④ 시공성 향상, ⑤ 비용절감,

⑥ 시민편익증진, ⑦ 민원해소, ⑧ 설계구조 보완, ⑨ 기능성, 사용성 증진

제비율 검증

이행여부

☑ 이행  ▢ 미이행

□ 관련문서

1)실정보고(교통안전시설(속도제한 하향표지판) 설치) 승인

도시기반시설본부-18-6591호(2018.06.26.)