설계변경 소위원회 자문요청서

문서번호

요청부서

토목부

요청일

2019년  03월  일

공 사 명

노들섬 특화공간 조성 토목공사

공사개요

공사규모

-토공 35,311m3, -우수관로(979m), 오수관로(236m), 가압관로(744m)

-옹벽보수보강(10,137m2), -보행육교(1개소) : 139 m

-포장 : 8,370 m2

공사기간

총차 2017. 11. 15. ~ 2019. 04. 27,  2차 2017. 06. 27. ~ 2019. 04. 27

감 리 사

㈜유탑엔지니어링, ITM CM사업단

설 계 사

㈜토포스건축사사무소

시 공 사

신성종합건설(주) (주계약자) 외 2개사(부계약자)

자문 안건명

지반보강 그라우팅 설계변경

요청금액

증) 264,480천원

자문요청사유

☑ 5,000만원 이상 변경사항

▢ 부서(담당별)간 조정․통합이 필요한 경우

설계변경 유형

▢ 사업계획 변경(정책, 계획변경 등)

▢ 설계도서내용 불투명, 누락, 오류, 상호모순

☑ 현장여건 상이(지질, 용수 등)

☑ 민원해결, 보수, 보강

▢ 문화재 및 지장물 이설

▢ 공법변경(신기술, 신공법 포함)

▢ 제도, 기준변경

▢ 유관기관 협의 미흡

설계변경사항(요약)

○지반보강 그라우팅

- 동측부지 사질층 지반침하 방지(인접도로 및 부지내 지반침하 방지)

물  량  증  감  내  역

공 종	규 격	단 위	당 초	변 경	증,(감)
지반보강그라우팅
S.G.R Grouting 천공	사질토	M	-	3,420	3,420
S.G.R Grouting 약액주입	현탄액형	M3	-	287	287

공 사 비 증 감 내 역 및 주 요 공 종
▪ 공사비 증감내역 - 당 초 : - 천원 - 변 경 : 264,480천원 - 증 감 : 264,480천원 ▪ 설계변경 주요 공종 - 지반보강 그라우팅
별첨서류	실정보고승인 (도시기반시설본부-19-168) 2. 감리단 검토의견서 사본 1부 3. 실정보고 각 사본 1부	▪ 공사완료시기 -2 차분 : 2019년 04월 27일 -총차분 : 2019년 04월 27일 ▪ 소요관급자재 - 철근, 레미콘 외

□ 전체분 공사현황

계 약 명 (공사명)	노들섬 특화공간 조성 토목공사
계약금액	6,099,643천원	계약일	2017.11.13	시공사	신성종합건설(주)
공사기간	2017.11.15. ~ 2019.04.27.	낙찰율	85.83%	설계자	㈜토포스건축사사무소
계약형태	공개경쟁입찰(●), 턴키( ), 대안( ) 장기계속공사(●), 계속비공사			감리자	㈜유탑엔지니어링, ITM CM사업단
공사규모	-토공 35,311m3, -우수관로(979m), 오수관로(467m) -옹벽보수보강(10,137m2), -보행육교(1개소) : 139 m -포장 : 8,370 m2

□자문안건설계변경현황

구 분	설 계 변 경 전		설 계 변 경 후	증 / 감
변 경 개 요	-지반보강 그라우팅 그라우팅 천공 : - m 그라우팅 주입 : - m3		-지반보강 그라우팅 그라우팅 천공 : 3,420m 그라우팅 주입 : 287m3	-지반보강 그라우팅 그라우팅 천공 : 증) 3,420m 그라우팅 주입 : 증) 287m3
공 사 비	- 천원		264,480천원	증) 264,480천원
적 용 요 율	▷85.83%(낙찰율)		▷85.83%(낙찰율)	▷85.83%(낙찰율)
설계변경요구자	☑ 발주처 ▢ 계약상대자
협의율 적용 근거	-
설계변경 근거	방 침	실정보고 승인 : 도시기반시설본부-19-168
	관련규정	공사계약 일반조건 제6절 (“가”항),
설계변경 유형	①사업계획 변경(정책, 기본계획 변경 등) ②설계도서 누락, 오류, 상호모순 등 ③현장여건 상이(지질, 용수 등) ④민원해결, 보수, 보강 ⑤문화재 및 지장물 이설 ⑥공법변경(신기술, 신공법 포함) ⑦제도, 기준변경 ⑧ 유관기관 협의 미흡
설계변경 내용	기본계획 변경
효 과	① 공기단축(-월), ② 품질향상, ③ 안정성 증진, ④ 시공성 향상, ⑤ 비용절감, ⑥ 시민편익증진, ⑦ 민원해소, ⑧ 설계구조 보완, ⑨ 기능성, 사용성 증진

□ 관련문서

· 실정보고 승인 통보 – 도시기반시설본부-19-168(2019-01-04)

설계변경 소위원회 자문요청서

문서번호

요청부서

토목부

요청일

2019년  03월  일

공 사 명

노들섬 특화공간 조성 토목공사

공사개요

공사규모

-토공 35,311m3, -우수관로(979m), 오수관로(236m), 가압관로(744m)

-옹벽보수보강(10,137m2), -보행육교(1개소) : 139 m

-포장 : 8,370 m2

공사기간

총차 2017. 11. 15. ~ 2019. 04. 27,  2차 2017. 06. 27. ~ 2019. 04. 27

감 리 사

㈜유탑엔지니어링, ITM CM사업단

설 계 사

㈜토포스건축사사무소

시 공 사

신성종합건설(주) (주계약자) 외 2개사(부계약자)

자문 안건명

교각(P4)공법 변경

요청금액

증) 111,826천원

자문요청사유

☑ 5,000만원 이상 변경사항

▢ 부서(담당별)간 조정․통합이 필요한 경우

설계변경 유형

☑ 사업계획 변경(정책, 계획변경 등)

▢ 설계도서내용 불투명, 누락, 오류, 상호모순

▢ 현장여건 상이(지질, 용수 등)

☑ 민원해결, 보수, 보강

▢ 문화재 및 지장물 이설

☑ 공법변경(신기술, 신공법 포함)

▢ 제도, 기준변경

▢ 유관기관 협의 미흡

설계변경사항(요약)

○교각(P4)공법 변경

- 노들섬 서측부지 시설물 민간운영자 2019년6월 운영예정으로 토목공정은 서측부분을 2019년 4월까지 완료하

하는 것으로 공공재생과, 도기본의 합동공정회의시 보고되어 동절기에 교각시공하여야 하므로 공기단축 및

품질확보를 위하여 공법변경

물  량  증  감  내  역

공 종	규 격	단 위	당 초	변 경	증,(감)
보행육교
- 구조물공
콘크리트타설	철근	M3	35	25	(10)
철근가공조립	복잡	TON	4.215	1.506	(2.709)
- 강재교각
교각 제작 및 설치	공장제작	TON	-	9.689	9.689
설계비		식	-	1	1

공 사 비 증 감 내 역 및 주 요 공 종
▪ 공사비 증감내역 - 당 초 : 486,530천원 - 변 경 : 598,356천원 - 증 감 : 111,826천원 ▪ 설계변경 주요 공종 - 보행육교
별첨서류	실정보고승인 (도시기반시설본부-19-638) 2. 감리단 검토의견서 사본 1부 3. 실정보고 각 사본 1부	▪ 공사완료시기 -2 차분 : 2019년 04월 27일 -총차분 : 2019년 04월 27일 ▪ 소요관급자재 - 철근, 레미콘 외

□ 전체분 공사현황

계 약 명 (공사명)	노들섬 특화공간 조성 토목공사
계약금액	6,099,643천원	계약일	2017.11.13	시공사	신성종합건설(주)
공사기간	2017.11.15. ~ 2019.04.27.	협의율	92.91%	설계자	㈜토포스건축사사무소
계약형태	공개경쟁입찰(●), 턴키( ), 대안( ) 장기계속공사(●), 계속비공사			감리자	㈜유탑엔지니어링, ITM CM사업단
공사규모	-토공 35,311m3, -우수관로(979m), 오수관로(467m) -옹벽보수보강(10,137m2), -보행육교(1개소) : 139 m -포장 : 8,370 m2

□자문안건설계변경현황

구 분	설 계 변 경 전		설 계 변 경 후	증 / 감
변 경 개 요	-교각(P4): 현장타설 콘크리트 콘크리트타설 : 35 m3 철근가공조립 : 4.215 m3		-교각(P4)공법: 현장타설콘크리트(교각기초) + 강재교각 콘크리트타설 : 25 m3 철근가공조립 : 1.506 m3 강재교각 : 9.689 ton 설계비 : 1 식	-교각(P4)공법:현장타설콘크리트(교각기초) + 강재교각 콘크리트타설 : (감) 10 m3 철근가공조립 : (감) 2.709 m3 강재교각 : (증) 9.689 ton 설계비 : (증) 1 식
공 사 비	486,530 천원		598,356 천원	증) 111,826 천원
적 용 요 율	▷92.91%(협의율)		▷92.91%(협의율)	▷92.91%(협의율)
설계변경요구자	☑ 발주처 ▢ 계약상대자
협의율 적용 근거	-
설계변경 근거	방 침	실정보고 승인 : 도시기반시설본부-19-638
	관련규정	공사계약 일반조건 제6절 (“가”항),
설계변경 유형	①사업계획 변경(정책, 기본계획 변경 등) ②설계도서 누락, 오류, 상호모순 등 ③현장여건 상이(지질, 용수 등) ④민원해결, 보수, 보강 ⑤문화재 및 지장물 이설 ⑥공법변경(신기술, 신공법 포함) ⑦제도, 기준변경 ⑧ 유관기관 협의 미흡
설계변경 내용	기본계획 변경
효 과	① 공기단축(-월), ② 품질향상, ③ 안정성 증진, ④ 시공성 향상, ⑤ 비용절감, ⑥ 시민편익증진, ⑦ 민원해소, ⑧ 설계구조 보완, ⑨ 기능성, 사용성 증진

□ 관련문서

· 실정보고 승인 통보 – 도시기반시설본부-19-638(2019-01-16)