설계변경 소위원회 자문요청서

문서번호		요청부서		토목부 담당 시희식		요청일		2015년 4월 일
공 사 명	강남순환도시고속도로(4공구) 건설공사
공사개요	공사규모		폭: 왕복 4~8차로, 연장: L=2.48km 지하차도: 760m, 본선교량:820m, 토공: 900m
	공사기간		2001.12.29 ~ 2016.05.19
	감 리 사		㈜서영엔지니어링
	설 계 사		㈜서영엔지니어링
	시 공 사		글로웨이(주)
자문 안건명			본선교(P11) 및 DRB(P1) 상수도 이설비 반영				요청금액		증 75,350천원
자문요청사유			☑ 5,000만원 이상 변경사항 ▢ 부서(담당별)간 조정․통합이 필요한 경우
설계변경 유형			▢ 사업계획 변경(정책, 계획변경 등) ▢설계도서내용 불투명, 누락, 오류, 상호모순 ☑ 현장여건 상이(지질, 용수 등) ▢ 민원해결, 보수, 보강 ▢ 문화재 및 지장물 이설 ▢ 공법변경(신기술, 신공법 포함) ▢ 제도, 기준변경 ▢ 유관기관 협의 미흡
설계변경사항(요약) ○ 내용 : 본선교 P11 및 DRB P1 구조물에 저촉되어 구조물 시공을 위해서는 상수도 이설이 불가피함.
원설계자 의견(요약)
주 요 변 경 내 역 및 공 종
▪ 변경개요 - 당 초: - - 변 경: 본선교 P11 및 DRB P1 상수도 이설 ▪ 물량 증감내역 - 당 초 : - - 변 경 : 본선교 P11 (D100~D250, L=362.18m) DRB교 P1 (D80, L=16.5m) - 증 감 : 본선교 P11 (D100~D250, L=362.18m) DRB교 P1 (D80, L=16.5m)					▪ 공사비 증감내역 - 당 초 : - - 변 경 : 75,350 천원 - 증 감 : 75,350 천원 ▪ 설계변경 주요 공종 - 지장물공사 등
별첨서류	1. 감리단 검토 의견서 1부. 2. 공사비 증·감 집계표 및 내역서 1부. 3. 수량산출서 1부. 4. 관련자료 1부. 5. 관련공문 1부.					▪ 공사예정시기 - 2014. 10월 ~ 2014년 12월 ▪ 소요관급자재 - 없음.

□ 전체분 공사현황

계 약 명 (공사명)	강남순환도시고속도로(4공구) 건설공사
계약금액	168,866,000천원	계약일	2001.12.28	시공사	글로웨이(주)
공사기간	2001.12.29 ~ 2016.05.19	협의율	82.25%	설계자	㈜서영엔지니어링
계약형태	공개경쟁입찰(●), 턴키( ), 대안( ) 장기계속공사( ), 계속비공사			감리자	㈜서영엔지니어링
공사규모	폭: 왕복 4~8차로, 연장: L=2.48km 지하차도: 760m, 본선교량:820m, 토공: 900m			※ 작성자 : 시희식 (☎ 02-3708-8662)

□ 자문안건 설계변경 현황

구 분	설 계 변 경 전		설 계 변 경 후	증/감
변 경 개 요	-		○ 교각(본선P11, DRB P1) 기초 저촉 상수도 이설	증
공 사 비	-		75,350천원	75,350천원
적 용 요 율	협의율 82.25%		협의율 82.25%	적용율 82.25%
설계변경요구자	☑ 발주처 □ 계약상대자
협의율 적용 근거	본부장 방침 제599호
설계변경 근거	방 침	실정보고 승인(토목부-5335 2015.03.17)
	관련규정	공사계약일반조건 제19조 제1항
설계변경 유형	①사업계획 변경(정책, 기본계획 변경 등) ②설계도서 누락, 오류, 상호모순 등 ③현장여건 상이(지질, 용수 등) ④민원해결, 보수, 보강 ⑤문화재 및 지장물 이설 ⑥공법변경(신기술, 신공법 포함) ⑦제도, 기준변경 ⑧ 유관기관 협의 미흡
설계변경 내용	- 본선교 P11 및 DRB P1 상수도 이설
효 과	① 공기단축( 월), ② 품질향상, ③ 안정성 증진, ④ 시공성 향상, ⑤ 비용절감, ⑥ 시민편익증진, ⑦ 민원해소, ⑧ 설계구조 보완, ⑨ 기능성, 사용성 증진
제비율 검증 이행여부	☑ 이행 □ 미이행

□ 관련문서

· 실정보고(본선교 P11 및 DRB P1 상수도 이설) - 글로(강남) 제 2015-121호(2015.03.10)실정보고

· 실정보고『본선교 P11 및 DRB P1 상수도 이설』 검토보고 - 서영강남 15-71호(2015.03.13)

· 승인 이첩 - 서영강남 15-76호, 업무연락전(도시기반시설본부-15-1430(2015.03.17)관련)

· 설계변경협의율 관련 문서 - 시책사업부-13283(2009.11.18), 임광(강남) 제 2009-191호(2009.11.23)

설계변경 소위원회 자문요청서

문서번호		요청부서	토목부 담당 시희식		요청일		2015년 4월 일
공 사 명	강남순환도시고속도로(4공구) 건설공사
공사개요	공사규모	폭: 왕복 4~8차로, 연장: L=2.48km 지하차도: 760m, 본선교량:820m, 토공: 900m
	공사기간	2001.12.29 ~ 2016.05.19
	감 리 사	㈜서영엔지니어링
	설 계 사	㈜서영엔지니어링
	시 공 사	글로웨이(주)
자문 안건명		본선(P11), 남북연결도로지하차도 터파기공법 변경				요청금액		증 382,000천원
자문요청사유		☑ 5,000만원 이상 변경사항 ▢ 부서(담당별)간 조정․통합이 필요한 경우
설계변경 유형		▢ 사업계획 변경(정책, 계획변경 등) ▢설계도서내용 불투명, 누락, 오류, 상호모순 ▢ 현장여건 상이(지질, 용수 등) ☑ 민원해결, 보수, 보강 ▢ 문화재 및 지장물 이설 ☑ 공법변경(신기술, 신공법 포함) ▢ 제도, 기준변경 ▢ 유관기관 협의 미흡
설계변경사항(요약) ○ 내용 : 1. 본선교 P11, 남북연결도로 지하차도 터파기시 기설계된 발파공법은 시험발파를 실시하여 민원, 지장물(보안물건)로 인해 경찰서로부터 불가 판정을 받음. 2. 대체공법으로 미진동굴착(TYPE-1, 기계적파쇄)를 반영하여 시공코져 함.
원설계자 의견(요약)
주 요 변 경 내 역 및 공 종
▪ 변경개요 - 당 초: 터파기/육상발파암(인력10%) - 변 경: 터파기/미진동굴착(TYPE-1, 기계적파쇄) ▪ 물량 증감내역 - 당 초 : P11(1,643m3), 지하차도(2,453m3) - 변 경 : P11(1,643m3), 지하차도(2,453m3) - 증 감 : -				▪ 공사비 증감내역 - 당 초 : 186,000 천원 - 변 경 : 568,000 천원 - 증 감 : 382,000 천원 ▪ 설계변경 주요 공종 - 토공사 등
별첨서류	1. 감리단 검토 의견서 1부. 2. 공사비 증·감 집계표 및 내역서 1부. 3. 수량산출서 1부. 4. 관련자료 1부. 5. 관련공문 1부.				▪ 공사예정시기 - 2015. 3월 ~ 2015년 4월 ▪ 소요관급자재 - 없음.

□ 전체분 공사현황

계 약 명 (공사명)	강남순환도시고속도로(4공구) 건설공사
계약금액	168,866,000천원	계약일	2001.12.28	시공사	글로웨이(주)
공사기간	2001.12.29 ~ 2016.05.19	협의율	82.25%	설계자	㈜서영엔지니어링
계약형태	공개경쟁입찰(●), 턴키( ), 대안( ) 장기계속공사( ), 계속비공사			감리자	㈜서영엔지니어링
공사규모	폭: 왕복 4~8차로, 연장: L=2.48km 지하차도: 760m, 본선교량:820m, 토공: 900m			※ 작성자 : 시희식 (☎ 02-3708-8662)

□ 자문안건 설계변경 현황

구 분	설 계 변 경 전		설 계 변 경 후	증/감
변 경 개 요	○ 미진동 발파		○ 미진동굴착(TYPE-1, 기계적파쇄)	증
공 사 비	186,000천원		568,000천원	382,000천원
적 용 요 율	협의율 82.25%		협의율 82.25%	적용율 82.25%
설계변경요구자	▢ 발주처 ☑ 계약상대자
협의율 적용 근거	본부장 방침 제599호
설계변경 근거	방 침	실정보고 승인(토목부-6038 2015.03.25)
	관련규정	공사계약일반조건 제19조 제1항
설계변경 유형	①사업계획 변경(정책, 기본계획 변경 등) ②설계도서 누락, 오류, 상호모순 등 ③현장여건 상이(지질, 용수 등) ④민원해결, 보수, 보강 ⑤문화재 및 지장물 이설 ⑥공법변경(신기술, 신공법 포함) ⑦제도, 기준변경 ⑧ 유관기관 협의 미흡
설계변경 내용	- 본선 P11, 남북연결도로 지하차도 터파기공법 변경
효 과	① 공기단축( 월), ② 품질향상, ③ 안정성 증진, ④ 시공성 향상, ⑤ 비용절감, ⑥ 시민편익증진, ⑦ 민원해소, ⑧ 설계구조 보완, ⑨ 기능성, 사용성 증진
제비율 검증 이행여부	☑ 이행 □ 미이행

□ 관련문서

· 실정보고(본선P11, 남북연결도로지하차도 터파기공법 변경) - 글로(강남) 제 2015-120호(2015.03.10)

· 실정보고『본선P11 터파기(암굴착)공법 변경』검토보고 - 서영강남 15-70호 (2015.3.19)

· 승인 이첩 - 서영강남 14-85호, 업무연락전(도시기반시설본부-15-1617호(2015.03.26.)관련)

· 설계변경협의율 관련 문서 - 시책사업부-13283(2009.11.18), 임광(강남) 제 2009-191호(2009.11.23)

설계변경 소위원회 자문요청서

문서번호		요청부서		토목부 담당 시희식		요청일		2015년 4월 일
공 사 명	강남순환도시고속도로(4공구) 건설공사
공사개요	공사규모		폭: 왕복 4~8차로, 연장: L=2.48km 지하차도: 760m, 본선교량:820m, 토공: 900m
	공사기간		2001.12.29 ~ 2016.05.19
	감 리 사		㈜서영엔지니어링
	설 계 사		㈜서영엔지니어링
	시 공 사		글로웨이(주)
자문 안건명			종점부 남북간연결도로 선형 변경 및 공사용 가교 설치				요청금액		증 259,000천원
자문요청사유			☑ 5,000만원 이상 변경사항 ▢ 부서(담당별)간 조정․통합이 필요한 경우
설계변경 유형			☑ 사업계획 변경(정책, 계획변경 등) ▢설계도서내용 불투명, 누락, 오류, 상호모순 ▢ 현장여건 상이(지질, 용수 등) ☑ 민원해결, 보수, 보강 ▢ 문화재 및 지장물 이설 ▢ 공법변경(신기술, 신공법 포함) ▢ 제도, 기준변경 ▢ 유관기관 협의 미흡
설계변경사항(요약) ○ 내용 : (주)중앙철재상가 민원(한경환 외 194인)을 반영하여 남북간연결도로선형변경 및 개통(‘16.5.19)을 위하여 공사용 가교(복공)의 설치가 필요함.
원설계자 의견(요약)
주 요 변 경 내 역 및 공 종
▪ 변경개요 - 당 초: 남북간연결도로(U-Type, Box-Type) - 변 경: 남북간연결도로 선형변경 및 공사용 가교설치 ▪ 물량 증감내역 - 당 초 : 남북간연결도로 (U-Type 61m, Box-Type 60m) - 변 경 : 공사용 가교 (B=6m, L=35m), 남북간연결도로 선형변경(U-Type 59.45m, Box-Type 61.46m) - 증 감 : 공사용 가교 (B=6m, L=35m) 남북간연결도로 선형변경					▪ 공사비 증감내역 - 당 초 : 1,933,000 천원 - 변 경 : 2,192,000 천원 - 증 감 : 259,000 천원 ▪ 설계변경 주요 공종 - 구조물공사 등
별첨서류	1. 감리단 검토 의견서 1부. 2. 공사비 증·감 집계표 및 내역서 1부. 3. 수량산출서 1부. 4. 관련자료 1부. 5. 관련공문 1부.					▪ 공사예정시기 - 2014. 12월 ~ 2015년 12월 ▪ 소요관급자재 - 없음.

□ 전체분 공사현황

계 약 명 (공사명)	강남순환도시고속도로(4공구) 건설공사
계약금액	168,866,000천원	계약일	2001.12.28	시공사	글로웨이(주)
공사기간	2001.12.29 ~ 2016.05.19	협의율	82.25%	설계자	㈜서영엔지니어링
계약형태	공개경쟁입찰(●), 턴키( ), 대안( ) 장기계속공사( ), 계속비공사			감리자	㈜서영엔지니어링
공사규모	폭: 왕복 4~8차로, 연장: L=2.48km 지하차도: 760m, 본선교량:820m, 토공: 900m			※ 작성자 : 시희식 (☎ 02-3708-8662)

□ 자문안건 설계변경 현황

구 분	설 계 변 경 전		설 계 변 경 후	증/감
변 경 개 요	○ 종점부 남북간연결도로 (U-Type 61m, Box-Type 60m)		○ 종점부 남북간연결도로선형 변경(U-Type 59.45m, Box-Type 61.46m) 및 공사용 가교 설치	증
공 사 비	1,933,000천원		2,192,000천원	259,000천원
적 용 요 율	협의율 82.25%		협의율 82.25%	적용율 82.25%
설계변경요구자	☑ 발주처 □ 계약상대자
협의율 적용 근거	본부장 방침 제599호
설계변경 근거	방 침	실정보고 승인(토목부-7645 2015.04.14)
	관련규정	공사계약일반조건 제19조 제1항
설계변경 유형	①사업계획 변경(정책, 기본계획 변경 등) ②설계도서 누락, 오류, 상호모순 등 ③현장여건 상이(지질, 용수 등) ④민원해결, 보수, 보강 ⑤문화재 및 지장물 이설 ⑥공법변경(신기술, 신공법 포함) ⑦제도, 기준변경 ⑧ 유관기관 협의 미흡
설계변경 내용	- 종점부 남북간연결도로 선형 변경 및 공사용 가교 설치
효 과	① 공기단축( 6월), ② 품질향상, ③ 안정성 증진, ④ 시공성 향상, ⑤ 비용절감, ⑥ 시민편익증진, ⑦ 민원해소, ⑧ 설계구조 보완, ⑨ 기능성, 사용성 증진
제비율 검증 이행여부	☑ 이행 □ 미이행

□ 관련문서

· 실정보고(남북간연결도로선형변경 및 공사용가교설치) - 글로(강남) 제 2015-156호(2015.03.23)

· 실정보고『종점부남북간연결도로선형변경및공사용가교설치』검토보고 - 서영강남 15-111호(2015.04.13)

· 승인 이첩 - 서영강남 15-111호, 업무연락전(도시기반시설본부-15-2102(2015.04.14)관련)

· 설계변경협의율 관련 문서 - 시책사업부-13283(2009.11.18), 임광(강남) 제 2009-191호(2009.11.23)