설계변경 소위원회 자문요청서(1)

문서번호

요청부서

토목부 이한규

요청일

2018년 01월

공 사 명

종로 중앙버스전용차로 설치공사

공사개요

공사규모

도로개설 L=3.8km, 버스정류소 15개소

공사기간

2017. 08. 29 ~ 2018. 04. 30

감 리 사

(주)제일엔지니어링외 1개사

설 계 사

(주)진화기술공사

시 공 사

천마산건설(주)

자문 안건명

가설휀스 설치 및 해체 실정보고

요청금액

404,349 천원

자문요청사유

☑ 5,000만원 이상 변경사항

▢ 부서(담당별)간 조정․통합이 필요한 경우

설계변경 유형

▢ 사업계획 변경(정책, 계획변경 등)

▢ 설계도서내용 불투명, 누락, 오류, 상호모순

☑ 현장여건 상이(지질, 용수 등)

▢ 민원해결, 보수, 보강

▢ 문화재 및 지장물 이설

▢ 공법변경(신기술, 신공법 포함)

▢ 제도, 기준변경

▢ 유관기관 협의 미흡

설계변경사항(요약)

○ 당초 반가림막휀스(3.0×1.0)을 가림막휀스(2.0×1.2)으로 변경하고 휀스를 추가설치하여 구간별

후속공정을 순차적으로 병행 시공하여 공기단축으로 년내 중앙버스 전용차로 개통 추진

원설계자 의견(요약)

○해당없음

주  요  변  경  내  역   및   공 종

▪ 변경개요

- 반가림막휀스(3.0×1.0)를 가림막휀스(2.0×1.2)로

변경하여 공사구간내 추가설치

▪ 물량 증감내역

- 당 초 :	가설휀스설치및해체	1,688	M
- 변 경 :	가설휀스설치및해체(구입)	3,000	M
	가설휀스설치맻해체(유용)	7,725	M

- 증 감 :	가설휀스설치해체	-1,688	M
	가설휀스설치및해체(구입)	3,000	M
	가설휀스설치맻해체(유용)	7,725	M

▪ 공사비 증감내역

- 당 초 :	19,514	천원
- 변 경 :	423,863	천원
- 증 감 :	404,349	천원

▪ 설계변경 주요 공종

- 부대공

별첨서류

1. 설계변경 심의자료 1부.

▪ 공사예정시기

: 2017년 9월 ~ 2017년 12월

▪ 소요관급자재 : 없음

□ 전체분 공사현황

계 약 명 (공사명)	종로 중앙버스전용차로 설치공사
계약금액	3,840,576,000	계약일	2017. 08. 23.	시공사	천마산건설(주)
공사기간	2017.08.29~2018.04.30	협의율	93.373%	설계자	(주)진화기술공사
계약형태	공개경쟁입찰(●), 턴키( ), 대안( ) 장기계속공사( ), 계속비공사			감리자	(주)제일엔지니어링
공사규모	도로개설 L=3.8km, 버스승강장 15개소			※ 작성자 : 이 한 규 (☎ 02-3396-2710)

□ 자문안건 설계변경 현황

구      분

설 계 변 경 전

설 계 변 경 후

증/감

변 경 개 요

휀스설치해체	1,688	M

휀스설치및해체(구입)	3,000	M
휀스칠치맻해체(유용)	7,725	M

휀스설치	감 1,688	M
휀스설치(구입)	3,000	M
휀스설치(유용)	7,725	M

공  사  비

19,514 천원

423,863 천원

404,349 천원

적 용 요 율

낙찰율(86.746%)

신규단가(협의율93.373%)

신규단가(협의율93.373%)

설계변경요구자

☑ 발주처  ▢ 계약상대자

협의율적용 근거

공사계약 일반조건 7절 “1- 나”(설계변경으로안한 계약금액조정)

설계변경 근거

방    침

실정보고(교통안전시설물(가설휀스) 변경 승인

도시기반시설본부-17-12264호(2017.12.20.)

관련규정

공사계약일반조건 제19조, 제20조 및 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에

관한 법률시행령 제74조에 의거 계약금액 조정.

설계변경 유형

①사업계획 변경(정책, 기본계획 변경 등) ②설계도서 누락, 오류, 상호모순 등

③현장여건 상이(지질, 용수 등) ④민원해결, 보수, 보강 ⑤문화재 및 지장물 이설

⑥공법변경(신기술, 신공법 포함) ⑦제도, 기준변경 ⑧ 유관기관 협의 미흡

설계변경 내용

○ 가설휀스를 추가설치하여 년내 중앙버스 전용차로 개통을 위한 공기단축 시행

효      과

① 공기단축, ② 품질향상, ③ 안정성 증진,  ④ 시공성 향상, ⑤ 비용절감,

⑥ 시민편익증진, ⑦ 민원해소, ⑧ 설계구조 보완, ⑨ 기능성, 사용성 증진

제비율 검증

이행여부

☑ 이행  ▢ 미이행

□ 관련문서

1)실정보고(교통안전시설물(가설휀스) 변경 승인

도시기반시설본부-17-12264호(2017.12.20.)

설계변경 소위원회 자문요청서(2)

문서번호

요청부서

토목부 이한규

요청일

2018년 01월

공 사 명

종로 중앙버스전용차로 설치공사

공사개요

공사규모

도로개설 L=3.8km, 버스정류소 15개소

공사기간

2017. 08. 29 ~ 2018. 04. 30

감 리 사

(주)제일엔지니어링외 1개사

설 계 사

(주)진화기술공사

시 공 사

천마산건설(주)

자문 안건명

아스팔트깨기(평삭)변경 실정보고

요청금액

130,812 천원

자문요청사유

☑ 5,000만원 이상 변경사항

▢ 부서(담당별)간 조정․통합이 필요한 경우

설계변경 유형

▢ 사업계획 변경(정책, 계획변경 등)

▢ 설계도서내용 불투명, 누락, 오류, 상호모순

☑ 현장여건 상이(지질, 용수 등)

▢ 민원해결, 보수, 보강

▢ 문화재 및 지장물 이설

▢ 공법변경(신기술, 신공법 포함)

▢ 제도, 기준변경

▢ 유관기관 협의 미흡

설계변경사항(요약)

○ 당초 중앙차로 아스팔트깨기가 평삭20cm(7cm×3회)+터파기(또는 브레카) 10cm로 되어 있는 것을

15cm×2회로 변경하여 공기단축을 시행하고 2017년말 중앙버스 전용차로 개통 추진

원설계자 의견(요약)

○현장여건에 맞게 설계변경하여 반영 요망

주  요  변  경  내  역   및   공 종

▪ 변경개요

- 당초 아스팔트깨기(평삭20cm+터파기10cm를

15cm×2회)를 15cm×2회로 변경하여 시행

▪ 물량 증감내역

- 당 초 :	아스팔트깨기(T=20cm)	28,829	M2
	터파기및사토	2,373	M3
- 변 경 :	아스팔트깨기(T=30cm)	24,348	M3

- 증 감 :	아스팔트깨기(T=20cm)	-28,829	M2
	터파기 및 사토	-2,373	M3
	아스팔트깨기(T=30cm)	24,348	M2

▪ 공사비 증감내역

- 당 초 :	229,856	천원
- 변 경 :	360,668	천원
- 증 감 :	130,812	천원

▪ 설계변경 주요 공종

- 토공

별첨서류

1. 설계변경 심의자료 1부.

▪ 공사예정시기

: 2017년 9월 ~ 2017년 12월

▪ 소요관급자재 : 없음

□ 전체분 공사현황

계 약 명 (공사명)	종로 중앙버스전용차로 설치공사
계약금액	3,840,576,000	계약일	2017. 08. 23.	시공사	천마산건설(주)
공사기간	2017.08.29~2018.04.30	낙찰율	86.746%	설계자	(주)진화기술공사
계약형태	공개경쟁입찰(●), 턴키( ), 대안( ) 장기계속공사( ), 계속비공사			감리자	(주)제일엔지니어링
공사규모	도로개설 L=3.8km, 버스승강장 15개소			※ 작성자 : 이 한 규 (☎ 02-3396-2710)

□ 자문안건 설계변경 현황

구      분

설 계 변 경 전

설 계 변 경 후

증/감

변 경 개 요

아스팔트평삭 (T=20cm,7cm×3회)	28,929	M2
터파기및사토	2,373	M3

아스팔트평삭 (T=30cm,15cm×2회)	24,348	M3

아스팔트평삭 (20cm)	감 28,829	M
터파기및사토	감 2,737	M
아스팔트평삭 (T=30cm)	24,348	M

공  사  비

229,856 천원

360,668 천원

130,812 천원

적 용 요 율

기존단가

신규단가(낙찰율 86.746%)

신규단가(낙찰율 86.746%)

설계변경요구자

☑ 발주처  ▢ 계약상대자

협의율적용 근거

해당없음

설계변경 근거

방    침

실정보고(아스팔트깨기(평삭) 변경) 승인

도시기반시설본부-18-259호(2018.01.09.)

관련규정

공사계약일반조건 제19조, 제20조 및 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에

관한 법률시행령 제74조에 의거 계약금액 조정.

설계변경 유형

①사업계획 변경(정책, 기본계획 변경 등) ②설계도서 누락, 오류, 상호모순 등

③현장여건 상이(지질, 용수 등) ④민원해결, 보수, 보강 ⑤문화재 및 지장물 이설

⑥공법변경(신기술, 신공법 포함) ⑦제도, 기준변경 ⑧ 유관기관 협의 미흡

설계변경 내용

○  당초 중앙차로 아스팔트깨기가 평삭20cm(7cm×3회)+터파기10cm로 되어 있는 것을

15cm×2회로 변경하여 공기단축을 시행하고 2017년말 중앙버스 전용차로 개통 추진

효      과

① 공기단축, ② 품질향상, ③ 안정성 증진,  ④ 시공성 향상, ⑤ 비용절감,

⑥ 시민편익증진, ⑦ 민원해소, ⑧ 설계구조 보완, ⑨ 기능성, 사용성 증진

제비율 검증

이행여부

☑ 이행  ▢ 미이행

□ 관련문서

1)실정보고(아스팔트깨기(평삭) 변경) 승인

도시기반시설본부-18-259호(2018.01.09.)

설계변경 소위원회 자문요청서(3)

문서번호

요청부서

토목부 이한규

요청일

2018년 01월

공 사 명

종로 중앙버스전용차로 설치공사

공사개요

공사규모

도로개설 L=3.8km, 버스정류소 15개소

공사기간

2017. 08. 29 ~ 2018. 04. 30

감 리 사

(주)제일엔지니어링외 1개사

설 계 사

(주)진화기술공사

시 공 사

천마산건설(주)

자문 안건명

이동식정류소 초속경콘크리트 타설

요청금액

243,000 천원

자문요청사유

☑ 5,000만원 이상 변경사항

▢ 부서(담당별)간 조정․통합이 필요한 경우

설계변경 유형

▢ 사업계획 변경(정책, 계획변경 등)

▢ 설계도서내용 불투명, 누락, 오류, 상호모순

☑ 현장여건 상이(지질, 용수 등)

▢ 민원해결, 보수, 보강

▢ 문화재 및 지장물 이설

▢ 공법변경(신기술, 신공법 포함)

▢ 제도, 기준변경

▢ 유관기관 협의 미흡

설계변경사항(요약)

○ 2017년말 중앙버스전용차로 개통을 위한 절대공기 부족을 극복하고 후속작업(이동식 모듈설치,

전기,통신등)이 원활하게 진행될 수 있도록 이동식 정류장 4개소에 기초 뒤채움콘크리트를 초속경

콘크리트로 타설

원설계자 의견(요약)

○해당없음

주  요  변  경  내  역   및   공 종

▪ 변경개요

- 이동식 정류장 4개소에 초속경콘크리트타설로 공기부족을 극복하고 후속공종을 원활하게 진행

▪ 물량 증감내역

- 당 초 :	-
- 변 경 :	초속경콘크리트타설	202	M3

- 증 감 :	초속경콘크리트타설	202	M3

▪ 공사비 증감내역

- 당 초 :	-	천원
- 변 경 :	243,100	천원
- 증 감 :	243,100	천원

▪ 설계변경 주요 공종

- 토공

별첨서류

1. 설계변경 심의자료 1부.

▪ 공사예정시기

: 2017년 12월 ~ 2017년 12월

▪ 소요관급자재 : 없음

□ 전체분 공사현황

계 약 명 (공사명)	종로 중앙버스전용차로 설치공사
계약금액	3,840,576,000	계약일	2017. 08. 23.	시공사	천마산건설(주)
공사기간	2017.08.29~2018.04.30	협의율	93.373%	설계자	(주)진화기술공사
계약형태	공개경쟁입찰(●), 턴키( ), 대안( ) 장기계속공사( ), 계속비공사			감리자	(주)제일엔지니어링
공사규모	도로개설 L=3.8km, 버스승강장 15개소			※ 작성자 : 이 한 규 (☎ 02-3396-2710)

□ 자문안건 설계변경 현황

구      분

설 계 변 경 전

설 계 변 경 후

증/감

변 경 개 요

-

초속경콘크리트타설	202	M3

초속경콘크리트타설	202	M3

공  사  비

-

243,100 천원

243,100 천원

적 용 요 율

신규단가(협의율 93.373%)

신규단가(협의율 93.373%)

설계변경요구자

☑ 발주처  ▢ 계약상대자

협의율적용 근거

공사계약 일반조건 7절 “1- 나”(설계변경으로안한 계약금액조정)

설계변경 근거

방    침

실정보고(이동식정류소 기초터파기 뒷채움 콘크리트시공방법 변경) 승인

도시기반시설본부-18-405호(2018.01.15.)

관련규정

공사계약일반조건 제19조, 제20조 및 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에

관한 법률시행령 제74조에 의거 계약금액 조정.

설계변경 유형

①사업계획 변경(정책, 기본계획 변경 등) ②설계도서 누락, 오류, 상호모순 등

③현장여건 상이(지질, 용수 등) ④민원해결, 보수, 보강 ⑤문화재 및 지장물 이설

⑥공법변경(신기술, 신공법 포함) ⑦제도, 기준변경 ⑧ 유관기관 협의 미흡

설계변경 내용

○  2017년말 중앙버스전용차로 개통을 위한 절대공기 부족을 극복하고 후속작업이 원활하게 진행될 수 있도록 이동식 정류장 4개소에 기초 뒤채움콘크리트를 초속경콘크리트로 타설

효      과

① 공기단축, ② 품질향상, ③ 안정성 증진,  ④ 시공성 향상, ⑤ 비용절감,

⑥ 시민편익증진, ⑦ 민원해소, ⑧ 설계구조 보완, ⑨ 기능성, 사용성 증진

제비율 검증

이행여부

☑ 이행  ▢ 미이행

□ 관련문서

1)실정보고(이동식정류소 기초터파기 뒷채움 콘크리트시공방법 변경) 승인

도시기반시설본부-18-405호(2018.01.15.)

설계변경 소위원회 자문요청서(4)

문서번호

요청부서

토목부 이한규

요청일

2018년 01월

공 사 명

종로 중앙버스전용차로 설치공사

공사개요

공사규모

도로개설 L=3.8km, 버스정류소 15개소

공사기간

2017. 08. 29 ~ 2018. 04. 30

감 리 사

(주)제일엔지니어링외 1개사

설 계 사

(주)진화기술공사

시 공 사

천마산건설(주)

자문 안건명

횡단보도주변 보도정비 및 이동식정류소 추가 등 세부설계도서 제출건 내역 변경

요청금액

1,897,897 천원

자문요청사유

☑ 5,000만원 이상 변경사항

▢ 부서(담당별)간 조정․통합이 필요한 경우

설계변경 유형

☑ 사업계획 변경(정책, 계획변경 등)

▢ 설계도서내용 불투명, 누락, 오류, 상호모순

▢ 현장여건 상이(지질, 용수 등)

▢ 민원해결, 보수, 보강

▢ 문화재 및 지장물 이설

▢ 공법변경(신기술, 신공법 포함)

▢ 제도, 기준변경

▢ 유관기관 협의 미흡

설계변경사항(요약)

○ 교통운영과-20874호(2017.11.01.) 및 도시기반시설본부-17-10627호(2017.11.06.)와 관련하여 추가공사(이동식 승강장 및 횡단보도 턱낮춤, 보도정비) 시행으로 인한 설계도서 배포 및 변경 사항을 내역에 반영코자함.

원설계자 의견(요약)

○해당없음

주  요  변  경  내  역   및   공 종

▪ 변경개요

- 추가공사(이동식 정류소, 신설 횡단보도구간

턱낮춤, 보도정비) 시행에 따른 내역 변경

▪ 물량 증감내역

- 당 초 :	고정식 정류소 2개소
	보도 574m2, 경계석 370m
- 변 경 :	고정식 2개소, 이동식13개소
	보도 8,929m2, 경계석 2,313m

- 증 감 :	이동식정류장13개소
	보도 8,355m2, 경계석 1,943m

▪ 공사비 증감내역

- 당 초 :	3,840,576	천원
- 변 경 :	5,738,473	천원
- 증 감 :	1,897,897	천원

▪ 설계변경 주요 공종

- 토공

별첨서류

1. 설계변경 심의자료 1부.

▪ 공사예정시기

: 2017년 9월 ~ 2018년 4월

▪ 소요관급자재 : 없음

□ 전체분 공사현황

계 약 명 (공사명)	종로 중앙버스전용차로 설치공사
계약금액	3,840,576,000	계약일	2017. 08. 23.	시공사	천마산건설(주)
공사기간	2017.08.29~2018.04.30	협의율	93.373%	설계자	(주)진화기술공사
계약형태	공개경쟁입찰(●), 턴키( ), 대안( ) 장기계속공사( ), 계속비공사			감리자	(주)제일엔지니어링
공사규모	도로개설 L=3.8km, 버스승강장 15개소			※ 작성자 : 이 한 규 (☎ 02-3396-2710)

□ 자문안건 설계변경 현황

구      분

설 계 변 경 전

설 계 변 경 후

증/감

변 경 개 요

고정식 정류소 2개소

보도 574m2, 경계석 370m

고정식2개소 + 이동식 13개소

보도 8,929m2, 경계석 2,313m

이동식 13개소

보도 8,355m2, 경계석1,943m

공  사  비

3,840,576 천원

5,738,473 천원

1,897,897 천원

적 용 요 율

기존단가

신규단가(협의율 93.373%)

신규단가(협의율 93.373%)

설계변경요구자

☑ 발주처  ▢ 계약상대자

협의율적용 근거

공사계약 일반조건 7절 “1- 나”(설계변경으로안한 계약금액조정)

설계변경 근거

방    침

실정보고(횡단보도 주변 보도정비 및 이동식 정류소 추가 등 세부설계서 제출건) 승인

도시기반시설본부-17-12600호(2017.12.21.)

관련규정

공사계약일반조건 제19조, 제20조 및 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에

관한 법률시행령 제74조에 의거 계약금액 조정.

설계변경 유형

①사업계획 변경(정책, 기본계획 변경 등) ②설계도서 누락, 오류, 상호모순 등

③현장여건 상이(지질, 용수 등) ④민원해결, 보수, 보강 ⑤문화재 및 지장물 이설

⑥공법변경(신기술, 신공법 포함) ⑦제도, 기준변경 ⑧ 유관기관 협의 미흡

설계변경 내용

○ 교통운영과-20874호(2017.11.01.) 및 도시기반시설본부-17-10627호(2017.11.06.)와 관련하여 추가공사(이동식 승강장 및 횡단보도 턱낮춤, 보도정비) 시행으로 인한 설계도서 배포 및 변경 사항을 내역에 반영코자함.

효      과

① 공기단축, ② 품질향상, ③ 안정성 증진,  ④ 시공성 향상, ⑤ 비용절감,

⑥ 시민편익증진, ⑦ 민원해소, ⑧ 설계구조 보완, ⑨ 기능성, 사용성 증진

제비율 검증

이행여부

☑ 이행  ▢ 미이행

□ 관련문서

1)공사계약일반조건 제19조, 제20조 및 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에

관한 법률시행령 제74조에 의거 계약금액 조정.