□ 설계변경 소위원회 자문요청 목록

연번	건 명	변 경 사 유	금 액(천원)			비 고
			당 초	변 경	증ㆍ감
1	개봉역앞 유수장애 지장물(상수도) 이설공사	▷ 『남부순환로(개봉역앞)구조개선공사』중 개봉역앞 유수장애 지장물(상수관D=250㎜) 이설공사와 관련 하여 유지관리 부서인 강서수도사업소로부터 이설승인 조건에 의해 기존 상수관로 용량 확대요청 및 기존 수로암거하부 하월공사(강관추진)등 이설승인 조건 반영을 위한 공사비 변경	25,300	282,964	증)257,664
계			25,300	282,964	증)257,664

○ 공사명 : 남부순환로(개봉역앞)구조개선공사                                                                 2015. 2. 6.