◆ 자연과 인간의 공간창조 기업 도화 ◆
	(주) 도 화 엔 지 니 어 링 Dohwa Engineering Co.,LTD.

수   신 : 서울특별시 도시기반시설본부장

참   조 : 설비부장

제    목 : 설계변경 소위원회 자문요청「서남물재생센터내 공원 재이용수 공급관로부설」

1. 귀 본부의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 설비부 - 11176(2017.7.14)호와 관련입니다

3. 위호와 관련하여「마곡지구 재생수 공급시설 설치공사」중 실정보고(서남물재생센터 공원 재이용수 공급관로 부설 건) 승인사항에 대한 설계변경 소위원회 자문을 요청 하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

붙    임 : 1. 설계변경 위원회 자문요청서  1부.  끝.

서남물재생센터 고도처리 및 시설현대화사업

전면책임감리용역 책임감리원 김  봉  주(인)

담당/이사 이종렬(*************)                                     감리단장 : 김봉주

협조자

시  행 : 도화(서남)2016- 212호(2016.07.14)              접  수 :         (2016.   .   .)

우 157-845 서울특별시 강서구 방화 3동 65-2                 / 홈페이지 www.dohwa.co.kr

전화 (02)2661-6435 /전송 (02)2661-6437               / 이메일 ozzie@dohwa.co.kr/ 공개

설계변경 소위원회 자문요청서

문서번호		요청부서		설비부		요청일		2016년 07월 일
공 사 명	마곡지구내 재생수 공급시설 설치공사
공사개요	공사규모		재생수공급 20,000톤/일
	공사기간		2011. 11. 01. ~ 2016. 07. 31.
	감 리 사		(주)도화엔지니어링외 1개사
	설 계 사		㈜동명기술공단 종합 건축사무소외 1개사
	시 공 사		(주)유호산업개발
자문 안건명			서남물재생센터내 공원 재이용수 공급관로부설 공사비 검토				요청금액 (증액)		61,820천원
자문요청사유			☑ 5,000만원 이상 변경사항 ▢ 부서(담당별)간 조정․통합이 필요한 경우
설계변경 유형			☑ 사업계획 변경(정책, 계획변경 등) ▢ 설계도서내용 불투명, 누락, 오류, 상호모순 ▢ 현장여건 상이(지질, 용수 등) ▢ 민원해결, 보수, 보강 ▢ 문화재 및 지장물 이설 ▢ 공법변경(신기술, 신공법 포함) ▢ 제도, 기준변경 ▢ 유관기관 협의 미흡
설계변경사항(요약) ○ 내용 : 재이용수 활용방안으로 서남환경내 생태연못 및 홍보견학코스(976㎥/일) 2곳에 관로 부설에 따른 추가공사 검토 - 물순환정책과 –2177(2016.2.5.) 마곡지구내 재생수 공급시기 조정에 따른 협조(조치) - 방재시설부–1987(2016,2.12)호 마곡지구내 재생수 공급시기 조정 통보 - 방재시설부-7390(2016.5.19.)호 재이용수 관로 부설공사 관련 협의율 통보
원설계자 의견(요약) ○ 내용 : 없음
주 요 변 경 내 역 및 공 종
▪ 변경개요 - 공급관로 신설 ▪ 물량 증감내역 - 당 초 : - 변 경 : 1식 - 증 감 : 1식					▪ 공사비 증감내역 - 당 초 : -천원 - 변 경 : 61,820천원 - 증 감 : 61,820천원 ▪ 설계변경 주요 공종 - 관로설치, 수중펌프 설치, 부대공사
별첨서류	1. 실정보고 사본 1부. 2. 변경후 도면 사본 1부.					▪ 공사예정시기 2016. 11. ~ ▪ 소요관급자재 - 없음.

□ 전체분 공사현황

계 약 명 (공사명)	마곡지구내 재생수 공급시설 설치공사
계약금액	17,717백만원	계약일	2011.10.24	시공사	(주)유호산업개발
공사기간	2011.11.01.~2016.07.31	낙찰율	87,172%	설계자	㈜동명기술공단종합건축사무소외 1개사
계약형태	공개경쟁입찰(●), 턴키( ), 대안( ) 장기계속공사(●), 계속비공사			감리자	(주)도화엔지니어링외 1개사
공사규모	□ 재생수처리시설 : 공급량 20,000M3/일 □ 유입펌프장 : 공급량 20,000M3/일 □ 관로공사 :연장L=1,343M(DCIP200mm~600mm) □ 기계공사 : 1식 □ 조경공사 : 1식			※ 작성자 : 업무담당 김 도 형 (☎02-3708-8619)

□ 자문안건 설계변경 현황

구 분	설 계 변 경 전		설 계 변 경 후	증/감
변 경 개 요			생태연못및홍보견학코스(976㎥/일) 2곳에 관로 부설에 따른 추가공사 공사비 증,감	좌 동
공 사 비	-천원		61,820천원	61,820천원
적 용 요 율	-		낙찰율 90.37%	낙찰율 90.37%
설계변경요구자	☑ 발주처 □ 계약상대자
협의율 적용 근거	해당없음
설계변경 근거	방 침	실정보고 승인 (도시기반시설본부 설비부-11176(2016.07.14))
	관련규정	공사계약일반조건 제20조
설계변경 유형	①사업계획 변경(정책, 기본계획 변경 등) ②설계도서 누락, 오류, 상호모순 등 ③현장여건 상이(지질, 용수 등) ④민원해결, 보수, 보강 ⑤문화재 및 지장물 이설 ⑥공법변경(신기술, 신공법 포함) ⑦제도, 기준변경 ⑧ 유관기관 협의 미흡
설계변경 내용	마곡 재이용수 활용방안으로 서남환경내 생태연못 및 홍보견학코스(976㎥/일) 2곳에 관로 부설에 따른 추가공사 검토
효 과	① 공기단축( 월), ② 품질향상, ③ 안정성 증진, ④ 시공성 향상, ⑤ 비용절감, ⑥ 시민편익증진, ⑦ 민원해소, ⑧ 설계구조 보완, ⑨ 기능성, 사용성 증진
제비율 검증 이행여부	☑ 이행 □ 미이행

□ 관련문서

· 서울특별시 도시기반시설본부 설비부-11176(2016.07.14) 실정보고 승인통보