설계변경 소위원회 자문요청서

문서번호		요청부서		토목부 담당 정문수		요청일		2014년 6월 일
공 사 명	남부순환로~오정대로간 도로개설공사
공사개요	공사규모		도로개설(L=1.23km, 도로폭 B= 40.0m, 교량1개소(L=43.08m, 폭11.9m))
	공사기간		2010. 09. 29. ~ 2014. 10. 07.
	감 리 사		(주)수성엔지니어링
	설 계 사		(주)도화엔지니어링, (주)경동엔지니어링
	시 공 사		보훈종합건설(주)
자문 안건명			육군 제5602부대 추가요청사항				요청금액		94,350천원
자문요청사유			☑ 3,000만원 이상 변경사항 ▢ 부서(담당별)간 조정․통합이 필요한 경우
설계변경 유형			▢ 사업계획 변경(정책, 계획변경 등) ▢ 설계도서내용 불투명, 누락, 오류, 상호모순 ▢ 현장여건 상이(지질, 용수 등) ▢ 민원해결, 보수, 보강 ▢ 문화재 및 지장물 이설 ▢ 공법변경(신기술, 신공법 포함) ▢ 제도, 기준변경 ☑ 유관기관 협의
설계변경사항(요약) ○ 내용 : "남부순환로~오정대로간 도로개설공사"의 진행중 계획된 본선과 제5602부대의 저촉되는 공사구간에 대하여 군부대와의 협의결과(군부대 요구사항)를 반영하여 공사를 진행중, 추가로 요청한 사항(차폐 시설 연장변경외)을 설계에 반영하고자 실정보고함.
원설계자 의견(요약) ○ 내용 : 없음
주 요 변 경 내 역 및 공 종
▪ 변경개요 - 육군 제5602부대 요구사항 설계에 반영 ▪ 물량 증감내역 ○당초물량 - 차폐시설(H=3.0m) : 310.0m - 배수로 : 213.0m ○변경물량 - 차폐시설(H=3.0m) : 324.0m - 배수로 : 275.5m - SeedSpray : 6,872㎡					▪ 공사비 증감내역 - 당 초 : 755,770천원 - 변 경 : 850,120천원 - 증 감 : 증 94,350천원 ▪ 설계변경 주요 공종 - 초소(신형), 순찰로, 비탈면안정공, 차폐시설
별첨서류	1. 변경전후 도면 사본 1부. 2. 감리단 검토보고서 사본 1부 3. 신규공종 단가결정 근거 1부. 4. 설계내역서 1부.					▪ 공사예정시기 2014년 8월 완료 예정 ▪ 소요관급자재 -레미콘, 흄관, 보도블럭, 철근

□ 전체분 공사현황

계 약 명 (공사명)	남부순환로~오정대로간 도로개설공사
계약금액	9,999,900천원	계약일	2010.09.01	시공사	보훈종합건설(주)
공사기간	2010.09.29 ~ 2014.10.07	낙찰율	85.515%	설계자	(주)경동엔지니어링 (주)도화엔지니어링
계약형태	공개경쟁입찰(●), 턴키( ), 대안( ) 장기계속공사(●), 계속비공사			감리자	(주)수성엔지니어링
공사규모	-도로개설(폭 40m, 연장 1.23km) 교량1개소(L=43.08m, 폭11.9m)			※ 작성자 : 정문수(☎3708-2561)

□ 자문안건 설계변경 현황

구 분	설 계 변 경 전		설 계 변 경 후	증/감
변 경 개 요	- 차폐시설(H=3.0m) : 310.0m - 배수로 : 213.0m		- 차폐시설(H=3.0m) : 324.0m - 배수로 : 275.5m - SeedSpray : 6,872㎡
공 사 비	755,770천원		850,120천원	증 94,350천원
적 용 요 율	낙찰율 85.515%		신규비목 협의율 92.75%
설계변경요구자	☑ 발주처 ▢ 계약상대자
협의율 적용 근거	토목부-SMIH-14-24310 (2014. 4.25)
설계변경 근거	방 침	토목부-SMIH-14-24310 (2014. 4.25)-실정보고 승인알림
	관련규정	지방자치단체 공사계약일반조건.제26조 ②항
설계변경 유형	①사업계획 변경(정책, 기본계획 변경 등) ②설계도서 누락, 오류, 상호모순 등 ③현장여건 상이(지질, 용수 등) ④민원해결, 보수, 보강 ⑤문화재 및 지장물 이설 ⑥공법변경(신기술, 신공법 포함) ⑦제도, 기준변경 ⑧ 유관기관 협의 미흡
설계변경 내용	"남부순환로~오정대로간 도로개설공사"의 진행중 계획된 본선과 제5602부대의 저촉되는 공사구간에 대하여 군부대와의 협의결과(군부대 요구사항)를 반영하여 공사를 진행중, 추가로 요청한 사항(차폐시설 연장변경외)을 설계에 반영하고자 실정보고함.
효 과	① 공기단축( 개월), ② 품질향상, ③ 안정성 증진, ④ 시공성 향상, ⑤ 비용절감, ⑥ 시민편익증진, ⑦ 민원해소, ⑧ 설계구조 보완, ⑨ 기능성, 사용성 증진

□ 관련문서

· 토목부-SMIH-14-22630 (2014. 4.10)-실정보고 요청알림

· 현장실정보고(제5602부대 추가요청사항-차폐시설연장변경외)제출 - 오정제2014-73(2014.4.18)

· 토목부-SMIH-14-24310 (2014. 4.25)-실정보고 승인알림