설계변경 소위원회 자문요청서

문서번호		요청부서		토목부 담당 정문수		요청일		2014년 6월 일
공 사 명	남부순환로~오정대로간 도로개설공사
공사개요	공사규모		도로개설(L=1.23km, 도로폭 B= 40.0m, 교량1개소(L=43.08m, 폭11.9m))
	공사기간		2010. 09. 29. ~ 2014. 10. 07.
	감 리 사		(주)수성엔지니어링
	설 계 사		(주)도화엔지니어링, (주)경동엔지니어링
	시 공 사		보훈종합건설(주)
자문 안건명			수로암거 변경시공				요청금액		67,550천원
자문요청사유			☑ 3,000만원 이상 변경사항 ▢ 부서(담당별)간 조정․통합이 필요한 경우
설계변경 유형			▢ 사업계획 변경(정책, 계획변경 등) ▢ 설계도서내용 불투명, 누락, 오류, 상호모순 ☑ 현장여건 상이(지질, 용수 등) ☑ 민원해결, 보수, 보강 ▢ 문화재 및 지장물 이설 ☑ 공법변경(신기술, 신공법 포함) ▢ 제도, 기준변경 ▢ 유관기관 협의
설계변경사항(요약) ○ 내용 : 남부순환로~오정대로간 도로개설공사를 진행중 강서구 도시계획도로(본선 STA.NO 0+442)의 수로암거를 시공함에 있어, 공사추진중 당초 설계대로 시공이 불가함(사유지 침범,기존통행로 유지안됨, 우기전 시공 불가능)으로 기존 강서구 도시계획도로를 이용하는 주민들의 민원발생을 최소화하는 시공방안 (현장타설 콘크리트 암거 → 조립식 PC암거)으로 변경
원설계자 의견(요약) ○ 내용 : 우회도로를 설치하여 기존교통을 우회시키고, PC암거로 짧은 기간안에 시공하는 방안이 타당할것으로 판단됨. 또한, 메이필드부지 하부에서 나오는 우수를 해결하기 위하여 추가 관로(Φ600mm)를 설치하여 본도로의 우수관에 연결하는 방안도 타당할것으로 판단됨.
주 요 변 경 내 역 및 공 종
▪ 변경개요 - 현장타설 콘크리트 암거 → 조립식 PC암거 ▪ 물량 증감내역 ○당초물량 - 현장타설 콘크리트 암거 : 139.8m - 가설울타리 EGI휀스 : 374.0m ○변경물량 - 조립식 PC암거 146.0m + 연결부 3.4m =149.4m - 횡배수관(Φ600mm) : 35.0m - 가림막휀스 : 230.0m					▪ 공사비 증감내역 - 당 초 : 239,750천원 - 변 경 : 307,300천원 - 증 감 : 증 67,550천원 ▪ 설계변경 주요 공종 - 배수공 : 횡배수관공, 수로암거공 - 부대공 : 가도설치
별첨서류	1. 변경전후 도면 사본 1부. 2. 감리단 검토보고서 사본 1부 3. 신규공종 단가결정 근거 1부. 4. 설계내역서 1부.					▪ 공사예정시기 2014년 6월까지 완료 예정 ▪ 소요관급자재 -레미콘, 철근, VR관

□ 전체분 공사현황

계 약 명 (공사명)	남부순환로~오정대로간 도로개설공사
계약금액	9,999,900천원	계약일	2010. 09. 01	시공사	보훈종합건설(주)
공사기간	2010.09.29 ~ 2014.10.07	낙찰율	85.515%	설계자	(주)경동엔지니어링 (주)도화엔지니어링
계약형태	공개경쟁입찰(●), 턴키( ), 대안( ) 장기계속공사(●), 계속비공사			감리자	(주)수성엔지니어링
공사규모	-도로개설(폭 40m, 연장 1.23km) 교량1개소(L=43.08m, 폭11.9m)			※ 작성자 : 정문수(☎3708-2561)

□ 자문안건 설계변경 현황

구 분	설 계 변 경 전		설 계 변 경 후	증/감
변 경 개 요	- 현장타설 콘크리트 암거 : 139.8m - 가설울타리 EGI휀스 : 374.0m		- PC암거 146.0m + 연결부 3.4m - 횡배수관(Φ600mm) : 35.0m - 가림막휀스 : 230.0m
공 사 비	239,750천원		307,300천원	증 67,550천원
적 용 요 율	낙찰율 85.515%		신규비목 협의율 92.75%
설계변경요구자	☑ 발주처 ▢ 계약상대자
협의율 적용 근거	토목부-SMIH-14-24311 (2014. 4.25)
설계변경 근거	방 침	토목부-SMIH-14-24311 (2014. 4.25)-실정보고 승인알림
	관련규정	지방자치단체 공사계약일반조건. 제26조 ②항
설계변경 유형	①사업계획 변경(정책, 기본계획 변경 등) ②설계도서 누락, 오류, 상호모순 등 ③현장여건 상이(지질, 용수 등) ④민원해결, 보수, 보강 ⑤문화재 및 지장물 이설 ⑥공법변경(신기술, 신공법 포함) ⑦제도, 기준변경 ⑧ 유관기관 협의 미흡
설계변경 내용	강서구 도시계획도로(본선 STA.NO 0+442)의 수로암거를 시공함에 있어, 공사추진중 당초 설계대로 시공이 불가함(사유지 침범,기존통행로 유지안됨, 우기전 시공 불가능)으로 기존 강서구 도시계획 도로를 이용하는 주민들의 민원발생을 최소화하는 시공방안(현장타설 콘크리트 암거 → 조립식 PC암거)으로 변경
효 과	① 공기단축( 4개월), ② 품질향상, ③ 안정성 증진, ④ 시공성 향상, ⑤ 비용절감, ⑥ 시민편익증진, ⑦ 민원해소, ⑧ 설계구조 보완, ⑨ 기능성, 사용성 증진

□ 관련문서

· 오정제2014-52호(2014.03.28)-수로암거 변경 검토 요청

· 도화(도로)-2014-A20-0030호(2014.4.3)-수로암거 변경에 대한 설계사 의견

· 오정제2014-63호(2014.04.10)-현장실정보고제출(수로암거변경(조립식PC암거) 시공)

· 토목부-SMIH-14-24311호(2014.4.25)-실정보고 승인알림