설 계 변 경 사 유 서(2회)

1. 공 사 명 : 화랑고가 성능개선공사

가. 설계변경 사유 및 내용

1. 공사 실정보고에 의한 변경

가) 교량 점검로 철거 후 재설치

◯ 당초 2개소였던 연단보강부가 14개소로 증가 연단보강을 하기 위해서는 기존 점검로를 철거 후

재설치가 필요한 실정임.

◯ 교량점검로 재설치 반영(금회 변경시 단가적용, 수량 미반영)

나) 콘크리트 구멍뚫기 및 케미컬 주입수 증가

◯ 신규 연단보강부의 추가적인 안정성 확보를 위해 콘크리트 내부에 정착하여 시공이 필요한 실정임.

- 콘크리트 구멍뚫기 및 케미컬 주입 증가

※ 철근의 콘크리트 내부 정착 시공은 설계사 의견 검토 사항

다) 사급자재 미적용

◯ 교좌장치의 받침부와 앵커고정부의 고정 철판(열연강판, 후판)이 수량산출 오류로 인해 내역서 사급자재

부분에 미적용된 실정임.

- 철판(열연강판, 후판) 증가

※ 강재 물량 변경은 설계사 의견(확인) 검토 사항

라) 교량점검로 철거에 따른 고재대 반영

◯ 고재 처리 실측 및 계근 물량 적용예정

※ 계근중량표 첨부 예정

⇒ 관련근거 : 실정보고 [공사감독2처 - 9293(2014.06.19)]

연단보강 인상방안 및 연단보강 상세도 제출건[삼림제14090호 2014.04.11]

강재 변경 물량 확인[삼림제14-162호 2014.06.16]

실정보고 승인 [시설보수과 - 4584 (2014.06.26)]

바) 철도관련 관리자 반영

◯ 철도 횡단구간 작업시 철도운행관리자, 전기안전관리자, 열차 감시원 반영

※ 실공기일 투입일수  정산 예정

⇒ 관련근거 : 현황보고 [공사감독2처 - 9129(2014.06.18)]

화랑고가관련 철도보호지구 협의 회신[코레일 시설처-4174]

철도안전법 45조관련 검토의견서

사) 부대공시공 후 정산 수량 반영

◯ 부대공(공중비계, 낙하물 방지, 비계발판, 보호막, 복식비계)설치 부분 시공 후  정산 수량 반영

⇒ 관련근거 : 실정보고 [강북공사관리처 - 11034(2013.10.29)]

실정보고 승인 [시설보수과 - 8072 (2013.11.07)]