문서번호	급수운영과-1168
보존기간	년
결재일자	2015.1.21.
공개여부	대시민공개
방침번호

주무관		급수운영과장
협 조
	주무관
	주무관
	주무관
	주무관

설계변경 심의결과 보고［2014년 도봉,노원구 관내 상수도시설물 및 소화전신설,보수공사(장기계속)-3회］

설계변경 심의결과 보고

우리 사업소에서 시행중인 “2014년 도봉,노원구 관내 상수도시설물 및 소화전설치보수공사” 에 대하여 3회 정산결과 시공물량 증 ․ 감 발생으로 인한 설계변경 사유가 발생되어 아래와 같이 설계변경 심의회를 개최하고 그 결과를 보고합니다.

1. 공사 개요

가. 공 사 명 : 2014년 도봉,노원구 관내 상수도시설물 및 소화전설치보수공사(장기계속)

나. 공사개요 : 밸브설치 및 보수 192개소, 소화전설치 및 보수 174개소

- 주요 변경내역

구분	공 종	변 경 내 역		비 고
		당 초	변 경
주요 변경물량	소화전 신설(지하식)	40	36	감) 4
	K.P이탈방지압륜접합(400mm)	5	16	증) 11
	구형변실설치공(400mm)	1	2	증) 1
	중형변실설치공(80~500mm)	54	52	감) 2

다. 계약기간 (변경없음)

- 총  차 : 2014.06.02 ~ 2015.05.31.

라. 도 급 비

<총 부기금액 >

- 당초 : 금471,907,590원

- 변경 : 금471,907,590원 (금액변동없음)

마. 도 급 자 : (주)연단토건 대표 이정수

2. 심의회 개최현황

가. 심의일정 : 2015. 1. 21. 14:00

나. 심의장소 :  급수운영과 사무실

다. 심의위원장 : 급수운영과장

라. 심의위원 : 시설7급 연제관, 시설7급 유광창, 시설7급 김종필, 시설7급 강대유

3. 심의 내용

가. 물량변동의 적정성 여부

나. 계약 변동(증․감) 물량 계약단가 낙찰률 적용 적정여부

다. 제경비 적정산정 및 적용의 적정성 여부 등

4. 심의 결과(별첨)

가. 설계변경의 타당성 : 타당함

나. 제잡비 적정 산정 및 적용 적정성 : 적정함

다. 계약변동(증, 감)물량 계약단가 낙찰율 적정 적용 여부 : 해당없음

라. 각종 제반 규정 준수여부 : 준수함

마. 관련규정의 불명확한 내용에 대한 검토 : 적정함

5. 조치 의견

위와 같이 설계변경 내역 심의결과 설계변경이 타당하고 검토항목이 적정하여 본 심의결과에 의거 설계변경 시행 및 변경계약을 의뢰코자 합니다.

붙 임 : 1. 설계변경 심의 결정서 1부.

2. 설계변경사유서 1부.

3. 설계변경내역서 1부. 끝.