설계변경 자문회의 심의 요청서

2017. 11

서울특별시 도시기반시설본부

(중랑천 초안산 앞 보행교량 설치공사)

설계변경 심의 요청내역(총괄)

(단위 : 천원)

구 분	제 목	증·감 내역
		당 초	변 경	증·감
계	3 건	431,207	1,037,808	증)606,601
1	교각(P3) 엘리베이터 추가설치 실정보고	431,207	634,680	증)203,473
2	교통소통대책 승인에 따른 교통안전시설물 설치	-	263,604	증)263,604
3	보행교량 하부 가설벤트 반영 실정보고	-	139,524	증)139,524

차    례

구 분	제 목
1	교각(P3)엘리베이터 추가설치 실정보고
2	교통소통대책 승인에 따른 교통안전시설물 설치 실정보고
3	보행교량 하부 가설벤트 반영 실정보고

설계변경 소심의위원회 자문요청서

문서번호

요청부서

토목부   담당 노순재

요청일

2017년 11월   일

공 사 명

중랑천 초안산 앞 보행교량 설치공사

공사개요

공사규모

○ 총공사구간 연장 L = 191m

- 교 량 폭 : B=4.5m(닐센아치교 경간장 80m)

- 엘리베이터 2대 등

공사기간

2016.04.29. ~ 2018.04.28.(24개월)

감 리 사

(주)대한콘설탄트,(주)한맥기술

설 계 사

(주)경동엔지니어링, (주)동해종합기술공사

시 공 사

한양산업개발(주)

자문 안건명

교각(P3)엘리베이터 추가설치 실정보고

요청금액

증)203,473천원

자문요청사유

☑ 5,000만원 이상 변경사항

▢ 부서(담당별)간 조정․통합이 필요한 경우

설계변경 유형

▢ 사업계획 변경(정책, 계획변경 등)

▢ 설계도서내용 불투명, 누락, 오류, 상호모순

▢ 현장여건 상이(지질, 용수 등)

☑ 민원해결, 보수, 보강

▢ 문화재 및 지장물 이설

▢ 공법변경(신기술, 신공법 포함)

▢ 제도, 기준변경

▢ 유관기관 협의 미흡

설계변경사항(요약)

○ 내용 :

- 지역주민과 노원구 요청사항으로 중랑천변 월계역(P3)측에 장애인 및 노약자의 편의성 확보를 위해 엘리베이터 1개소를 추가하여 시행하는 실정보고 사항을 추후 설계변경에 반영 코자 함

- 관련문서 : 실정보고 승인 통보   [대콘(초안산) 17-319호(17.11.16.)]

실정보고 승인       ([토목부 - 23567호    (17.11.10.)]

주  요  변  경  내  역   및   공 종

▪ 변경개요

- 당초 : 엘리베이터 2개소[교각(P1,P5)]

- 변경 : 엘리베이터 3개소[교각(P1,P3,P5)]

▪ 물량 증감내역                                           (단위:천원)

구 분	당초	변경	증감
교각(P3)엘리베이터 추가설치	431,207	634,680	증203,473
계	431,207	634,680	증203,473

▪ 공사비 증감내역

- 당 초 : 431,207천원

- 변 경 : 634,680천원

- 증 감 : 증)203,473천원

▪ 설계변경 주요 공종

- 토공,구조물공,부대공

별첨서류

1. 감리단 검토의견서 사본 1부.

2. 설계변경도서 1부.

▪ 공사예정시기

2017. 11.~

▪ 소요관급자재

-레미콘, 엘리베이터

□ 전체분 공사현황

계 약 명 (공사명)	중랑천 초안산 앞 보행교량 설치공사
계약금액	5,884,120,000	계약일	2017.07.18.	시공사	한양산업개발(주)
공사기간	2016.04.29.~2018.04.28.(24개월)	낙찰률	87%	설계자	(주)경동엔지니어링 (주)동해종합기술공사
계약형태	공개경쟁입찰( ), 턴키( ), 대안( ),제한경쟁입찰(●) 장기계속공사(●), 계속비공사			감리자	(주)대한콘설탄트 (주)한맥기술
공사규모	○ 총공사구간 연장 L = 191m - 교 량 폭 : B=4.5m(닐센아치교 경간장 80m) - 엘리베이터 2대 등			※ 작성자 : 노 순 재 (☎02-3708-2576)

□ 심의 안건 설계변경 현황

구 분	설 계 변 경 전		설 계 변 경 후	증/감
변 경 개 요	중랑천 보행교량 설치공사 엘리베이터 (2개소)		중랑천 보행교량 설치공사 엘리베이터 (3개소)
공 사 비	431,207		634,680천원	증)203,473천원
적 용 요 율	낙찰률 : 87%		낙찰률 : 87%
설계변경요구자	▢ 발주처 ☑ 계약상대자
협의율(낙찰률) 적용 근거	실정보고 승인 ([토목부 - 23567호 (17.11.10.)]
설계변경 근거	방 침	-
	관련규정	공사계약일반조건 제19조 제1항
설계변경 유형	①사업계획 변경(정책, 기본계획 변경 등) ②설계도서 누락, 오류, 상호모순 등 ③현장여건 상이(지질, 용수 등) ④민원해결, 보수, 보강 ⑤문화재 및 지장물 이설 ⑥공법변경(신기술, 신공법 포함) ⑦제도, 기준변경 ⑧ 유관기관 협의 미흡
설계변경 내용	- 중랑천 초안산 앞 보행교량 설치공사 와 관련하여 주민 민원 및 노원구의 요청에 따라 중랑천변 월계역 측에 엘리베이터(1개소)를 추가하여 시행하는 실정보고 사항을 추후 설계변경에 반영 코자 함
효 과	① 공기단축( 월), ② 품질향상, ③ 안정성 증진, ④ 시공성 향상, ⑤ 비용절감, ⑥ 시민편익증진, ⑦ 민원해소, ⑧ 설계구조 보완, ⑨ 기능성, 사용성 증진
제비율 검증 이행여부	☑이행 ▢ 미이행

□ 관련문서

· 시공사문서 : 중랑천 제2017- 180호(17.09.12)

· 감리단문서 : [대콘(초안산) 17- 246호(17.09.13)]

· 발주처승인문서 : 실정보고 승인 [토목부 - 23567호 (17.11.10)]

설계변경 소심의위원회 자문요청서

문서번호

요청부서

토목부   담당 노순재

요청일

2017년 11월   일

공 사 명

중랑천 초안산 앞 보행교량 설치공사

공사개요

공사규모

○ 총공사구간 연장 L = 191m

- 교 량 폭 : B=4.5m(닐센아치교 경간장 80m)

- 엘리베이터 2대 등

공사기간

2016.04.29. ~ 2018.04.28.(24개월)

감 리 사

(주)대한콘설탄트,(주)한맥기술

설 계 사

(주)경동엔지니어링, (주)동해종합기술공사

시 공 사

한양산업개발(주)

자문 안건명

교통소통대책 승인에 따른 교통안전시설물 설치

요청금액

증)263,604천원

자문요청사유

☑ 5,000만원 이상 변경사항

▢ 부서(담당별)간 조정․통합이 필요한 경우

설계변경 유형

▢ 사업계획 변경(정책, 계획변경 등)

▢ 설계도서내용 불투명, 누락, 오류, 상호모순

▢ 현장여건 상이(지질, 용수 등)

☑ 민원해결, 보수, 보강

▢ 문화재 및 지장물 이설

▢ 공법변경(신기술, 신공법 포함)

▢ 제도, 기준변경

☑ 유관기관 협의 미흡

설계변경사항(요약)

○ 내용 : 중랑천 초안산 앞 보행교량 설치공사는 상.하부공사를 단계별로[하부공(16.10.15.~17.05.15),상부공(17.10.15이후)] 시공해야 하는 실정이며, 유관기관(서울지방경찰청,방재시설부)의 요청에 따라 교통안전시설물 설치(설치및해체2회)를 반영하였으며, 수변공원 이용시민(보행자,자전거 등)의 안전 및 통행의 편익성을 위한 실정보고 사항을 추후 설계 반영 코져함.

- 관련문서 : 실정보고 승인 통보  [대콘(초안산) 17-319호(17.11.16.)]

실정보고 승인    (  [토목부 - 23614호  (2017.11.13.)]

주  요  변  경  내  역   및   공 종

▪ 변경개요

- 당초 :        -

- 변경 : 교통소통대책 승인에 따른 교통안전시설물 설치

▪ 물량 증감내역                                           (단위:천원)

구 분	당초	변경	증감
도로 및 수변공원 교통안전시설물 설치	-	263,604	증263,604
계	-	263,604	증263,604

▪ 공사비 증감내역

- 당 초 : - 천원

- 변 경 : 263,604천원

- 증 감 : 증)263,604천원

▪ 설계변경 주요 공종

- 부대공

별첨서류

1. 감리단 검토의견서 사본 1부.

2. 설계변경도서 1부.

▪ 공사예정시기

2017. 01. ~

▪ 소요관급자재

-

□ 전체분 공사현황

계 약 명 (공사명)	중랑천 초안산 앞 보행교량 설치공사
계약금액	5,884,120,000	계약일	2017.07.18.	시공사	한양산업개발(주)
공사기간	2016.04.29.~2018.04.28.(24개월)	낙찰률	87%	설계자	(주)경동엔지니어링 (주)동해종합기술공사
계약형태	공개경쟁입찰( ), 턴키( ), 대안( ),제한경쟁입찰(●) 장기계속공사(●), 계속비공사			감리자	(주)대한콘설탄트 (주)한맥기술
공사규모	○ 총공사구간 연장 L = 191m - 교 량 폭 : B=4.5m(닐센아치교 경간장 80m) - 엘리베이터 2대 등			※ 작성자 : 노 순 재 (☎02-3708-2576)

□ 심의 안건 설계변경 현황

구 분	설 계 변 경 전		설 계 변 경 후	증/감
변 경 개 요	-		교통안전시설물 설치
공 사 비			263,604천원	증)263,604천원
적 용 요 율			협의율 : 93%
설계변경요구자	▢ 발주처 ☑ 계약상대자
협의율(낙찰률) 적용 근거	지방자치단체입찰 및 계약집행기준[공사계약일반조건] 제7절 1호의 나 “계약상대자의 책임없는 사유로 인한 경우”→ 협의단가 적용
설계변경 근거	방 침	실정보고 승인 [토목부 - 23614호(2017.11.13)]
	관련규정	공사계약일반조건 제19조 제1항
설계변경 유형	①사업계획 변경(정책, 기본계획 변경 등) ②설계도서 누락, 오류, 상호모순 등 ③현장여건 상이(지질, 용수 등) ④민원해결, 보수, 보강 ⑤문화재 및 지장물 이설 ⑥공법변경(신기술, 신공법 포함) ⑦제도, 기준변경 ⑧ 유관기관 협의 미흡
설계변경 내용	- 중랑천 초안산 앞 보행교량 설치공사는 상.하부공사를 단계별로[하부공(16.10.15.~17. )05.15),상부공(17.10.15이후)] 시공해야 하는 실정이며, 유관기관(서울지방경찰청,방재시설부)의 요청에 따라 교통안전시설물 설치(설치및해체2회)를 반영하였으며, 수변공원 이용시민(보행자,자전거 등)의 안전 및 통행의 편익성을 위한 실정보고 사항을 추후 설계 반영 코져함.
효 과	① 공기단축( 월), ② 품질향상, ③ 안정성 증진, ④ 시공성 향상, ⑤ 비용절감, ⑥ 시민편익증진, ⑦ 민원해소, ⑧ 설계구조 보완, ⑨ 기능성, 사용성 증진
제비율 검증 이행여부	☑이행 □ 미이행

□ 관련문서

· 시공사문서 : 중랑천 제2017-184호(10.26)

· 감리단문서 : [대콘(초안산) 17-298호(2017.11.01.)]

· 발주처승인문서 : 실정보고 승인 [토목부 - 23614호 (17.11.13)]

설계변경 소심의위원회 자문요청서

문서번호

요청부서

토목부   담당 노순재

요청일

2017년 06월   일

공 사 명

중랑천 초안산 앞 보행교량 설치공사

공사개요

공사규모

○ 총공사구간 연장 L = 191m

- 교 량 폭 : B=4.5m(닐센아치교 경간장 80m)

- 엘리베이터 2대 등

공사기간

2016.04.29. ~ 2018.04.28.(24개월)

감 리 사

(주)대한콘설탄트,(주)한맥기술

설 계 사

(주)경동엔지니어링, (주)동해종합기술공사

시 공 사

한양산업개발(주)

자문 안건명

보행교량 하부 가설벤트 반영 실정보고

요청금액

증)139,524천원

자문요청사유

☑ 5,000만원 이상 변경사항

▢ 부서(담당별)간 조정․통합이 필요한 경우

설계변경 유형

▢ 사업계획 변경(정책, 계획변경 등)

▢ 설계도서내용 불투명, 누락, 오류, 상호모순

▢ 현장여건 상이(지질, 용수 등)

▢ 민원해결, 보수, 보강

▢ 문화재 및 지장물 이설

☑ 공법변경(신기술, 신공법 포함)

▢ 제도, 기준변경

▢ 유관기관 협의 미흡

설계변경사항(요약)

○ 내용 :

- 중랑천 초안산 앞 보행교량 설치공사 중 본선(아치교) 거치를 위한 가설벤트가 실시설계(설계도,견적서,단가산출서, 구조계산서)시 적용되었으나, 내역에 누락되어 있어 이를 내역에 반영한 실정보고 사항을 추후 설계에 반영 코져함.

- 관련문서 : 실정보고 승인 통보  [대콘(초안산) 17-319호(17.11.16.)]

실정보고 승인     ( [토목부 - 23538호  (2017.11.10)]

주  요  변  경  내  역   및   공 종

▪ 변경개요

- 당초 :

- 변경 : 가설벤트(1개소)

▪ 물량 증감내역                                           (단위:천원)

구 분	당초	변경	증감
가설벤트(1개소)	-	139,524	증139,524
계	-	139,524	증139,524

▪ 공사비 증감내역

- 당 초 : - 천원

- 변 경 : 139,524천원

- 증 감 : 증)139,524천원

▪ 설계변경 주요 공종

- 구조물공

별첨서류

1. 감리단 검토의견서 사본 1부.

2. 설계변경도서 1부.

▪ 공사예정시기

2017. 10.~

▪ 소요관급자재

-

□ 전체분 공사현황

계 약 명 (공사명)	중랑천 초안산 앞 보행교량 설치공사
계약금액	5,884,120,000	계약일	2017.07.18.	시공사	한양산업개발(주)
공사기간	2016.04.29.~2018.04.28.(24개월)	낙찰률	87%	설계자	(주)경동엔지니어링 (주)동해종합기술공사
계약형태	공개경쟁입찰( ), 턴키( ), 대안( ),제한경쟁입찰(●) 장기계속공사(●), 계속비공사			감리자	(주)대한콘설탄트 (주)한맥기술
공사규모	○ 총공사구간 연장 L = 191m - 교 량 폭 : B=4.5m(닐센아치교 경간장 80m) - 엘리베이터 2대 등			※ 작성자 : 노 순 재 (☎02-3708-2576)

□ 심의 안건 설계변경 현황

구 분	설 계 변 경 전		설 계 변 경 후	증/감
변 경 개 요	-		가설벤트(1개소)	가설벤트(1개소)
공 사 비	-		139,524천원	증)139,524천원
적 용 요 율	-		낙찰률 : 87%
설계변경요구자	▢ 발주처 ☑ 계약상대자
협의율(낙찰률) 적용 근거	낙찰율 적용
설계변경 근거	방 침	실정보고 승인 [토목부 - 23538호(2017.11.10)]
	관련규정	공사계약일반조건 제6절 2호의 가“설계서의 정정.보완”에 의거 계약금애 조정.
설계변경 유형	①사업계획 변경(정책, 기본계획 변경 등) ②설계도서 누락, 오류, 상호모순 등 ③현장여건 상이(지질, 용수 등) ④민원해결, 보수, 보강 ⑤문화재 및 지장물 이설 ⑥공법변경(신기술, 신공법 포함) ⑦제도, 기준변경 ⑧ 유관기관 협의 미흡
설계변경 내용	- 중랑천 초안산 앞 보행교량 설치공사 중 본선(아치교) 거치를 위한 가설벤트가 실시설계(설계도,견적서,단가산출서, 구조계산서)시 적용되었으나, 내역에 누락되어 있어 이를 내역에 반영한 실정보고 사항을 추후 설계에 반영 코져함.
효 과	① 공기단축( 월), ② 품질향상, ③ 안정성 증진, ④ 시공성 향상, ⑤ 비용절감, ⑥ 시민편익증진, ⑦ 민원해소, ⑧ 설계구조 보완, ⑨ 기능성, 사용성 증진
제비율 검증 이행여부	☑이행 □ 미이행

□ 관련문서

· 시공사문서 : 중랑천 제2017-202호(2017.10.27)

· 감리단문서 : [대콘(초안산) 17-299호(2017.11.01.)]

· 발주처승인문서 : 실정보고 승인 [토목부 - 23538호(2017.11.10)]