설계변경 자문회의 심의 요청서

2018. 04.

서울특별시 도시기반시설본부

(중랑천 초안산 앞 보행교량 설치공사)

설계변경 심의 요청내역(총괄)

(단위 : 천원)

구 분	제 목	증·감 내역
		당 초	변 경	증·감
계	2 건	476,421	904,856	증)428,435
1	강교설치에 따른 가설벤트 추가설치	150,458	327,591	증)177,133
3	순성토,사토 운반 및 가도 변경	325,963	577,265	증)251,302

설계변경 소심의위원회 자문요청서

문서번호

요청부서

토목부   담당 노순재

요청일

2018년 04월   일

공 사 명

중랑천 초안산 앞 보행교량 설치공사

공사개요

공사규모

○ 총공사구간 연장 L = 191m

- 교 량 폭 : B=4.5m(닐센아치교 경간장 80m)

- 엘리베이터 3대 등

공사기간

2016.04.29. ~ 2018.04.28.(24개월)

감 리 사

(주)대한콘설탄트,(주)한맥기술

설 계 사

(주)경동엔지니어링, (주)동해종합기술공사

시 공 사

한양산업개발(주)

자문 안건명

강교 설치에 따른 가설벤트 추가 설치

요청금액

증)177,133천원

자문요청사유

☑ 5,000만원 이상 변경사항

▢ 부서(담당별)간 조정․통합이 필요한 경우

설계변경 유형

▢ 사업계획 변경(정책, 계획변경 등)

▢ 설계도서내용 불투명, 누락, 오류, 상호모순

☑ 현장여건 상이(지질, 용수 등)

▢ 민원해결, 보수, 보강

▢ 문화재 및 지장물 이설

▢ 공법변경(신기술, 신공법 포함)

▢ 제도, 기준변경

▢ 유관기관 협의 미흡

설계변경사항(요약)

○ 내용 :

- 가설시(Main Girder) 처짐 발생으로 인한 변경 사항으로 원설계사와 협의 결과에 따라 하부 가설벤트 2개소(당초1개소)를 설치하여 시공에 따른 안전성, 정밀성을 확보코져 하오며, 유해위험방지계획서 심사에 따른 보완조치 사항으로 Main Girder 상단에 Arch 거치용 가설벤트 2개소를 설치하여 안전성, 품질, 시공성을 확보하는 실정보고 사항을 추후 설계 반영 코져함.

- 관련문서 : 실정보고 승인       ([토목부 - 5923호 (2018.04.05.)]

주  요  변  경  내  역   및   공 종

▪ 변경개요

- 당초 : 가설벤트 상부(-개소) , 하부(1개소)

- 변경 : 가설벤트 상부(2개소) , 하부(2개소)

▪ 물량 증감내역                                           (단위:천원)

구 분	당초	변경	증감
강교 설치에 따른 가설벤트 추가설치	150,458	327,591	증177,133
계	150,458	327,591	증177,133

▪ 공사비 증감내역

- 당 초 : 150,458천원

- 변 경 : 327,591천원

- 증 감 : 증)177,133천원

▪ 설계변경 주요 공종

- 구조물공

별첨서류

1. 감리단 검토의견서 사본 1부.

2. 설계변경도서 1부.

▪ 공사예정시기

2017. 10.~

▪ 소요관급자재

-

□ 전체분 공사현황

계 약 명 (공사명)	중랑천 초안산 앞 보행교량 설치공사
계약금액	6,454,822,000	계약일	2018.01.22.	시공사	한양산업개발(주)
공사기간	2016.04.29.~2018.04.28.(24개월)	낙찰률	87%	설계자	(주)경동엔지니어링 (주)동해종합기술공사
계약형태	공개경쟁입찰( ), 턴키( ), 대안( ),제한경쟁입찰(●) 장기계속공사(●), 계속비공사			감리자	(주)대한콘설탄트 (주)한맥기술
공사규모	○ 총공사구간 연장 L = 191m - 교 량 폭 : B=4.5m(닐센아치교 경간장 80m) - 엘리베이터 3대 등			※ 작성자 : 노 순 재 (☎02-3708-2576)

□ 심의 안건 설계변경 현황

구 분	설 계 변 경 전		설 계 변 경 후	증/감
변 경 개 요	중랑천 보행교량 설치공사 가설벤트 상부( - ) 하부(1개소)		중랑천 보행교량 설치공사 가설벤트 상부(2개소) 하부(2개소)
공 사 비	150,458		327,591천원	증)177,133천원
적 용 요 율	낙찰률 : 87%		낙찰률 : 87%(하부가설벤트) 협의율 : 93%(상부가설벤트)
설계변경요구자	▢ 발주처 ☑ 계약상대자
협의율(낙찰률) 적용 근거	실정보고 승인 (([토목부 - 5923호 (2018.04.05.)]
설계변경 근거	방 침	-
	관련규정	공사계약일반조건 제19조 제1항
설계변경 유형	①사업계획 변경(정책, 기본계획 변경 등) ②설계도서 누락, 오류, 상호모순 등 ③현장여건 상이(지질, 용수 등) ④민원해결, 보수, 보강 ⑤문화재 및 지장물 이설 ⑥공법변경(신기술, 신공법 포함) ⑦제도, 기준변경 ⑧ 유관기관 협의 미흡
설계변경 내용	- 가설시(Main Girder) 처짐 발생으로 인한 변경 사항으로 원설계사와 협의 결과에 따 라 하부 가설벤트 2개소(당초1개소)를 설치하여 시공에 따른 안전성, 정밀성을 확보 코져 하오며,유해위험방지계획서 심사에 따른 보완조치 사항으로 Main Girder 상단 에 Arch 거치용 가설벤트 2개소를 설치하여 안전성, 품질, 시공성을 확보하는 실정보 고 사항을 추후 설계 반영 코져함.
효 과	① 공기단축( 월), ② 품질향상, ③ 안정성 증진, ④ 시공성 향상, ⑤ 비용절감, ⑥ 시민편익증진, ⑦ 민원해소, ⑧ 설계구조 보완, ⑨ 기능성, 사용성 증진
제비율 검증 이행여부	☑이행 ▢ 미이행

□ 관련문서

· 시공사문서 : 중랑천 제 2018 -046호(18.03.26)

· 감리단문서 : [대콘(초안산) 18-     호(   .   .   )]

· 발주처승인문서 : 실정보고 승인 [토목부 -       호 (  .   .    )]

설계변경 소심의위원회 자문요청서

문서번호

요청부서

토목부   담당 노순재

요청일

2018년 04월   일

공 사 명

중랑천 초안산 앞 보행교량 설치공사

공사개요

공사규모

○ 총공사구간 연장 L = 191m

- 교 량 폭 : B=4.5m(닐센아치교 경간장 80m)

- 엘리베이터 3대 등

공사기간

2016.04.29. ~ 2018.04.28.(24개월)

감 리 사

(주)대한콘설탄트,(주)한맥기술

설 계 사

(주)경동엔지니어링, (주)동해종합기술공사

시 공 사

한양산업개발(주)

자문 안건명

순성토 사토 운반 및 가도 변경

요청금액

증)251,302천원

자문요청사유

☑ 5,000만원 이상 변경사항

▢ 부서(담당별)간 조정․통합이 필요한 경우

설계변경 유형

▢ 사업계획 변경(정책, 계획변경 등)

☑ 설계도서내용 불투명, 누락, 오류, 상호모순

▢ 현장여건 상이(지질, 용수 등)

▢ 민원해결, 보수, 보강

▢ 문화재 및 지장물 이설

▢ 공법변경(신기술, 신공법 포함)

▢ 제도, 기준변경

▢ 유관기관 협의 미흡

설계변경사항(요약)

○ 내용 : 현장 진입로와 구조물 시공을 위한 축도의 순성토 및 사토 반입(물량,운반거리) 및 동부간선도로에 설치되어 있는 옹벽 및 가드레일의 철거를 적용코져 하오며, 운반거리는 현장진입로 구간 노원경찰서, 교통처리자문위원(도시기반시설본부)과 협의 결과에 따라 설치된 교통안전시설물을 감안하여 적용하였으며 축도의 규격은 강교의 현장 조립 및 거치하는 공간을 최소한으로 확보하여 안전성과 품질, 시공성을 확보하는 실정보고 사항을 추후 설계 반영 코져함.

- 관련문서 : 실정보고 승인 통보   [대콘(초안산) 18 -     호(   .   .   .)]

실정보고 승인       ([토목부 -      호    (   .   .   .)]

주  요  변  경  내  역   및   공 종

▪ 변경개요

- 당초 : 순성토( - ) 사토운반(1km) 및 가도(1,690㎥)

- 변경 : 순성토(14.8km) 사토운반(14.8km) 및 가도(6,256㎥)

▪ 물량 증감내역                                           (단위:천원)

구 분	당초	변경	증감
순성토 사토 운반 및 가도 변경	325,963	577,265	증251,302
계	325,963	577,265	증251,302

▪ 공사비 증감내역

- 당 초 : 325,963천원

- 변 경 : 577,265천원

- 증 감 : 증)251,302천원

▪ 설계변경 주요 공종

- 토공, 부대공, 관급자재

폐기물처리비

별첨서류

1. 감리단 검토의견서 사본 1부.

2. 설계변경도서 1부.

▪ 공사예정시기

2017. 02. ~

▪ 소요관급자재

-레미콘

□ 전체분 공사현황

계 약 명 (공사명)	중랑천 초안산 앞 보행교량 설치공사
계약금액	6,454,822,000	계약일	2018.01.22.	시공사	한양산업개발(주)
공사기간	2016.04.29.~2018.04.28.(24개월)	낙찰률	87%	설계자	(주)경동엔지니어링 (주)동해종합기술공사
계약형태	공개경쟁입찰( ), 턴키( ), 대안( ),제한경쟁입찰(●) 장기계속공사(●), 계속비공사			감리자	(주)대한콘설탄트 (주)한맥기술
공사규모	○ 총공사구간 연장 L = 191m - 교 량 폭 : B=4.5m(닐센아치교 경간장 80m) - 엘리베이터 3대 등			※ 작성자 : 노 순 재 (☎02-3708-2576)

□ 심의 안건 설계변경 현황

구 분	설 계 변 경 전		설 계 변 경 후	증/감
변 경 개 요	사토운반(1km) 가도(1,690㎥)		순성토운반(14.8km) 사토운반(14.8km) 가도(6,256㎥)
공 사 비	325,963		577,265천원	증)251,302 원
적 용 요 율	낙찰률 : 87%		낙찰률 : 87%(기존단가) 협의율 : 93%(신규단가)
설계변경요구자	▢ 발주처 ☑ 계약상대자
협의율(낙찰률) 적용 근거	실정보고 승인 ([토목부 - 호 ( )]
설계변경 근거	방 침	-
	관련규정	공사계약일반조건 제19조 제1항
설계변경 유형	①사업계획 변경(정책, 기본계획 변경 등) ②설계도서 누락, 오류, 상호모순 등 ③현장여건 상이(지질, 용수 등) ④민원해결, 보수, 보강 ⑤문화재 및 지장물 이설 ⑥공법변경(신기술, 신공법 포함) ⑦제도, 기준변경 ⑧ 유관기관 협의 미흡
설계변경 내용	○ 내용 : 현장 진입로와 구조물 시공을 위한 축도의 순성토 및 사토 반입(물량,운반거리 ) 및 동부간선도로에 설치되어 있는 옹벽 및 가드레일의 철거를 적용코져 하 오며, 운반거리는 현장진입로 구간 노원경찰서, 교통처리자문위원(도시기반시설 본부)과 협의 결과에 따라 설치된 교통안전시설물을 감안하여 적용하였으며 축도의 규격은 강교의 현장 조립 및 거치하는 공간을 최소한으로 확보하여 안 전성과 품질, 시공성을 확보하는 실정보고 사항을 추후 설계 반영 코져함.
효 과	① 공기단축( 월), ② 품질향상, ③ 안정성 증진, ④ 시공성 향상, ⑤ 비용절감, ⑥ 시민편익증진, ⑦ 민원해소, ⑧ 설계구조 보완, ⑨ 기능성, 사용성 증진
제비율 검증 이행여부	☑이행 □ 미이행

□ 관련문서

· 시공사문서 : 중랑천 제2018-053호(18.03.29)

· 감리단문서 : [대콘(초안산) 18-     호(   .   .   )]

· 발주처승인문서 : 실정보고 승인 [토목부 -       호 (  .   .    )]