설계변경 심의요청서

안건번호	제2016 - 호
구 분	공 사

건 명	노량진가압장 외 3개소 체크밸브(역지변) 개량공사

- 심의일시 : 2016. 06. 24(금)

- 심의장소 : 남부수도사업소 시설관리과

요 청 기 관 명	남부수도사업소(시설관리과)
제 출 년 월 일	2016년 06월 27일

설계변경 심의 설명서

1. 용역개요

가. 건  명 : 노량진가압장 외 3개소 체크밸브(역지변) 개량공사

나. 과업내용

- 노량진, 낙성대, 상도, 상도3가압장 체크밸브 교체공사

- 총20대 : 800mm×6대(노량진), 600mm×7대(노량진 4대, 낙성대 3대)

200mm×7대(상도 5대, 상도3가압장 2대)

다. 계약기간 : 2016. 05. 09. ~ 2016. 06. 28.

라. 계 약 자 : 이곡이엔씨(주) 대표 송광영

마. 설계변경금액

- 당   초 : 금81,722,640원

- 변   경 : 금81,282,960원(감439,680원)

2. 설계변경 사유

가. 제경비(건강보험료, 연금보험료, 노인장기요양보험료, 퇴직공제부금, 환경보전비 등)

미납부분 정산

나. 기타 일반관리비, 이윤 등 증·감 사항 발생

3. 설계변경금액 내용(최종)

구분	당초 계약금액	변경 계약금액	증 ․ 감	비 고
공급가액	74,293,309	73,893,600	감)399,709
부가가치세	7,429,331	7,389,360	감)39,971
계	81,722,640	81,282,960	감)439,680

. 조치의견

위와 같이 공사 제경비 등 증․감에 대한 설계변경 요인이 발생하여, 설계변경 심의위원회      심의결과에 따라 설계변경을 시행코자 함

붙임 : 설계변경 사전심의 의결서 1부. 끝.

설계변경 사전심의 의결서

○ 건  명 : 노량진가압장 외 3개소 체크밸브(역지변) 개량공사

○ 상기 공사에 따른 제경비 등에 대한 증․감 등 변경사항이 발생하여

다음과 같이 설계변경코자 하오니, 적정성 여부를 심의하여 주시기 바랍니다.

□ 심의위원회 의결내용 : (적정, 보류, 부결, 기타)

구 분	직 위	의 견	확 인
위 원 장	시설관리과장
위 원	급수운영과 강동철
위 원	급수운영과 강동길
위 원	시설관리과 서규석
간 사	시설관리과 오준식

2016.  06.    .

입회자  업무담당자 : 시설관리과  윤효진 (인)