문서번호	정수시설과-2797
결재일자	2014.12.5.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	강북아리수정수센터소장
협조

강북정수센터 천정텍스 철거 및 설치공사

설계변경 심의위원회 개최결과 보고

2014.  12.

강북아리수정수센터

정수시설과

강북정수센터 천정텍스 철거 및 설치공사

설계변경 심의위원회 개최결과 보고

우리 정수센터에서 시행중인 『강북정수센터 천정텍스 철거 및 설치공사』에 대하여 설계변경 심의위원회를 개최하고 그 결과를 보고 함.

1. 심의대상

가. 공 사 명 : 강북정수센터 천정텍스 철거 및 설치공사

나. 도 급 자 : (주)만영건설  대표 안흥식

다. 공사기간 : 2014. 10. 22 ~ 2014. 12. 10

라. 도 급 비 : 154,534,100원

마. 공사개요 : 철거 및 재설치  3,049㎡

2. 심의일시 : 2013. 12. 5(금)

가. 심의장소 : 강북아리수정수센터 정수시설과 사무실

3. 설계변경 현황

가. 공사비 변경개요

구 분	금 액		증, 감
	당 초	변 경
도 급 비	154,534,100	149,600,000	-4,934,100

나. 주요 공종 변경사항

- 시공위치 변경에 따라 텍스철거 및 설치 물량 감소

- 건강, 연금 및 노인장기요양보험료 미지급에 따른 정산

- 기타 제반규정 적정 준수여부

▸ 주요 물량 증, 감

공 종	규격	단위	수 량		증, 감
			당 초	변 경	증	감
텍스철거	천정	㎡	3,049	3,032	-	17
텍스설치	천정	㎡	3,049	3,032	-	17
건강보험료	1식	원	1,408,572	0	-	1,408,572
연금보험료	1식	원	2,063,144	0	-	2,063,144
노인장기요양보험료	1식	원	92,261	0	-	92,261

4. 심의내용 및 결과

공사명	심 의 내 용	결 정 내 용
강북정수센터 천정텍스 철거 및 설치공사	◦ 설계변경 타당성 ◦ 신규공종 단가산출 타당성 ◦ 제경비 적정산정 및 적용 적정성 ◦ 각종 제반규정 준수여부	◦ 설계변경 타당 ◦ 신규공종 없음 ◦ 제경비 적정산정 및 적용 적정 ◦ 각종 제반규정 준수타당

※ 본청 원가관리시스템에 의하여 제비율 검증 실시(2014. 12. 5)

5. 조치의견

공사 설계변경 심의결정 내용과 같이 물량 및 계약금액에 대한 정산 설계변경하여 재계약을 의뢰하고자 합니다.

따로붙임 1. 설계변경 심의위원회 의견  1부.

2. 심의 결정된 변경 설계서   1부.

3. 제비율 검증              1부.    끝.