공사 설계 변경 심의 의뢰서

안건번호	제2016 - 호
구 분	토 목

공 사 명	2016년 동작, 영등포구관내 상수도시설물 설치 및 보수공사(장기계속단가계약)

심의일시 :	2016.12.07(수)
심의장소 :	시설관리과사무실

요 청 기 관 명	남부수도사업소(시설관리과)
제 출 년 월 일	2016년 12월 일

설계변경 심의 설명서

□ 공사개요

◦ 공 사 명 : 2016년 동작, 영등포구관내 상수도시설물 설치 및 보수공사(장기계속단가계약)

◦ 공사개요

- 제수밸브설치 313개소, 변실 설치 334개소

◦ 공사기간 : 2016. 6. 15 ~ 2017. 5. 31.

◦ 도 급 자 : (주)한배엔지니어링 대표 강신환

◦ 설계 변경 금액(도급액)

- 당초 : 653,541,350원

- 변경 : 653,541,350원(금액변경 없음)

□ 설계변경 근거

◦ 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제74조

(설계변경으로 인한 계약 금액 조정)

□ 설계변경 사유

◦ 토사상차공 외 34개 신공정 발생

◦ 여의도 공동구 녹발생 관 녹제거후 녹방지 페인트 공법 신규 발생

◦ 상도3소배수지 철거후 토사 성토공 신규 발생

◦ 공사현장에 맞는 적합한 시공등으로 인한 계약물량 증감발생

□ 설계심사(변경) 보고

◦ 본 공사의 설계 변경 사유로 인한 설계변경 내역서의 단가산출의 적정성 여부 등을 검토하여 의견을 제시하여 주시기 바랍니다

따로붙임 : 1. 설계변경 내역서 1부.

2. 설계변경 심의 의결서 1부.  끝.

설계변경 심의 의결서

◦ 공 사 명 : 2016년 동작, 영등포구관내 상수도시설물 설치 및 보수공사

(장기계속단가계약)

◦ 상기 공사 시행중 현장여건 변화에 의한 신규공종 및 물량증·감 등에 따른 설계변경내역서(제2회)에 대한 심의 결과 다음과 같이 의견을 제시하고 의결함.

□ 심의 의결 내용 : 본안 통과,  보류,  부결.

구 분	직 위	의 견	확 인	비 고
위 원 장	시설관리과장
위 원	급수운영과 이경희
위 원	급수운영과 강동길
위 원	급수운영과 이승영
간 사	시설관리과 강동철

◦ 설계변경에 대한 수급사 의견 :

2016.  12. 07.

입회자 :	공사감독 :	지방시설주사	성명 : 권 승 계(인)
	수 급 사 :	(주)한배엔지니어링 대표	성명 : 강 신 환(인)