설계변경(1차-최종) 심의자료

1. 공사현황

가. 공 사 명 : 서울명수학교외 6개소 아리수 직결음수대 설치공사

나. 수 급 인 : (주)흥창엔지니어링 대표 백동진

다. 계약금액 : 당초 34,557,900원

변경 36,114,000원(증 1,556,100원)

라. 공사기간 : 2015. 07. 09 ~ 2015. 10. 10

마. 공사개요 : 당초 D= 13∼20㎜, L= 465m

변경 D= 13∼20㎜, L= 479m

바. 개최일시 : 2015.09.15. 10:00

사. 참 석 자 : 시설관리과장, 시설6급 채재일, 시설6급 한상근, 시설6급 유명수

시설6급 김상웅, 시설6급 박혁순

2. 설계변경 현황

가. 계약금액

구 분	심 사 내 역		당초대비 (증·감)	비 고
	당초계약금액	변경설계금액
계	34,557,900	36,114,000	증 1,556,100
1. 배관설비공사	8,571,450	8,908,650	증 337,200
2. 전기공사	6,150,740	6,221,030	증 60,290
3. 사급자재비	8,450,190	9,827,394	증 1,377,204
4. 잡비 및 기타	11,385,520	11,156,926	감 228,594

나. 설계변경 주요 내용

①. 공사중 물량 증.감 사항 발생

- 물량증가 : 절연행거설치(D=15mm) 등 19개 공종

- 물량감소 : 가교발포에틸렌보온(D20*25T) 등 11개 공종

※ 성북초등학교 병설유치원 기존음수대 녹물출수에 따른 전용배관 정비

관련근거 : 시설관리과-25209(2015.08.26.)

②. 신공종 및 신규자재 발생

- 신 공 종 : 스텐용접 (D50mm/개소당)

- 신규자재 : AC펌프 1개 품목

③. 보험료 정산 : 건강보험,연금보험료,노인장기요양보험료 실납부내역 정산

3. 주요 검토 사항

가. 물량이 증.감한 일부공종에 대해 계약율을 적용

나. 신공종에 대해 낙찰율을 적용

다. 건강,연금,노인장기요양보험료 납부실적 미제출로 감액처리.

붙 임: 설계변경내역서 1부.  끝.