설계변경 심의 결과서

1. 공 사 명 : 2013년 강서,양천,구로구 일대 긴급누수복구공사(장기계속공사) 2. 심의일시 : 2014. 6. 9 (월) 15:00 3. 심의장소 : 수도사업소 4층 회의실 4. 공사현황 - 공사개요 : 긴급누수 1,820개소, 불용관 및 인입관정비 450개소 - 공사기간 : 2014. 5. 13 ～ 2014. 6. 30 - 도 급 자 : 삼융종합건설(주) 대표 백준호 5. 심의사항 - 당초 계약금액 : 2,480,874,700원 - 변경 계약금액 : 2,479,290,000원(감 1,584,700원) 【주요 내용】 - 설계변경의 타당성, 제경비 산정 적정여부, 사급자재비 산출적정 여부 - 신규공종 및 공종별 물량 증 ․ 감에 따른 적정성 여부 등 6. 심의결과 ○ 심의위원 및 의견사항
	구 분	직 위	성 명	의 견 사 항	날 인
	위 원 장	시설관리과장	이 자 원
	위 원	시설6급	김 용 호
	위 원	시설6급	이 상 무
	위 원	시설6급	최 양 주
	위 원	시설6급	임 헌 대
○ 상기 심의 사항을(승인, 보류, 취소) 한다. 2014. 6. 9