설계변경 심의 결과서

1. 공 사 명 : 2014년 방화1동외 10개동 상수도공사(장기계속)-2회

2. 심의일시 : 2014.12.17(수) 11:00

3. 심의장소 : 사업소 4층 회의실

4. 공사현황

○ 개    요 : 당초 D=13㎜~300㎜, L=1,255m

변경 D=13㎜~300㎜, L=1,259m

○ 공사기간 : 2014.07.01 ～ 2015.06.30

○ 수 급 인 : ㈜삼오진건설 대표 김봉중

5. 심의사항

○ 당초 계약금액 : 463,865,500원

○ 변경 계약금액 : 463,865,500원 (변동없음)

【주요 내용】

- 설계변경의 타당성, 제경비산정 적정여부

- 공종별 증. 감량 및 신규공종의 적정성 여부

- 차수별 금액변경 적정성 여부

6. 심의결과

○ 심의위원 및 의견사항

구 분	직 위	성명	날인	의견사항
위원장	시설관리과장	이자원
위 원	시설6급	이상무
위 원	시설6급	김용호
위 원	시설6급	최양주
위 원	시설6급	손종백
간 사	구역관리담당	김재엽

○ 상기 심의 사항을 (승인, 보류, 취소)한다.

2014. 12. 17(수)