설계변경 심의 결과서

1. 공 사 명 : 2015년 강서구 관내 상수도 시설물 설치 및 보수공사(장기계속)

2. 심의일시 : 2016. 04. 20.(수) 14:00

3. 심의장소 : 사업소 4층 회의실

4. 공사현황

○ 공사개요 : 노후밸브 130개소, 변실정비 243개소, 가압장 배수지 유지관리 35개소

○ 공사기간 : 2015. 04. 07 ～ 2016. 04. 30

○ 도 급 자 : 카본코리아(주) 대표 구본영

5. 심의사항

○ 당초 계약금액 : 683,022,340원

○ 변경 계약금액 : 564,600,000원 (감118,422,340원)

【주요 내용】

- 설계변경의 타당성, 제경비 산정 적정여부, 신규공종에 대한 단가적용 적정성

- 공종별 물량 증․감에 따른 적정성 여부, 차수별 금액변경 적정성 여부

6. 심의결과

○ 심의위원 및 의견사항

구 분	직 위	성명	날인	의견사항
위원장	시설관리과장	이자원
위 원	급수설비팀장	유명은
위 원	시설관리팀장	김근용
위 원	시설6급	김용호
위 원	시설6급	박학중

○ 상기 심의 사항을 (승인, 보류, 취소)한다.

2016. 04. 20.