상수도 공사(설계변경)심의 결정서

○ 심의일자 : 2015년 1월 21일             급수운영과장  代 이 승 완 (인)

제 목	심 의 및 검 토 내 용	결 정 내 용	비 고
2014년 도봉,노원구 관내 상수도시설물 및 소화전설치보수공사(장기계속)	○ 설계변경의 타당성 ○ 제경비 적정 산정 및 적용 적정여부 ○ 계약 변동(증,감)물량 계약 단가 낙찰률적용 적정여부 ○ 각종 제반 규정 준수여부 ○ 관련규정의 불명확한 내용에 대한 검토 등	타당함 적정함 적정함 준수함 적정함
처리의견	- 이상없음

상기와 같이 결정 되었음을 확인함

2015년 1월 21일

□ 심 사 자

직급	성 명	직급	성 명
7급	김종필	7급	강대유
7급	연제관	7급	유광창

상수도 공사(설계변경) 검토 의견서

가. 공 사 명 : 2014년 도봉,노원구 관내 상수도시설물 및 소화전설치보수공사(장기계속)

나. 공사개요

구분	공 종	변 경 내 역		비 고
		당 초	변 경
주요 변경물량	소화전 신설(지하식)	40	36	감) 4
	K.P이탈방지압륜접합(400mm)	5	16	증) 11
	구형변실설치공(400mm)	1	2	증) 1
	중형변실설치공(80~500mm)	54	52	감) 2

다. 공사기간: 2014.12.22 ~ 2015.01. 20

라. 일   시 : 2015.1.21       검토위원 : 지방시설주사보 김 종 필 (인)

심의 검토사항(구체적으로)	검 토 의 견
설계변경의 타당성	적정
제경비 적정 산정 및 적용 적정성	적정
계약 변동(증,감)물량 계약단가 낙찰률 적용 적정여부	적정
각종 제반 규정 준수여부	준수
관련규정의 불명확한 내용에 대한 검토	이상없음
처리의견 : 적정 ○
기타사항 ○ 해당없음

상수도 공사(설계변경) 검토 의견서

가. 공 사 명 : 2014년 도봉,노원구 관내 상수도시설물 및 소화전설치보수공사(장기계속)

나. 공사개요

구분	공 종	변 경 내 역		비 고
		당 초	변 경
주요 변경물량	소화전 신설(지하식)	40	36	감) 4
	K.P이탈방지압륜접합(400mm)	5	16	증) 11
	구형변실설치공(400mm)	1	2	증) 1
	중형변실설치공(80~500mm)	54	52	감) 2

다. 공사기간: 2014.12.22 ~ 2015.01. 20

라. 일   시 : 2015.1.21        검토위원 : 지방시설주사보 강 대 유 (인)

심의 검토사항(구체적으로)	검 토 의 견
설계변경의 타당성	적정
제경비 적정 산정 및 적용 적정성	적정
계약 변동(증,감)물량 계약단가 낙찰률 적용 적정여부	적정
각종 제반 규정 준수여부	준수
관련규정의 불명확한 내용에 대한 검토	이상없음
처리의견 : 적정 ○
기타사항 ○ 해당없음

상수도 공사(설계변경) 검토 의견서

가. 공 사 명 : 2014년 도봉,노원구 관내 상수도시설물 및 소화전설치보수공사(장기계속)

나. 공사개요

구분	공 종	변 경 내 역		비 고
		당 초	변 경
주요 변경물량	소화전 신설(지하식)	40	36	감) 4
	K.P이탈방지압륜접합(400mm)	5	16	증) 11
	구형변실설치공(400mm)	1	2	증) 1
	중형변실설치공(80~500mm)	54	52	감) 2

다. 공사기간: 2014.12.22 ~ 2015.01. 20

라. 일   시 : 2015.1.21         검토위원 : 지방시설주사보 연 제 관 (인)

심의 검토사항(구체적으로)	검 토 의 견
설계변경의 타당성	적정
제경비 적정 산정 및 적용 적정성	적정
계약 변동(증,감)물량 계약단가 낙찰률 적용 적정여부	적정
각종 제반 규정 준수여부	준수
관련규정의 불명확한 내용에 대한 검토	이상없음
처리의견 : 적정 ○
기타사항 ○ 해당없음

상수도 공사(설계변경) 검토 의견서

가. 공 사 명 : 2014년 도봉,노원구 관내 상수도시설물 및 소화전설치보수공사(장기계속)

나. 공사개요

구분	공 종	변 경 내 역		비 고
		당 초	변 경
주요 변경물량	소화전 신설(지하식)	40	36	감) 4
	K.P이탈방지압륜접합(400mm)	5	16	증) 11
	구형변실설치공(400mm)	1	2	증) 1
	중형변실설치공(80~500mm)	54	52	감) 2

다. 공사기간: 2014.12.22 ~ 2015.01. 20

라. 일   시 : 2015.1.21          검토위원 : 지방시설주사보 유 광 창 (인)

심의 검토사항(구체적으로)	검 토 의 견
설계변경의 타당성	적정
제경비 적정 산정 및 적용 적정성	적정
계약 변동(증,감)물량 계약단가 낙찰률 적용 적정여부	적정
각종 제반 규정 준수여부	준수
관련규정의 불명확한 내용에 대한 검토	이상없음
처리의견 : 적정 ○
기타사항 ○ 해당없음