상수도 공사(설계변경)심의 결정서

○ 심의일자 : 2014년 05월 26 일             급수운영과장  김 수 영 (인)

제 목	심 의 및 검 토 내 용	결 정 내 용	비 고
2013년 북부관내 포장도로 굴착복구공사 (장기계속단가계약)	○ 설계변경의 타당성 ○ 제경비 적정 산정 및 적용 적정여부 ○ 계약 변동(증,감)물량 계약 단가 낙찰률적용 적정여부 ○ 각종 제반 규정 준수여부 ○ 관련규정의 불명확한 내용에 대한 검토 등	타당함 적정함 적정함 준수함 적정함
처리의견	- 공사원가 제비율검증 실시 할 것 * 원가관리시스템 제비율 검증결과 이상없음

상기와 같이 결정 되었음을 확인함

2014년 05월 26일

□ 심 사 자

직급	성 명	직급	성 명
7급	김종필	7급	강대유
7급	이문성	7급	유광창

상수도 공사(설계변경) 검토 의견서

가. 공 사 명 : 2013년 북부관내 포장도로 굴착복구공사(장기계속단가계약)

나. 공사개요

구분	공 종	변 경 내 역		비 고
		당 초	변 경
주요 변경물량	인력터파기	620㎥	702㎥	증
	아스팔트포장(소폭띠모양) - 50㎡이하	3a	11.9a	증
	아스팔트절삭(노면파쇄기)	40a	36.5a	감
	건강보험료 정산	6,768,043원	474,150원	감
	연금보험료 정산	9,913,192원	742,500원	감
	산업안전보건관리비	17,926,877원	10,511,754원	감

다. 공사기간: 2013.05.08 ~ 2014.05. 30

라. 일   시 : 2014.05. 26        검토위원 : 지방시설주사보 김 종 필 (인)

심의 검토사항(구체적으로)	검 토 의 견
설계변경의 타당성	적정
제경비 적정 산정 및 적용 적정성	적정
계약 변동(증,감)물량 계약단가 낙찰률 적용 적정여부	적정
각종 제반 규정 준수여부	준수
관련규정의 불명확한 내용에 대한 검토	이상없음
처리의견 : 적정 ○
기타사항 ○ 해당없음

상수도 공사(설계변경) 검토 의견서

가. 공 사 명 : 2013년 북부관내 포장도로 굴착복구공사(장기계속단가계약)

나. 공사개요

구분	공 종	변 경 내 역		비 고
		당 초	변 경
주요 변경물량	인력터파기	620㎥	702㎥	증
	아스팔트포장(소폭띠모양) - 50㎡이하	3a	11.9a	증
	아스팔트절삭(노면파쇄기)	40a	36.5a	감
	건강보험료 정산	6,768,043원	474,150원	감
	연금보험료 정산	9,913,192원	742,500원	감
	산업안전보건관리비	17,926,877원	10,511,754원	감

다. 공사기간: 2013.05.08 ~ 2014.05. 30

라. 일   시 : 2014.05. 26        검토위원 : 지방시설주사보 강 대 유 (인)

심의 검토사항(구체적으로)	검 토 의 견
설계변경의 타당성	적정
제경비 적정 산정 및 적용 적정성	적정
계약 변동(증,감)물량 계약단가 낙찰률 적용 적정여부	적정
각종 제반 규정 준수여부	준수
관련규정의 불명확한 내용에 대한 검토	이상없음
처리의견 : 적정 ○
기타사항 ○ 해당없음

상수도 공사(설계변경) 검토 의견서

가. 공 사 명 : 2013년 북부관내 포장도로 굴착복구공사(장기계속단가계약)

나. 공사개요

구분	공 종	변 경 내 역		비 고
		당 초	변 경
주요 변경물량	인력터파기	620㎥	702㎥	증
	아스팔트포장(소폭띠모양) - 50㎡이하	3a	11.9a	증
	아스팔트절삭(노면파쇄기)	40a	36.5a	감
	건강보험료 정산	6,768,043원	474,150원	감
	연금보험료 정산	9,913,192원	742,500원	감
	산업안전보건관리비	17,926,877원	10,511,754원	감

다. 공사기간: 2013.05.08 ~ 2014.05. 30

라. 일   시 : 2014.05. 26        검토위원 : 지방시설주사보 이 문 성 (인)

심의 검토사항(구체적으로)	검 토 의 견
설계변경의 타당성	적정
제경비 적정 산정 및 적용 적정성	적정
계약 변동(증,감)물량 계약단가 낙찰률 적용 적정여부	적정
각종 제반 규정 준수여부	준수
관련규정의 불명확한 내용에 대한 검토	이상없음
처리의견 : 적정 ○
기타사항 ○ 해당없음

상수도 공사(설계변경) 검토 의견서

가. 공 사 명 : 2013년 북부관내 포장도로 굴착복구공사(장기계속단가계약)

나. 공사개요

구분	공 종	변 경 내 역		비 고
		당 초	변 경
주요 변경물량	인력터파기	620㎥	702㎥	증
	아스팔트포장(소폭띠모양) - 50㎡이하	3a	11.9a	증
	아스팔트절삭(노면파쇄기)	40a	36.5a	감
	건강보험료 정산	6,768,043원	474,150원	감
	연금보험료 정산	9,913,192원	742,500원	감
	산업안전보건관리비	17,926,877원	10,511,754원	감

다. 공사기간: 2013.05.08 ~ 2014.05. 30

라. 일   시 : 2014.05. 26        검토위원 : 지방시설주사보 유 광 창 (인)

심의 검토사항(구체적으로)	검 토 의 견
설계변경의 타당성	적정
제경비 적정 산정 및 적용 적정성	적정
계약 변동(증,감)물량 계약단가 낙찰률 적용 적정여부	적정
각종 제반 규정 준수여부	준수
관련규정의 불명확한 내용에 대한 검토	이상없음
처리의견 : 적정 ○
기타사항 ○ 해당없음