설계변경 심의 설명자료

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

계약명	2016년 가압장 모터펌프 수리 (연간단가)

심의일자 : 2016. 11. 21.

심의장소 : 회의실(2층)

강동수도사업소

(시설관리과)

설계 변경 설명서

□ 계약 현황

○ 계약건명 : 2016년 가압장 모터펌프 수리(연간단가)

○ 계약기간 : 2016. 4. 23 ~ 2015. 3. 31

○ 계약금액 : 당초 금31,873,000원

변경 금32,348,000원

○ 계약업체 : (주)신한알앤디 오일선

□ 설계 변경 사유 및 내역

○ 제1차 작업지시(시설관리과-10338, ’16.05.20)관련 물량 설계반영

○ 수리 미실시 건 정산 제외

- 수륙양용 펌프수리, 가압장 모터펌프 그랜드 패킹 및 메카니칼시일

○ 설계변경 금액 내역(※붙임:설계변경내역서 참조)

(단위 : 원)

당 초	변 경	증․감
31,873,000	32,348,000	증475,000

설계변경 심의 소위원회 개최 의견서

○ 계약건명 : 2016년 가압장 모터펌프 수리(연간단가)

○ 위 계약건의 설계변경에 대한 설계변경 심의 소위원회 개최 제시 의견

구 분	직 급 (성 명)	검 토 내 용	심 의 의 견	확 인
위원장	시설관리과장 代송 종 범	- 물량증감 적정여부 - 설계변경 내역 적정여부
위 원	시설주사 김 효 수	- 물량증감 적정여부 - 설계변경 내역 적정여부
위 원	시설주사 김 주 경	- 물량증감 적정여부 - 설계변경 내역 적정여부
위 원	시설주사 김 용 현	- 물량증감 적정여부 - 설계변경 내역 적정여부
위 원	시설주사 한 호 진	- 물량증감 적정여부 - 설계변경 내역 적정여부
위 원 (간사)	기전팀장 함 태 광	- 물량증감 적정여부 - 설계변경 내역 적정여부

2016.  11.  21.