공사 설계 변경(최종, 3차) 심의 설명서

공사명	2016년 서강동외 7개동 상수도 공사 (장기계속단가계약)

부 서 명	서부수도사업소(급수운영과)
작 성 자	김 두 수
제출년월일	2017. 06. 28.

설 계 변 경(3차, 최종)  심 의 설 명 서

□ 공사 개요

□ 공 사 명 : 2016년 서강동외 7개동 상수도 공사(장기계속단가계약)

□ 공사개요 : 당초 - D=13~300mm, L=2,360m

변경 - D=13~300mm, L=2,117m

□ 공사기간 : 2016.04.14 ~ 2016.06.30

□************************, 변경-금617********원

□*********************

□ 설계변경 사유

□ 신규공종발생 및 시공에 따른 물량증감

- 신규 공종 : 강관비계공(3개월사용시)외 3개 공종 및 신규자재 3개 품목

- 물량 증감 : 아스팔트 포장절단공 외 308개 공종

□ 주요 공종 세부 변경 내역 : 따로붙임(설계변경 내역서)

□ 설계변경 금액 내역

(단위 : 원)

구 분	설계변경 현황			비 고
	당 초	변 경	증․감
공사원가	561,697,146	561,180,000	감) 517,146
부가가치세	56,169,714	56,118,000	감) 51,714
도급액	617********	617********	감) 568,860

설계변경(3차, 최종) 심의 소위원회

□ 일시 : 2017년 06월 28일(수) 14:00

□ 장소 : 전자결재 서면 심의

□ 안건 : 2016년 서강동외 7개동 상수도공사 설계변경(3차, 최종) 심의

□ 설계변경사유 : 공사시행에 따른 물량증감 및 신규공종

□ 심의분석 결과

구 분	직 위	확 인	심의의견
위원장	급수운영과장 박 길 영	박 길 영(인)
위원	급수운영과 시설 6급 김 찬 모	김 찬 모(인)
위원	시설관리과 시설 6급 이 준 호	이 준 호(인)
위원	시설관리과 시설 6급 권 영 안	권 영 안(인)
위원	급수운영과 시설 6급 김 승 완	김 승 완(인)

2017. 06. 28.

서부수도사업소 심의위원회