설계변경 심의 신청서

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

접수번호	제2015- 호
구 분	설계변경심의

공사명	2014년 북부관내 포장도로 굴착복구공사(장기계속단가계약) - - - 3차설계변경(최종)

제출년월일	2015. 06. 19.

설계변경 심의 요구서

○ 심 의 일 시 : 2015. 06. 19 14:00

○ 심의 요구자 : 지방시설주사보                       담당 : 강 대 유

제  목 : 2014년 북부관내 포장도로 굴착복구공사(장기계속단가계약)

심의내용

○ 설계변경의 타당성

○ 제경비 적정 산정 및 적용 적정성

○ 계약 변동(증∙감)물량 계약단가 낙찰률 적용 적정여부

○ 각종 제반 규정 준수여부

○ 기타 관련규정의 불명확한 내용에 대한 검토

따로붙임 : 1) 설계변경 사유서 1부.

2) 설계서(변경) 1부.

기타사항

설계자 및 결재가 필요하다고 판단되는 사항

상수도 공사(설계변경) 검토 의견서

가. 공 사 명 : 2014 북부관내 포장도로 굴착복구공사(장기계속단가계약)

나. 공사개요

구분	공 종	변 경 내 역		비 고
		당 초	변 경
주요 변경물량	인력터파기	910㎥	1,008㎥	증
	기계터파기	3,620㎥	3,358㎥	감
	아스팔트포장깨기(기계)	276㎥	205㎥	감
	아스팔트절삭(노면파쇄기)	95a	37a	감
	잔토소운반(굴사기0.4㎥상차) 15.0DT(현장 →집하장,3km)	1,500㎥	458㎥	감
	CONC-인력비빔타설(분산+지세) t=15cm(10㎡이상)	1a	6a	증
	교통정리원(야간)	50Hr	32Hr	감
	차선도색(융착식)-백색 실선(공용구간)	3,000m	2.426m	감
	건강보험료 정산	6,876,902원	286,160원	감
	연금보험료 정산	10,071,453원	810,000원	감
	노인장기요양보험료	450,384원	0원	감

다. 공사기간: 2014.05.21. ~ 2015.06.30.

라. 일   시 : 2015.06.19. 14:00    검토위원 : 지방시설주사  이승완(인)

심의 검토사항(구체적으로)	검 토 의 견
설계변경의 타당성
제경비 적정 산정 및 적용 적정성
계약 변동(증,감)물량 계약단가 낙찰률 적용 적정여부
각종 제반 규정 준수여부
관련규정의 불명확한 내용에 대한 검토
처리의견 ○
기타사항 ○ 붙 임 : 설계변경 심의개최 1부. 끝.

상수도 공사(설계변경) 검토 의견서

가. 공 사 명 : 2014 북부관내 포장도로 굴착복구공사(장기계속단가계약)

구분	공 종	변 경 내 역		비 고
		당 초	변 경
주요 변경물량	인력터파기	910㎥	1,008㎥	증
	기계터파기	3,620㎥	3,358㎥	감
	아스팔트포장깨기(기계)	276㎥	205㎥	감
	아스팔트절삭(노면파쇄기)	95a	37a	감
	잔토소운반(굴사기0.4㎥상차) 15.0DT(현장 →집하장,3km)	1,500㎥	458㎥	감
	CONC-인력비빔타설(분산+지세) t=15cm(10㎡이상)	1a	6a	증
	교통정리원(야간)	50Hr	32Hr	감
	차선도색(융착식)-백색 실선(공용구간)	3,000m	2.426m	감
	건강보험료 정산	6,876,902원	286,160원	감
	연금보험료 정산	10,071,453원	810,000원	감
	노인장기요양보험료	450,384원	0원	감

나. 공사개요

다. 공사기간: 2014.05.21. ~ 2015.06.30.

라. 일   시 : 2015.06.19. 14 : 00  검토위원 : 지방시설주사보 김 종 필(인)

심의 검토사항(구체적으로)	검 토 의 견
설계변경의 타당성
제경비 적정 산정 및 적용 적정성
계약 변동(증,감)물량 계약단가 낙찰률 적용 적정여부
각종 제반 규정 준수여부
관련규정의 불명확한 내용에 대한 검토
처리의견 ○
기타사항 ○ 붙 임 : 설계변경 심의개최 1부. 끝.

상수도 공사(설계변경) 검토 의견서

가. 공 사 명 : 2014 북부관내 포장도로 굴착복구공사(장기계속단가계약)

나. 공사개요

구분	공 종	변 경 내 역		비 고
		당 초	변 경
주요 변경물량	인력터파기	910㎥	1,008㎥	증
	기계터파기	3,620㎥	3,358㎥	감
	아스팔트포장깨기(기계)	276㎥	205㎥	감
	아스팔트절삭(노면파쇄기)	95a	37a	감
	잔토소운반(굴사기0.4㎥상차) 15.0DT(현장 →집하장,3km)	1,500㎥	458㎥	감
	CONC-인력비빔타설(분산+지세) t=15cm(10㎡이상)	1a	6a	증
	교통정리원(야간)	50Hr	32Hr	감
	차선도색(융착식)-백색 실선(공용구간)	3,000m	2.426m	감
	건강보험료 정산	6,876,902원	286,160원	감
	연금보험료 정산	10,071,453원	810,000원	감
	노인장기요양보험료	450,384원	0원	감

다. 공사기간: 2014.05.21. ~ 2015.06.30.

라. 일   시 : 2015.06.19. 14 : 00  검토위원 : 지방시설주사 이 문 성 (인)

심의 검토사항(구체적으로)	검 토 의 견
설계변경의 타당성
제경비 적정 산정 및 적용 적정성
계약 변동(증,감)물량 계약단가 낙찰률 적용 적정여부
각종 제반 규정 준수여부
관련규정의 불명확한 내용에 대한 검토
처리의견 ○
기타사항 ○ 붙 임 : 설계변경 심의개최 1부. 끝.

상수도 공사(설계변경) 검토 의견서

가. 공 사 명 : 2014 북부관내 포장도로 굴착복구공사(장기계속단가계약)

나. 공사개요

구분	공 종	변 경 내 역		비 고
		당 초	변 경
주요 변경물량	인력터파기	910㎥	1,008㎥	증
	기계터파기	3,620㎥	3,358㎥	감
	아스팔트포장깨기(기계)	276㎥	205㎥	감
	아스팔트절삭(노면파쇄기)	95a	37a	감
	잔토소운반(굴사기0.4㎥상차) 15.0DT(현장 →집하장,3km)	1,500㎥	458㎥	감
	CONC-인력비빔타설(분산+지세) t=15cm(10㎡이상)	1a	6a	증
	교통정리원(야간)	50Hr	32Hr	감
	차선도색(융착식)-백색 실선(공용구간)	3,000m	2.426m	감
	건강보험료 정산	6,876,902원	286,160원	감
	연금보험료 정산	10,071,453원	810,000원	감
	노인장기요양보험료	450,384원	0원	감

다. 공사기간: 2014.05.21. ~ 2015.06.30.

라. 일   시 : 2015.06.19. 14 : 00  검토위원 : 지방시설주사보 유 광 창(인)

심의 검토사항(구체적으로)	검 토 의 견
설계변경의 타당성
제경비 적정 산정 및 적용 적정성
계약 변동(증,감)물량 계약단가 낙찰률 적용 적정여부
각종 제반 규정 준수여부
관련규정의 불명확한 내용에 대한 검토
처리의견 ○
기타사항 ○ 붙 임 : 설계변경 심의개최 1부. 끝.

상수도 공사(설계변경)심의 결정서

○ 심의일자 : 2015년 06월 19일   결정자 : 급수운영과장  김 수 영 (인)

제 목	심 의 및 검 토 내 용	결 정 내 용	비 고
2014년 북부관내 포장도로 굴착복구공사 (장기계속단가계약)	○ 설계변경의 타당성 ○ 제경비 적정 산정 및 적용 적정 ○ 계약 변동(증,감)물량 계약 단가 낙찰률적용 적정여부 ○ 각종 제반 규정 준수여부 ○ 관련규정의 불명확한 내용에 대한 검토 등
처리의견

상기와 같이 결정 되었음을 확인함

2015년 06월 19일

□ 심 사 자

직급	성 명	직급	성 명
6급	이승완	7급	김종필
6급	이문성	7급	유광창