설계변경 심의 요청서

안건번호	제2022- 호
구 분	토목(수도)

공 사 명	2021년-2차 동작,영등포구 관내 상수도시설물설치및 보수공사 설계변경(1회차)

심의일시 : 2022. 4. 6.(수)

심의장소 : 시설관리과(2층) 회의실

요 청 기 관 명	남부수도사업소(시설관리과)
제 출 일	2022년 4월

설계변경 심의 설명서

1. 공사개요

가. 공 사 명: 2021년-2차 동작, 영등포구 관내 상수도 시설물 설치 및 보수공사

나. 공사개요: 제수변정비 180개소, 변실정비 76개소

다. 계약기간: 2021. 12. 23 ~ 2022. 5. 31.

라. 시공업체: ㈜효상토건 대표: 김명식

마. 설계변경금액 : 618,688,680원(2차수 계약 : 618,688,680원)

2. 설계변경 근거

가. 지방자치단체를 당사자로하는 법률 시행령 제74조 제1항

【설계변경으로 인한 계약금액의 조정】

나. 지방자치단체 입찰 및 계약집행기준(예규 제21호) 제 13장

공사계약일반조건 제6절 【공사설계의 변경】

3. 설계변경 사유

가. 현장 시공 여건 변화 및 배수지 유지관리 공사의 특수성으로 물량 증ㆍ감 및

신규비목(공종)이 발생에 따른 설계변경

- 계약물량 증가 : 부단수밸브교체공(D=100mm)외 65종

- 계약물량 감소 : 주철직관(D=600mm) 부설공외 129종

- 신규공종 발생 : 밸브개폐비(D=600mm)외 64종

4. 설계변경 현황

○ 설계변경금액                                                  (단위:원)

구 분	금 액		증 ․ 감
	당 초	변 경
총 계 약 금 액	618,688,680	618,688,680	-
1차 수 계 약	0	0	-
2차 수 계 약	618,688,680	618,688,680	-

5. 조치의견

○ 위와 같이 물량증․감 및 신규공종 발생으로 인하여 변경사항이 발생함에 따라 설계변경 심의위원회 심의결과에 따라 계약의뢰 하고 붙임내역과 같이 설계변경을 시행코자 합니다

따로붙임 : 1. 설계변경 내역서 1부.

2. 설계변경 심의 의결서 1부. 끝.

설계변경 심의 의결서

○ 공 사 명 : 2021년-2차 동작,영등포구 관내 상수도시설물 설치및 보수공사(1회차)

○ 상기 공사시행 중 현장여건 변화에 따른 물량증․감 및 신규공종이 발생하여 붙임과 같이 설계변경 적정성 여부를 심의하여 의견을 제시하고 의결함.

□ 심의위원회 의결내용 : 본안통과, 보류, 부결, 기타

구 분	직 위	성 명	의 견	확 인	비고
위 원 장	시 설 관 리 과 장	조임남
위 원	급 수 운 영 팀 장	서규석
위 원	급 수 관 리 팀 장	류태현
위 원	시 설 운 영 팀 장	김선호

간 사	시 설 관리 팀 장	이승영

2022.  4.  6.

업무담당자 : 시 설 관 리 과   성명 : 차 승 환 (인)

시 설 관 리 과   성명 : 조 익 승 (인)