설계변경 심의 요청서

접수번호	제 호

공사명	2016년 남부관내 상수도 긴급누수복구공사 (장기계속 단가계약) - 제1회 설계변경

심의일시 : 2016년 6월  일

심의장소 : 시설관리과

따 로 붙 임  : 1) 설계변경 설명서 1부

2) 변경 설계서 1부

남부수도사업소

(시설관리과)

설계변경 설명서

□ 공사개요

◦ 공   사  명 : 2016년 남부관내 상수도 긴급누수복구공사

◦ 공 사 개 요 : 누수복구 1,500건   불용(노후)관 150건

◦ 공 사 기 간 : 2016. 4. 28 ~ 2017. 6. 30

◦ 계약 상대자 : 숭일건설 이충언, 한두건걸㈜ 김정화

◦ 도 급 금 액 : 2,939,506,400원

□ 설계변경 세부내용 및 사유

◦ 변경사유 : 공사 시행중 공사현장 여건 변화에 따른 신규공종 발생 및 시공물량 감소(조정) 발생

- 신규공종 : 터파기 2~3m 외 66개 공종

▸ 단가적용 : 설계단가에 낙찰율 적용(86.7%)

- 물량감소(조정) : 보조기층공(분산+지세) 과다품 제외등  4개 공종

◦ 금액변경 내용(도급비)

구 분	당 초	변 경	증·감	비 고
계(총차수)	2,939,506,400	2,939,506,400	-	변동없음

□ 설계변경 근거 : 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률

시행령 제74조(설계변경으로 인한 계약금액 조정)

붙임 : 설계변경 및 적용단가 산출내역서1부. 끝.

설계변경 사전심의 의결서

○ 공 사 명 : 2016년 남부관내 상수도 긴급누수복구공사 - 제1회

○ 공사 중 현장여건 변화에 따른 신규공종, 물량증감 사항 발생으로 붙임과 같이 설계 변경하고자 하오니 적정성 여부를 심의하여 주시기 바랍니다.

○ 심의 의결 내용 : 본안 통과,  보류,  부결,  기타

구 분	직 위	의 견	확 인
위 원 장	시 설 관 리 과 장
위 원	급수운영과 이경희
위 원	급수운영과 강동길
위 원	급수운영과 강동철
간 사	시설관리과 김대성

○ 설계변경에 따른 수급자 의견 :

숭일건설  대표 이충언 (인)

입회자 :  업무담당                     시설6급     성명 : 서 규 석  (인)

시공감독                     부  장     성명 : 이 준 동  (인)

현장대리인                               성명 : 윤 양 원  (인)