공사 설계변경(1차) 심의 요청서

안건번호	제2014 - 호
구 분	토 목

공 사 명	2014년 반포1동외 10개동 상수도 공사 (장기계속단가계약)

☞ 심의일시 : 2014. 12. 12(금) 15:00

☞ 심의장소 : 사업소(4층) 시설관리과

요 청 기 관 명	강남수도사업소(시설관리과)
제 출 년 월 일	2014년 12월 12일

설계변경(1차) 심의 설명서

공 사 개 요

❍ 공  사  명 : 2014년 잠원동외 10개동 상수도공사(장기계속단가계약)

❍ 공 사 개 요 : 당초 - D=15 ~ 300㎜, L=1,483m

변경 - D=15 ~ 300㎜, L=1,483m

❍ 도 급 기 간 : 2014. 07. 01. ~ 2015. 06. 30.

❍ 도  급  비 : 금551,501,000원

❍ 계약상대자 : 원아공영(주) 대표 김용원

설계변경 세부내용 및 사유

❍ 설계변경 근거

- 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제74조

❍ 신규공종 및 물량증감 사유

- 반포1동외 10개동에서 발생되는 민원신청에 의한 급수공사와 노후상수도관 개량 및 유수율관련 업무를 신속히 처리하기 위하여 시행하는 연간단가계약 공사로 3년간의 시행 물량을 평균하여 추정설계 하였으나 현장여건 변동에 따라 신규공종 및 공종별 계약물량 증 ․ 감 사항이 발생.

❍ 단 가 적 용

- 신규공종 : 산출단가에 계약시 적용된 낙착율을 곱한 단가 적용

- 물량증가공종 : 계약단가 적용

❍ 계약 물량증가공종

- 인력 터파기 (견질토사 0-1m)외 63개 공정

❍ 계약물량 감소공종

- 콘크리트 포장절단(100~150mm 적용)외 77개 공정

❍ 신공종 발생사항

- 없음

설계변경 금액내역                                       (단위 : 원)

구 분	당초 금액	변경 금액	비 고
총부기 금액	551,501,000	551,501,000
공 급 가 액	501,364,546	501,364,546
부가 가치세	50,136,454	50,136,454

따로붙임 : 설계변경(4차 최종)내역서 1부.  끝.

설계변경 심의의견서

공 사 명

❍ 공 사 명 : 2014년 반포1동외 10개동 상수도공사 (장기계속단가계약)

심의위원회 의견

❍ 심의일시 : 2014. 12. 12(금) 15:00

❍ 심의의견 : 설계변경에 따른 사전심의 결과 다음과 같이 의견을 제시함

구 분	직 위	의 견	확 인
위 원 장	시설관리과장 송근호
위 원	시설관리과 윤복철
위 원	시설관리과 이춘기
위 원	시설관리과 이재윤
위 원	시설관리과 권기섭