설계변경(2차1회) 요약서

○ 설계변경 사유 : 수량증감에 따른 공사비 조정 및 공사기간 변경

- 계약기간 : 당초(2014.02.21~2015.02.20) 변경(2014.02.21~2014.12.20)

- 계약금액 : 변경없음(1,127,000천원)

○ 주요 변경내용

(단위 : 천원)

공 종	변 경 내 용	공 사 비		비 고
	- 공사기간 변경 : 당초 2014.02.21~2015.02.20 : 변경 2014.02.21~2014.12.20		-
간접공사비	- 계약내역조정 : 4대보험외 이윤 조정	감)	37,837
직접공사비	- 수량조정에 따른 내역조정 : 구조물공 및 옹벽공 수량(감) : 마감공사 및 도로시설공 수량(증)	증)	37,837
계			-

○ 공사비 증•감 내역

(단위 : 원)

구 분	당 초	변 경	증•감		비 고
구조물공	265,591,449	245,834,065	감)	19,757,384
가시설공	75,865,604	80,650,263	증)	4,784,659
옹벽공(제외지)	290,814,356	267,014,446	감)	23,799,910
구조물마감공사	-	47,900,877	증)	47,900,877
도로시설공	40,559,947	69,865,949	증)	29,306,002
부대공사	29,543,332	28,946,886	감	596,446
직접공사비	702,374,688	740,212,486	증)	37,837,798
제 경 비	322,170,767	284,332,969	감)	37,837,798
공 급 가 액	1,024,545,455	1,024,545,455		-
부가가치세	102,454,545	102,454,545		-
도 급 비	1,127,000,000	1,127,000,000		-