제8차 설계변경 자문회의(소위원회)심의지적사항 조치결과

□ 공사명 : 월드컵대교 건설공사                         부서: 토목부

(단위:천원)

연번	자문안건	설계변경유형	자문요청금액 (A)	절감액 (B)	최종반영금액 (C=A-B)
1	북단IC 교통소통대책 변경으로 인한 Ramp-F 신설 실정보고	①정책, 계획 등 사업계획 변경	167,177	증272	167,449
2	북단IC Ramp-F 신설로 인한 보강토옹벽 실정보고	①정책, 계획 등 사업계획 변경	70,350	-	70,350
3	포장공 관급자재 【아스콘포장 중간층】설계누락분 실정보고	⑥설계도서 누락, 오류, 상호모순 등	315,518	-	315,518
4	양화대교 P13 수상구간 조사 및 하상잔재물 처리비 실정보고	기타	60,362	감 550	59,812
5	북단IC 횡단배수관 변경설계 실정보고	⑥설계도서 누락, 오류, 상호모순 등	168,382	-	168,382
6	북단IC L형옹벽 및 보강토옹벽 뒷채움 잡석 설계누락분 반영 실정보고	⑥설계도서 누락, 오류, 상호모순 등	65,779	감 3,000	62,779
7	북단IC D구간 지하지장물 (강관 D1500)구간 대안공법 및 가시설 실정보고	⑥설계도서 누락, 오류, 상호모순 등	61,372	-	61,372
8	북단 매립폐기물 처리방법 변경 실정보고	④ 현장여건 상이 ⑦ 공법변경	감982,400	-	감982,400
계			감73,460	감3,278	감76,738

※ 자문요청금액은 자문회의 요청서의 안건별 증․감액임

※ 설계변경 유형

① 정책, 계획 등 사업계획 변경  ② 민원해결, 보수,보강 ③ 문화재 및 지장물 이설

④ 현장여건 상이 ⑤ 유지관리, 사용부서 요구 ⑥ 설계도서 누락, 오류, 상호모순 등

⑦ 공법변경 ⑧ 제도, 기준변경 ⑨ 유관기관 사전협의 미흡

자문건명	지적사항	조치결과	요구 증감액(천원)	절감액	증감사유		비고
					주요공종	사 유
1.북단IC 교통소통대책 변경으로 인한 Ramp-F 신설 실정보고	P142 L형측구 압축강도 24MPa적용 검토바람(도시철도 토목부-6449 도로L형측구 품질향상 방안 참조)	관련지침에 따라 관급레미콘 강도변경 【21MPa → 24MPa】	167,177	272	배수공	관련지침반영	#1
	P168횡배수관 서라운딩 재검토바람(기준 토피 6m이상,포장층에 위치적용)관보호 콘크리트 압축강도 21MPa 적용바람(국도건설공사 설계실무요령 참조)	관련지침에 따라 관급레미콘 강도변경 【16MPa → 21MPa】
2.북단IC Ramp-F 신설로 인한 보강토옹벽 실정보고	보강토옹벽 검토1안,2안 비교검토중 토공사 비용 고려 및 부지 축소에 따른 영향고려 하여 재검토 요망	-토공사 비교완료 -토공부분 조경조성 협의중	70,350	-	배수공	-	#2
	P389 절성토 경계부 지하배수 고려하여 보강토옹벽 배면에 유공관 설치하여 지하배수 원활토록 검토바람.	-유공관 반영					#3
3.포장공 관급자재 【아스콘포장 중간층】설계누락분 실정보고	-	-	315,518	-	-	-	-
4.양화대교 P13 수상구간 조사 및 하상잔재물 처리비 실정보고	P532기타장비 공종단가를 1,000,000원으로 적용하여야 하나 1,500,000원으로 명기하여 적용하였는바 검토필요함	감액조치 (1.5백만원→1.0백만원)	60,362	△550	수상부대공	집계오류	#4
5.북단IC 횡단배수관 변경설계 실정보고	P729 관보호 콘크리트 규격 25-18-8로 적용하였으나, 국도건설공사 실무요령에 의거 설계기준강도 21MPa 골재최대치수 40m/m 적용검토 바람	-관련지침에 의거 현장실시공시 21MPa 반영 -관련지침에 따라 거푸집양측면1/5이하로 25m/m적용함. ·거푸집 측면거리 : 150mm ·골재최대치수 : 150/5=30mm → 30m/m이하 적용	168,382	-	배수공	-	#5 #6
	P630 폐기물 상차공종 P637단가 산출서상에는 누락되어 있으니 보완이 필요	기존단가 적용공종					-
	P638일위대가 목록표와(맨홀설치 공종)P641~642일위대가표상의 단가가 상이하므로 검토필요	수식 오류로 수정완료					#7
6.북단IC L형옹벽 및 보강토옹벽 뒷채움 잡석 설계누락분 반영 실정보고	뒷채움재의 내역서 및 수량산출서가 상이하여 재검토 요망(SB-2,골재 25m/m의 명칭포함)	-수량재산정 -명칭변경 (잡석→뒷채움골재25m/m)	65,779	△3,000	배수공	공제수량 재산정	#8
	P838 수량산출서상 속채움 및 뒷채움 수량확인 검토바람 (속채움 수량산출시 블록에 대한 체적 공제바람)
7.북단IC D구간 지하지장물 (강관 D1500)구간 대안공법 및 가시설 실정보고	지하지장물(강관Ø1500)구간 대안공법의 보강구조물 시공중 발생할수 있는 가설중 초기하중,하중변화,완공후 차량재하,장기하중에 대한 구조안전성 검토서 보완 요망	보완완료	61,372	-	-	-	#9
8.북단 매립폐기물 처리방법 변경 실정보고	Page1507견적비교표 중 계근대임대항목 공종에 대하여 견적처리 하였는바, 비교견적을 보완필요함	보완완료	-982,400	-	-	-	#10
	Page1523 R-A,R-C 되메우기 수량과 Page 1524,1526상의 수량이 상이하므로 보완필요	보완완료		-	-	-	#11

□ 자문결과 안건별 지적사항 조치결과