설계변경 자문회의 지적사항 조치결과(제16차)

□ 공사명 : 서초역~방배로간 도로개설공사           부서: 방재시설부

연번	자문안건	설계변경유형	자문요청금액 (A)	절감액 (B)	최종반영금액 (C=A-B)
1	터널 숏크리트 생산을 위한 현장 배치플랜트 설치	설계도서 누락, 현장여건 상이	증 702,879천원	감 604천원	증 702,275천원
2
3

※ 자문요청금액은 자문회의 요청서의 안건별 증․감액임

※ 설계변경 유형

① 정책, 계획 등 사업계획 변경  ② 민원해결, 보수,보강 ③ 문화재 및 지장물 이설

④ 현장여건 상이 ⑤ 유지관리, 사용부서 요구 ⑥ 설계도서 누락, 오류, 상호모순 등

⑦ 공법변경 ⑧ 제도, 기준변경 ⑨ 유관기관 사전협의 미흡

□ 자문결과 안건별 지적사항 조치결과

자문건명	지적사항	조치결과	요구액	절감액	증감사유
					주요공종	사 유
터널 숏크리트 생산을 위한 현장 배치 플랜트 설치	○강섬유보강 숏크리트로 변경 적용시 당초 숏크리 트의 와이어매쉬 반영여부 확인하기 바람 ○관정설치비 견적서에 4대 보험료 및 공과잡비 등 계상되어 제경비 이중계상 여부 확인하기 바람(P82)	○당초 설계시 숏크리트의 와이어매쉬 미반영, 설계 도면에도 강섬유보강 숏크리트로 명기되어 있음 (첨부 #1 참조) ○관정설치비 견적서의 4대 보험료 및 공과잡비는 당초 에도 공사비에 미계상 되어 있었으나, 이중계상 되어 있는 간접공사비는 삭제함 ⇒단가산출서 수정 후 설계변경시 반영함 (첨부 #2 참조)	증 702,879천원	감 604천원	터널공	관정설치비에 이중계상 되어있는 간접공사비 삭제

※ 주요공종

- 토공, 가시설공, 구조물공, 포장공, 교량공, 터널공, 차선도색, 부대공 등